DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0074/2021/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: 	Petr Korč, primátor
IČ:  				00296643
DIČ: 				CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: 	xxxx/ xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 		w4wbu9s
tel.: 				558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxx / e-mail: xxxxxxxxx 
xxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxx /e-mail: xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx – technik investičního odboru
Tel: xxxxxxxxxx/ e-mail: xxxxxxxxxxxx 
•	dále jen objednatel
a

SG STAVBY s.r.o.
se sídlem Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2
za kterou právně jedná: 	Jiří Gančarčík, jednatel
IČ:				02166283
DIČ: 				CZ02166283
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl C, vložka číslo 216171
bankovní spojení/číslo účtu: 	xxxxxxxx/ xxxxxxxxx
ID datové schránky: 		6j62m87
tel.:				xxxxxxxxxxx
Kontaktní osoby ve věcech technických:
				xxxxxxxx, 
				tel: + 420 xxxxxx / e-mail: xxxxxxxxxxx  

•	dále jen zhotovitel

•	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Domov pro seniory 28. října – společenské prostory – IV.“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.	Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 01.02.2021 na stavební práce pod názvem „Domov pro seniory 28. října – společenské prostory – IV.“

1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné stavební práce v rozsahu změnového listu č. 2, které obnášejí změnu počtu a rozměrů venkovních žaluzií dle skutečného zaměření, změna v umístění elektro rozvaděče. Podrobnosti změn a jejich vyčíslení jsou popsány ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.

1.2 . Původní článek č. 3 Doba, místo plnění se upravuje o následující ujednání: 
Termín dokončení díla se prodlužuje o 41 dnů, tj. lhůta výstavby je celkem 161 dnů od předání a převzetí staveniště

1.3. Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 

	CENA DÍLA BEZ dph	DPH 15 %	Cena včetně DPH	
Cena dle smlouvy	5 737 130,15 Kč	860 569,52 Kč	6 597 699,67 Kč	
Dodatečné práce
dle dodatku č. 1	269 135,70 Kč	40 370,36 Kč	309 506,06 Kč	
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	-57 097,40 Kč	8 564,61 Kč	-65 662,01 Kč	
Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 1	212 038,30 Kč	31 805,75 Kč	243 844,05 Kč	
Cena dle dodatku č. 1	5 949 168,45 Kč	892 375,27 Kč	6 841 543,72 Kč	
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 2	89 000,00 Kč	13 350,00 Kč	102 350,00 Kč	
Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 2	- 32 000,00 Kč	- 4 800,00 Kč	- 36 800,00 Kč	
Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 2	57 000,00 Kč	8 550,00 Kč	65 550,00 Kč	
Cena díla dle dodatku č.  2	6 006 168,45 Kč	900 925,27 Kč	6 907 093,72 Kč	

1.4. Přípustnost změn 
Uvedené stavební práce jsou nezbytné a účelné, jejichž provedení je požadováno objednatelem ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ* jako nepodstatná změna závazku, neboť neprovedení těchto dodatečných prací v uvedeném rozsahu by následně došlo k nevhodnému propojení elektrických rozvodů a nevhodnému oslunění pobytových prostor.
* Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací dle změnového listu č. 1 a č. 2 představuje 7,8 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.
Celková hodnota dodatečných prací ve výši 89 000,00 Kč bez DPH po odečtení hodnoty neprováděných prací ve výši 32 000,00 Kč bez DPH představuje nárůst ceny o 57 000,00 Kč bez DPH, tj. nárůst o 0,99 % z celkové ceny díla dle smlouvy.   

2. Závěrečná ujednání
1.	Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2.	Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 85. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 24.08.2021.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání
5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

    Za objednatele:			                             za zhotovitele:
    ve Frýdku-Místku, dne                                                v Třinci, dne

    _________________________		                 __________________________
                  Petr Korč		                                                    Jiří Gančarčík                     
                  primátor                                                                     jednatel 

Přílohy dodatku:
1.	změnový list č. 2
2.	rekapitulace dle § 222 ZZVZ