Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. S/0287/2021/IO
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx/ xxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxx – vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxx / email: xxxxxxx 
xxxxxxxxx -  technik investičního odboru
tel: xxxxxxx/ xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxx	
xxxxxxxxxxx, technik  IO
tel: xxxxxxxxx/ email: xxxxxx

-	dále jen objednatel

a

LB 2000, s.r.o. 
se sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
zastoupena Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem
IČ: 64618081
DIČ: CZ64618081
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 14167
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx, xxxxxxxxx
ID datové schránky: veihwuy
Kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx, 
tel: + 420 xxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel
-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).
 
1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy 
o dílo č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice“.

1.1	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:
- 	ve změně použitého materiálu na potrubí gravitační kanalizaci včetně montáže tohoto potrubí
Předmět plnění se upravuje o neprováděné práce spočívající:
-	v odpočtu položek týkajících se změny materiálu potrubí gravitační kanalizace, tj. dodávka a montáž potrubí
-	v odpočtu veškerých položek objektu SO 02 Vodovod, přeložky
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1 a 2 viz příloha č. 2 tohoto dodatku. 

1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč	

Cena sjednaná v SoD pro část 1 
	11.107.787,75	2.332.635,43	13.440.423,18	

Cena sjednaná v SoD pro část 2
	849.604,86	178.417,02	1.028.021,88	
Cena sjednaná v SoD celkem 	11.957.392,61	2.511.052,45	14.468.445,06	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1 pro část 1	-1.960.623,72	- 411.730,98	-2.372.354,70	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 pro část 1	732.397,12	153.803,40	886.200,52	
Celkové snížení ceny dle Dodatku č. 1 pro část 1	-1.228.226,60	-257.927,59	-1.486.154,19	
Cena díla dle Dodatku č. 1 pro část 1	9.879.561,15	2.074.707,84	11.954.268,99	

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1 pro část 2	- 69.738,65	- 14.645,12	- 84.383,77	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 pro část 2	106.304,42	22.323,93	128.628,35	
Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 1 pro část 2	36.565,77	7.678,81	44.244,58	
Cena díla dle Dodatku č. 1 pro část 2	886.170,63	186.095,83	1.072.266,46	
Celkové snížení ceny díla dle Dodatku č. 1 pro část 1 a 2	-1.191.660,83	-250.248,78	-1.441.909,61	
Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem	10.765.731,78	2.260.803,67	13.026.535,45	

1.3.	Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), tím, že:
Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnových listů č. 1 a 2 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto odchylky nutných změn materiálů, resp. postupů a odpočet prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu neprováděných 
a dodatečných prací dle změnových listů č. 1 a 2 činí 2 869 063,70 Kč bez DPH, což představuje 23,99 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

5.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 85. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 24.08.2021.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 a 2
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 

    Za objednatele:					Za zhotovitele:

    _________________________			__________________________
    Petr Korč						Ing. Tomáš Svetko
    primátor                                                           jednatel společnosti LB 2000 s.r.o.