DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0706/2020/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: 	Petr Korč, primátor
IČ:  				00296643
DIČ: 				CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: 	xxxxxxxxxx/ xxxxx
ID datové schránky: 		w4wbu9s
tel.: 				558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxx / e-mail: xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxx /e-mail: xxxxxxxxxxx 
 
•	dále jen objednatel
a

OSBAU s.r.o.
se sídlem Přespolní 1377, 735 14 Orlová Poruba
za kterou právně jedná: 	Tomáš Hrtánek, jednatel
IČ:				02117436
DIČ: 				CZ02117436
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka číslo 57221
bankovní spojení/číslo účtu: 	xxxxxxx/ xxxxxxxxxx
ID datové schránky: 		xtt6yn
tel.:				xxxxxxxxxx
Kontaktní osoby ve věcech technických:
				xxxxxxxxxx, 
				tel: xxxxxxxxx / e-mail: xxxxxxxx

•	dále jen zhotovitel

•	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Úprava objektu Radniční 13 na kancelářské prostory“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.	Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 25.01.2021 na stavební práce pod názvem „Úprava objektu Radniční 13 na kancelářské prostory“.

1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnového listu č. 9, 10, 11, 12, 13, které obnášejí dodávku a montáž vnitřních dveří dle celkového skutečného rozsahu, doplnění nábytku pro 2 pracovní místa a potřebného počtu konferenčních židlí, doplnění elektro rozvaděče pro jištění klimatizací v samostatném okruhu, změnu izolantu ve skladbě zateplení střechy z důvodu funkční montáže, doplnění dlažby v suterénu objektu, doplnění zatepleného výlezu na střechu. Podrobnosti změn a jejich vyčíslení jsou popsány ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

1.2. Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
	
Cena bez DPH
	DPH 21%	Cena včetně DPH	
Cena díla dle SoD	14 467 992,23 Kč	3 038 278,37 Kč	17 506 270,60 Kč	
Dodatečné práce            dle dodatku č. 1	259 174,86 Kč	537 426,72 Kč	3 096 601,58 Kč	
Neprováděné práce       
dle dodatku č. 1	-869 653,08 Kč	-182 627,15 Kč	-1 052 280,23 Kč	
Cena díla dle dodatku č. 1	16 157 514,01 Kč	3 393 077,94 Kč	19 550 591,95 Kč	
Dodatečné práce dle dodatku č. 2	670 274,20 Kč	140 757,58 Kč	811 031,78 Kč	
Neprováděné práce dle dodatku č. 2	-195 940,22 Kč	-41 147,44 Kč	-237 087,66 Kč	
Cena díla dle dodatku č. 2	16 631 847,99 Kč	3 492 688,08 Kč	20 124 536,07 Kč	

1.3. Přípustnost změn
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 2 naplňují podmínky § 222 ZZVZ. Dle dodatku č. 2 naplňují dodatečné práce a neprováděné práce:
a)	dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ*, a to v rozsahu dle změnových listů č. 9, 11 a 13 , když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 24,12 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50% oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 12,12 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. 
* Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, 
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Je skutečností, že podkladovou projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) zpracovala autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jako odborně způsobilá osoba, které přísluší vykonávat tuto tzv. vybranou činnost ve výstavbě ve smyslu § 156 odst. 1, odst. 2 písm. h) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.  Uvedeným způsobem zadavatel vyhověl veřejnoprávním předpisům a taktéž požadavkům na obsah zadávací dokumentaci pro stavební práce ve smyslu § 92 zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ ve spojení s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Projektová dokumentace představuje pokyn zadavatele ve smyslu ust. § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve vztahu ke zhotoviteli, podle kterého se má řídit a stavbu provést. V souladu se smlouvou a tímto ustanovením § 2594 upozornil zhotovitel na nevhodné řešení stavebních prací s návrhem změn, a to postupem, jak předvídá smlouva:
b)	dílem režim přípustné změny deminimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ**, a to v rozsahu dle změnových listů č. 10 a 12, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelem vymíněných dodatečných a neprováděných prací prací činí 5,57 %,  tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla,  
** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 2 v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací představuje 5,57 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatků č. 2 v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací představuje 24,12 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 12,12 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.
Dle dodatku č. 2 celková cena dodatečných stavebních prací (cena více prací) činí 670 274,20 Kč bez DPH, což představuje 4,63 % z ceny dle smlouvy.
Dle dodatku č. 2  celková cena neprováděných prací (cena méně prací) činí
-195 940,22 Kč bez DPH, což představuje 1,35 % z ceny dle smlouvy.

Po započtení neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 3,28 %.

2. Závěrečná ujednání
1.	Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2.	Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 88. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 12.10.2021.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání
5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy dodatku:
1.	Změnové listy č. 9, 10, 11, 12, 13
2.	Rekapitulace dosud provedených změn

    Za objednatele:			                              za zhotovitele:
    ve Frýdku-Místku, dne                                               v Orlové - Porubě, dne

    _________________________		                 __________________________
                  Petr Korč		                                                 Tomáš Hrtánek                     
                  primátor                                                                   jednatel