DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č.  S/0261/2021/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxx/ xxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxx / email: xxxxxxxx
xxxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxx 

-	dále jen objednatel

a 

společnost s názvem „Hybner – sdružení“
vedoucí společník
Zdeněk Hybner
se sídlem Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ: 15495809
DIČ: CZ5812011304
zapsána v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Ostravy
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx/xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
ID datové schránky: 974a2yd
Tel: + 420 xxxxxx
e-mail: xxxxxxxxx
druhý společník
Ing. Martin Hybner
se sídlem E. Rošického 1064/7, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ: 04003993
zapsána v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Ostravy
e-mail: xxxxxxxxxx
Kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx,
tel: +420 xxxxxxxxx / email: xxxxxxxx
xxxxxxxxxx,
tel: +420 xxxxxxxx / email: xxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. S/0261/2021/IO ze dne 31.05.2021 k veřejné zakázce „Dům čp. 689, ul. Anenská – rekonstrukce a oprava vnitřních instalací“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy 
o dílo č. S/0261/2021/IO ze dne 31.05.2021 na stavební práce pod názvem „Dům čp. 689, 
ul. Anenská – rekonstrukce a oprava vnitřních instalací“.

1.1	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:
-	v dodání a osazení trojbokých odboček včetně redukcí na svislé odpadní potrubí – 60 ks
-	v dodávce a osazení kulových kohoutů před vodoměry v bytech – 60 ks
-	v úpravě rozvodů vody ke klozetům v každém bytě
-	v úpravě ventilačních komor na střeše
-	v opětovném osazení stávajících klozetů – 26 ks
-	v dodávce klozetu pro invalidy
-	v instalaci chemických WC
-	v dodatečných elektromontážních pracích
Předmět plnění se upravuje o neprováděné práce spočívající:
-	v odpočtu prací za opravu vnitřního střešního svodu
-	v odpočtu čistících kusů na kanalizačním potrubí v každém bytě – 60 ks
-	v odpočtu 26 ks nedodávaných kombi klozetů včetně sedátek a včetně montáže
-	v odpočtu neprováděných prací na ventilačních komorách na střeše
-	v odpočtu vedlejších rozpočtových nákladů nad rámec skutečnosti
 
Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 1 viz příloha č. 2 tohoto dodatku.

1.2	Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	CENA DÍLA BEZ dph	DPH 15 %	Cena včetně DPH	
Cena dle SoD	5 458 256,00 Kč	818 738,40 Kč	6 276 994,40 Kč	
Dodatečné práce 
dle dodatku č. 1	254 791,03 Kč	38 218,66 Kč	293 009,69 Kč	
Neprováděné práce 
dle dodatku č. 1	-148 047,66 Kč	- 22 207,15 Kč	- 170 254,81 Kč	
Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 1.	106 743,37 Kč	16 011,51 Kč	 122 754,88 Kč	
Cena 
dle dodatku č. 1	5 564 999,37 Kč	834 749,91 Kč	6 399 749,28 Kč	

1.3	Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Dle dodatku č. 1 naplňují dodatečné práce a neprováděné práce režim přípustné změny deminimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ*, a to v rozsahu dle změnového listu č. 1, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku těchto dodatečných a neprováděných prací činí 7,38 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně díla. 
* Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro tuto veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Rozpis a dodržení limitu je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 1 tohoto dodatku. 

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení 
§ 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění 
dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
5.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení  
a objednatel 1 vyhotovení.
6.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 90. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 09.11.2021.

Přílohy smlouvy:
příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn 
příloha č. 2 – Změnový list č. 1
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku, dne:		V Ostravě, dne:

________________		__________________________		
Petr Korč		Zdeněk Hybner	Ing. Martin Hybner
primátor       		vedoucí účastník	druhý účastník
		sdružení	sdružení