DODATEK Č. 7

SMLOUVY O DÍLO Č. S/0449/2020/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxx/ xxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxx – stavební technik
tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxx 

-	dále jen objednatel

a

MORYS s. r. o. 
se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem
                   na základě plné moci ze dne 09. 12. 2021 
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 1504
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxx
ID datové schránky: 2tcnqr9
tel/e-mail: xxxxxxxxxx/ xxxxxxxxx
zástupce ve věcech technických: 
xxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 7 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111“ následujícího znění a obsahu.

1.	Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 05.08.2020 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111“.

1.1.	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce, ke kterým došlo z objektivních důvodů dle skutečnostem vzniklým během realizace díla a objednatel, ačkoli jednal s náležitou péčí, nemohl tyto skutečnosti předvídat:
a)	V průběhu realizace provádění díla vznikly objektivní důvody pro úpravu prvků interiéru, a to na základě požadavků objednatele a provozovatele knihovny:
a1) doplnění HDMI zásuvek, které jsou nutné pro zapojení počítače, ze kterého bude vysíláno video (1x zásuvka na zdi), dále zásuvky pod stropem v místě dataprojektoru pro jeho samotné zapojení (1x zásuvka pod stropem) – toto vše nebylo součástí PD a VV.
a2) Kuchyňky-předělávky zásuvek pro napojení ledniček. Jedná se o posunutí nevhodně umístěných elektro zásuvek dle PD (ve výšce 1,2m) do  výšky pod kuchyňskou linkou (pod 0,9m) tak, aby po zabudování lednice nebyla zásuvka s připojeným kabelem vidět.
a3) LED Osvětlení ve vitrínách – doplnění osvětlovacího zařízení dle dodatečného požadavku uživatele – m.č.1.17 – nebylo součástí PD a VV.
a4) Zásuvka pro průtokový ohřívač 1PP – dodatečně přívod elektroinstalace v 1.PP pro nově požadovaný ohřívač na vodu – nebylo součástí PD a VV
Dodatečné práce a dodávky jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 27.

b)	V průběhu realizace provádění díla je nutné doplnění zákrytových konstrukcí z SDK, pro zakrytí rozvodů zdravotně technických instalací, rozvodů ústředního vytápění a silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace. Práce zahrnují tyto konstrukce "kastlů" a podhledů nad rámec smlouvy o dílo a výkazu výměr, přičemž je nezbytné jejich provedení. Celková plocha dodatečných konstrukcí „kastlů“ činí 52,67 m2. Celková plocha dodatečných konstrukcí podhledů činí 15,90 m2.
Dodatečné práce a dodávky jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 28.

c)	V průběhu realizace provádění díla vznikly objektivní důvody pro úpravu prvků interiéru, a to na základě požadavků objednatele a provozovatele knihovny. Jedná se o:
1) Stojan na knihy - volné regály 2-4.NP typ A, rozměry 300*210*150mm…celkem 35ks
c2) Stojan na knihy - volné regály 2-4.NP typ B, rozměry 200*420*100mm…celkem 35ks
c3) Cylindrická vložka - nábytek - jedná se o sjednocení zámků (klíčů) dle personálního obsazení knihovny - jednotný klíč pro používané kancelářské vybavení v rámci každého oddělení…celkem 82ks
c4) Dodávku dřevěných regálů s dřevěnými stavitelnými policemi, 550x300x2000mm…celkem 4ks
K méně pracím došlo z důvodů vypuštění některých policových regálů a ostatních prvků interiéru, které se již do daných prostor umístit nepodařilo, avšak byly zahrnuty ve výkazu výměr.
Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 29.

d)	V průběhu realizace díla vznikl objektivní požadavek na změnu místa osazení 5. RFID detekční brány. Tato brána byla v projektové dokumentaci navržena v 2.NP na rozhraní č.p. 111 a 112 a po konzultaci z uživatelem bude posunuta k dveřím do schodišťového prostoru objektu 112. Tímto umístěním bude dosaženo ochrany knižního fondu v 2.NP objektu č.p.112. Tato brána je rovněž dodatečně upravena na montáž přímo na stěnu – ostění vstupu z chodby na 2.NP. K méně pracím došlo z důvodů vypuštění některých policových regálů a ostatních prvků interiéru, které se již do daných prostor umístit nepodařilo, avšak byly zahrnuty ve výkazu výměr.
V oddíle ochrany knižního fondu budou dodány 2 ks licencí softwaru nad rámec výkazu výměr (VV). V projektové dokumentaci a VV bylo uvažováno s osazením celkem 5-ti kusů brán. Ve VV bylo však uvažováno pouze se 3 licencemi softwaru, přičemž 1brána = 1 software.
Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 30.

e)	e1) V průběhu realizace díla vznikl ze strany objednatele a uživatele objektu objektivní požadavek na osazení sklopného zrcadla v místnosti WC invalida. Původně navržené zrcadlo nebylo možné z prostorových důvodu osadit a bylo použito k novému umývadlu v 1.PP. 
e2) K méně pracím patří:
•	Zrušení zástěny v místnosti 3.07, která byla součástí zárubně
•	Zrušení dodávky informačního systému. Objednatel si informační systém nechá dodat v rámci samostatné objednávky.
•	V oddíle zpevněných ploch byla odečtena dodávka a pokládka obrubníků, jejíž množství bylo přesněno při realizaci.
Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 31.

1.2.	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 7 se sjednává v Kč celkem ve výši:
Cena sjednaná ve smlouvě o dílo	37 351 587,30 Kč bez DPH,
tj. 45 195 420,63 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	376 031,61 bez DPH,
tj. 454 998,25 vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 3 495,76 Kč bez DPH,
tj. - 4 229,87  Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 1	37 724 123,15 Kč bez DPH,
tj. 45 646 189,01 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2	2 110 217,60 bez DPH,
tj. 2 553 363,30 vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	- 1 585 026,20 Kč bez DPH,
tj. - 1 917 881,70  Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 2	38 249 314,55 Kč bez DPH,
tj. 46 281 670,61 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3	1 453 633,46 bez DPH,
tj. 1 758 896,49 vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3	- 1 222 849,14 Kč bez DPH,
tj. - 1 479 647,46  Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 3	38 480 098,87 Kč bez DPH,
tj. 46 560 919,64 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4	599 331,44 Kč bez DPH,
tj. 725 191,04 Kč  vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 4	- 147 402,43 Kč bez DPH,
tj. - 178 356,94  Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 4	38 932 027,88 Kč bez DPH,
tj. 47 107 753,74 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 5	911 888,70 Kč bez DPH,
tj. 1 103 385,33 Kč  vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 5	- 740 558,41 Kč bez DPH,
tj. - 896 075,68  Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 5	39 103 358,17 Kč bez DPH,
tj. 47 315 063,39 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 6	631 918,55 Kč bez DPH,
tj. 764 621,44 Kč  vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 6	- 630 138,30 Kč bez DPH,
tj. - 762 467,34  Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 6	39 105 138,42 Kč bez DPH,
tj. 47 317 217,49 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 7	371 634,58 Kč bez DPH,
tj. 449 677,84 Kč  vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 7	- 283 468,30 Kč bez DPH,
tj. – 342 996,64  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 7 po odečtení neprováděných prací dle Dodatku č. 7	88 166,28 Kč bez DPH,
tj. 106 681,20  Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 7	39 193 304,70 Kč bez DPH,
tj. 47 423 898,69 Kč vč. DPH	

1.3.	Přípustnost změn
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 7 naplňují podmínky ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Dle dodatku č. 7 naplňují dodatečné práce a neprováděné práce:
a)	dodatečné stavební práce dle změnových listů č. 27 až 31 naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ** tzv. změnu de minimis, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací prací činí 2,88 %,  tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla,  
** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatků č. 1 až 7 v rozsahu všech dodatečných a neprováděných prací představuje 6,47 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.
Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 7 k důvodové zprávě.
Dle dodatků č. 1 až 7 celková cena dodatečných stavebních prací (cena více prací) činí 6 454 655,94 Kč bez DPH, což představuje 17,28 % z ceny dle smlouvy.
Dle dodatků č. 1 až 7 celková cena neprováděných prací (cena méně prací) činí            - 4 612 938,54 Kč bez DPH, což představuje 12,35 % z ceny dle smlouvy.
Po započtení neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 4,96 %.

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 7, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 95. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 25. 01. 2022.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 7 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 7 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 7 podle tohoto ujednání.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů
Příloha č. 2 – Změnový list č. 27
Příloha č. 3 – Změnový list č. 28
Příloha č. 4 – Změnový list č. 29
Příloha č. 5 – Změnový list č. 30
Příloha č. 6 – Změnový list č. 31
Příloha č. 7 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne…………………….                             	V Ostravě, dne……………………..

_________________________				_________________________
Petr Korč							Ing. Jiří Šmidák
primátor                                                                          výkonný ředitel