Název VZ: Dopravní obsluha lokality Pod Zámečkem – nové komunikace VD14, VD15 – studie
Číslo VZ: P22V00000100

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřena podle dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel.  558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:	
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxx/ xxxxxxxx

•	dále jen objednatel 
 a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupena Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka
10727
č. účtu: xxxxxxxxxx. č.ú.: xxxxxxxx/xxxxxxx
tel: xxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx 

•	dále jen zhotovitel
•	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce „Dopravní obsluha lokality Pod Zámečkem – nové komunikace VD14, VD15 – studie“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1
Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavírají dodatek s vědomím následujících skutečností:
Během realizace zakázky se ukázalo jako žádoucí předmět díla rozšířit, a to proto, aby byly upraveny stávající již dopravně nevyhovující místa a celá lokalita byla řešena komplexněji, obzvláště v situaci, kdy by se v dohledné době nedalo realizovat napojení lokality na dálniční přivaděč D48 kvůli jeho budoucímu převodu ze státu na kraj či z jiných důvodů.
článek 2 
Předmět a rozsah plnění
1.	Předmět díla se rozšiřuje tak, že studie bude doplněna o optimalizaci propojení ul. Mikoláše Alše, Na Výsluní a Černá cesta se silnicí II/477. Bude prověřena možnost napojení ulice Mikoláše Alše přímo na stávající okružní křižovatku na silnici II/477 s vybudováním pátého ramene okružní křižovatky a také navržena vhodná koncepční úprava stávající průsečné křižovatky II/477 x Černá Cesta. Případně bude v rámci studie navrženo jiné technické řešení, které zajistí funkční dopravní řešení a zároveň zvýší bezpečnost dopravy v lokalitě. Studie bude dále rozšířena o koncepční návrh revitalizace ulice Mikoláše Alše.

článek 3 
Doba, místo a další podmínky plnění 
1.	Rozšířené dílo bude nově provedeno a předáno objednateli v těchto dílčích termínech:
a)	předložení rozpracovaného konceptu studie do 45 dnů od nabytí účinnosti dodatku;
b)	předložení konceptu studie projednaného s dotčenými orgány a správci sítí do 45 dnů od doručení připomínek ze strany zadavatele k prezentovanému konceptu studie ad a);
c)	odevzdání čistopisu studie do 30 dnů od předložení projednaného konceptu ad b).

článek 4
	Cena a platební podmínky:
1.	Cena díla se dle tohoto dodatku nově sjednává ve výši:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH	
PŮVODNÍ CENA DÍLA	122 400,00	25 704,00	148 104,00	
NAVÝŠENÍ CENY DLE DODATKU Č. 1	121 000,00	25 410,00	146 410,00	
CELKOVÁ CENA DÍLA	243 400,00	51 114,00	294 514,00	

článek 5
Závěrečná ujednání
1.	Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
2.	O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Frýdku-Místku na 5. schůzi konané 13. 12. 2022. 
3.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění dle tohoto ujednání v registru smluv.

Za objednatele								Za zhotovitele:

__________________				_________________
Petr Korč, primátor			Ing. Martin Vilč,
			předseda představenstva