DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0597/2022/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: 	Petr Korč, primátor
IČ:  				00296643
DIČ: 				CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: 	xxxxxxxxxxx/ xxxxxxxx
ID datové schránky: 		w4wbu9s
tel.: 				558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxx / e-mail: xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxx /e-mail: xxxxxxxxxxxxx

•	dále jen objednatel
a

S-O-D Holding,   spol. s r.o.
se sídlem Polesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné
za kterou právně jedná: 	František Doležal, jednatel
IČ:				26830272
DIČ: 				CZ26830272
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka číslo 40026
bankovní spojení/číslo účtu: 	xxxxxxxx/xxxxxxxxx
zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Petr Kubík, tel.: xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx
zástupce ve věcech technických:
xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxx
                  
•	dále jen zhotovitel

•	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění a obsahu dodatku č. 2 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Výměna oken Žirafa – IC FM“ (dále jen dodatek).

1.	Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy 
o dílo č. S/0597/2022/IO ze dne 22.9.2022 k veřejné zakázce „Výměna oken Žirafa – IC FM“.

1.1	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprovedené práce v rozsahu změnového listu č. 2, který obnáší změnu provedení kotvení kontaktního zateplovacího systému (dále jen KZS) s ohledem na stav nedostatečného kotvení stávajícího KZS.  

1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	CENA DÍLA BEZ dph	DPH 21 %	Cena včetně DPH	
Cena dle SoD	7 777 888,00 Kč	1 633 356,48 Kč	9 411 244,48 Kč	
Dodatečné práce 
dle dodatku č. 1	193 984,05 Kč	40 736,65 Kč	234 720,70 Kč	
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	 - 38 202,50 Kč	- 8 022,53 Kč	- 46 225,03 Kč	
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 1	155 781,55 Kč	32 714,12 Kč	188 495,67 Kč	
Dodatečné práce 
dle dodatku č. 2	1 979 245,39 Kč	415 641,53 Kč	2 394 886,92 Kč	
Neprováděné práce dle dodatku č. 2	- 1 428 368,86 Kč	- 299 957,46 Kč	- 1 728 326,32 Kč	
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 2	550 876,53  Kč	115 684,07 Kč	666 560,60 Kč	
Cena díla dle dodatku č. 2	8 484 546,08 Kč	1 781 754,67 Kč	10 266 300,75 Kč	

1.3.	Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), tím, že:
Dle dodatku č. 2 naplňují dodatečné práce:
a)	dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ* v rozsahu změnového listu č. 2, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje zvýšení ceny oproti původně sjednané ceně díla o 43,81 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 7,08 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla. 

* Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna: 
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 9,09 %.
Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 2 tohoto dodatku č. 2.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 8. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 31.1.2023.

5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 2
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:		          				Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku                                                             	V Petřvaldu u Karviné

_______________________		         			_______________________
Petr Korč                                                                    	František Doležal
primátor                                                                          	jednatel