DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0234/2023/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx/ xxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx – xxxxxxx
tel: xxxxxx / e-mail: xxxxxx 
xxxxxxx – xxxxxxx
tel.: xxxxxxx/e-mail: xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx  – xxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxx/e-mail: xxxxxxxxxx 
-	dále jen objednatel 
a

DEV COMPANY, spol. s r.o.
se sídlem: Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem
IČ: 47679620
DIČ: CZ47679620
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 4298
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx č. ú. xxxxx/xxxx
ID datové schránky: muhpf5v
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Marek Vavrečka, jednatel
zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxx 
tel: xxxxxxxxx / email: xxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0234/2023/IO ze dne 30.03.2023 k veřejné zakázce „Hydroizolace spodní stavby – ZŠ
F-M Lískovec 320 – I. etapa“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

1.  Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0234/2023/IO ze dne 30.03.2023 k veřejné zakázce „Hydroizolace spodní stavby – ZŠ 
F-M Lískovec 320 – I. etapa“.

1.1.	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnového listu č. 1, které obnášejí soupis prací včetně výkazu výměr pro záměnu technologie dodatečné hydroizolace obvodových stěn místností S11 a S24, popsané v soupisu změnového listu.

1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA BEZ dph	DPH 21 %	Cena včetně DPH	
Cena dle SoD	6 809 871,58 Kč	1 430 073,03 Kč	8 239 944,61 Kč	
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	88 678,55 Kč	18 622,50 Kč	107 301,05 Kč	
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	-116 132,90 Kč	-24 387,91 Kč	-140 520,81 Kč	
Celkové snížení ceny dle dodatku č. 1	-27 454,35 Kč	-5 765,41 Kč	-33 219,76 Kč	
Cena díla dle dodatku   č. 1	6 782 417,23 Kč	1 424 307,62 Kč	8 206 724,85 Kč	

1.3.	Přípustnost změn
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ* v rozsahu změnového listu č. 1, který umožňuje záměnu jedné nebo více položek, pokud se jedná o srovnatelný druh materiálu nebo prací, stejnou nebo nižší cenovou úroveň, materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší.
*Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací dle dodatku č. 1 činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě -0,40 %.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 21. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 25.07.2023.

5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 1
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku        					V Ostravě
                                                      
_______________________		                                 __________________________
Petr Korč                                                                          Ing. Marek Vavrečka
primátor                                                                           jednatel