DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0356/2023/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 

Statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
Statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx - xxxxxxxxx
e-mail/tel.: xxxxxxx, tel: xxxxxx

-	dále jen objednatel 
a

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín
zastoupena: Markem Bainarem, jednatelem společnosti
IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C vložka 32897
Č. účtu: xxxxx/xxxx
Tel: xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx 
			
-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0356/2023/IO ze dne 24. 05. 2023 k veřejné zakázce „Zpracování DPS – ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0356/2023/IO ze dne 24. 05. 2023 k veřejné zakázce „Zpracování DPS – ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična“.

1.1	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné projekční práce. V průběhu zpracovávání dokumentace pro provedení stavby vyvstal požadavek na architektonický návrh fasády, doplněný o vizualizace. Bylo provedeno 7 zjednodušených variant, z toho se 2 varianty rozvinuly do 8 barevných pohledů. Na základě potřeby pro lepší představivost byly tyto varianty rozpracovány do 6 ks vizualizací a navíc byl zpracován 3D model pro případné potřeby změny barevnosti. V této věci se uskutečnilo několik konzultací.

1.2     Původní článek 4. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA BEZ dph	DPH 21 %	Cena včetně DPH	
Cena dle SoD	840 000,00 Kč	176 400,00 Kč	1 016 400,00 Kč	
Dodatečné práce na DPS dle Dodatku č. 1	35 000,00 Kč	7 350,00 Kč	42 350,00 Kč	
Cena dle Dodatku č. 1	875 000,00 Kč	183 750,00 Kč	1 058 750,00 Kč	

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 33. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 12. 12. 2023.

5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Příloha:
Cenová nabídka ze dne 27. 11. 2023

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku                                                              Ve Zlíně

_______________________		                                 _____________________        
Petr Korč                                                                          Marek Bainar	
primátor                                                                           jednatel společnosti