Dodatek č. 2
smlouvy o dílo č. S/0296/2023/IO
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 

Statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem 
IČ: 00296643 
DIČ: CZ00296643 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx/ xxxxxxxxxx 
ID datové schránky: w4wbu9s 
tel. 558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
                                                       xxxxxxxxx – xxxxxxxxxx 
                                                       tel: xxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxx	
-	dále jen objednatel

a

NOSTA, s.r.o. 
se sídlem: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín 
zastoupena: Ing. Romanem Chromkem, jednatelem 
IČ: 47671416 
DIČ: CZ47671416 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 5248. 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx, č. ú. xxxxxx 
ID datové schránky: 662qi28 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Roman Chromek, jednatel 
zástupce ve věcech technických: xxxxxx, tel. xxxxxxx, email: xxxxxxx  

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. S/0296/2023/IO ze dne 15. 05. 2023 k veřejné zakázce „Domov pro seniory FM, ul. Školská 401 – rekonstrukce budovy“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0296/2023/IO ze dne 15. 05. 2023 k veřejné zakázce „Domov pro seniory FM, ul. Školská 401 - rekonstrukce budovy“.

1.1	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnových listů č. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21, které obnášejí soupis prací včetně výkazu výměr.
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21 viz příloha č. 1 tohoto Dodatku. 

1.2	Původní článek 3. DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Na základě změnových listů č. 13 a 17 se lhůta pro splnění díla prodlužuje o dobu 30 dnů.

1.3	Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Cena vč. DPH v Kč	

Původní cena díla
	41 468 000,00	6 220 200,00	47 688 200,00	
Cena díla dle Dodatku 
č. 1	41 989 105,41	6 298 365,81	48 287 471,22	
	Cena bez DPH v Kč	Změna výše DPH od 01. 01. 2024
na 12 % 	Cena vč. DPH v Kč	
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2	4 495 545,68	539 465,48	5 035 011,16	
Neprováděné stavební práce dle Dodatku č. 2	- 2 318 960,61	- 278 275,27	- 2 597 235,88	
Celkové zvýšení ceny díla dle Dodatku č. 2	2 176 585,07	261 190,21	2 437 775,28	
Cena díla dle Dodatku 
č. 2	44 165 690,48	6 559 556,02	50 725 246,50	

1.4	Přípustnost změn

Investiční odbor provedl věcně rozdělení dodatečných a neprováděných prací dle pravidel § 222 ZZVZ. Dle Dodatku č. 2 naplňují:
a)	podle § 222 odst. 4 ZZVZ * v rozsahu neprováděných a dodatečných prací dle přiložených změnových listů č. 09, 15 a 16, když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelem vymíněných dodatečných a neprováděných prací činí 3,07 %,  tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně díla.
* Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

b)	dílem režim přípustné změny podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 9** v rozsahu změnových listů č. 08 a 12, když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací po odečtení souvisejích dodatečných a neprováděných prací díla dle § 222 odst. 9 ZZV je v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní sjednané ceně díla;
** § 222 odst. 5 ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou, nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) není možné z ekonomických aneb technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
§ 222 odst. 9 ZZVZ - Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

c)	a dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 9 *** v rozsahu předložených změnových listů č. 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20 a 21, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací po odečtení souvisejích neprováděných prací dle § 222 odst. 9 je v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní sjednané ceně díla. 
*** § 222 odst. 6 ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterém zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
§ 222 odst. 9 ZZVZ - Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

Přípustnost veškerých dodatečných a neprováděných prací dle Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 5, 6 a 9 ZZVZ činí 8,10 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní sjednané ceně díla.

Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací dle Dodatku č. 2 činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 6,51 %.

Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 2 Dodatku č. 2.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

5.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 39. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 26. 03. 2024.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnové listy č. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 

    Za objednatele:		Za zhotovitele:

    _________________________		__________________________
    Petr Korč		Ing. Radim Chromek
    primátor                                                            jednatel