DODATEK Č. 14 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0444/2021/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxx/ xxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx – xxxxxxxx
tel: xxxxx / e-mail: xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxx
tel.: xxxxx/e-mail: xxxxxx
xxxxxx – xxxxxxxxx
Tel: xxxxxx/e-mail: xxxxx
-	dále jen objednatel 
a

IPS Třinec, a.s.  
se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec,
zastoupena Ing. Danielem Pieszkou, předsedou představenstva
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka 4287
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxx, xxxx, xxxxxxxx/xxxx
ID datové schránky: 6ibn7qc
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Daniel Pieszka – předseda představenstva
				
zástupce ve věcech technických:
 xxxxxx – xxxxx, 
 tel: xxxxxx / email: xxxx
 xxxxxx – xxxxxxxxx, 
 tel: xxxxxxxx / email: xxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo č. S/0444/2021/IO ze dne 25.11.2021 k veřejné zakázce „Stavební úpravy domu čp. 1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je vyčíslení skutečných nákladů stavby dle smlouvy o dílo č. S/0444/2021/IO ze dne 25.11.2021 k veřejné zakázce „Stavební úpravy domu čp. 1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie“.

1.1.	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprovedené práce v rozsahu změnového listu č. 65, které obnášejí návaznost na vyčíslení skutečně provedených a fakturovaných stavebních prací, a to v části ASŘ, slaboproudu a zpevněných plochách.

1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 14 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA 
BEZ dph	DPH 21 %	Cena včetně DPH	
Cena dle SoD	51 290 000,00 Kč	10 770 900,00 Kč	62 060 900,00 Kč	
cena díla v rozsahu prováděných a neprováděných prací dle Dodatků č. 1 až 13 smlouvy o dílo	65 675 697,18 Kč	13 791 896,41 Kč	79 467 593,59 Kč	
Skutečná cena díla v rozsahu vyúčtování dle dodatku č. 14	-1 641 624,48 Kč	-344 741,14 Kč	-1 986 365,62 Kč	
Konečná cena díla dle dodatku č. 14	64 034 072,70 Kč	13 447 155,27 Kč	77 481 227,97 Kč	

Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací dle dodatků č. 1 až 14 činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 24,847 %.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 43. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 21.05.2024.

5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 65 

Za objednatele:						Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku                                                              V Třinci

_______________________		                                 __________________________
Petr Korč                                                                          Ing. Daniel Pieszka
primátor                                                                           předseda představenstva