Dodatek č. 1
Kupní smlouvy č. S/0743/2023/IO
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 

Statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 
osoba oprávněná jednat: Petr Korč, primátor 
IČ: 00296643 
Statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxx/ xxxx 
ID datové schránky: w4wbu9s 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
xxxxxxx – xxxx 
e-mail: xxxxxx / tel: xxxxxx
xxxxxx – xxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxx / tel: xxxxx

-	dále jen objednatel

a

Clean4you s.r.o. 
se sídlem: Hněvotín 573, 738 47 
zastoupena: Milanem Horylem, jednatelem 
IČ: 28618165
DIČ: CZ28618165 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 44537. 
č. účtu: xxxxxx/xxxxxx
tel: xxxxxx 
e-mail: xxxxxxxx, xxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. S/0743/2023/IO ze dne 19. 01. 2024 k veřejné zakázce „Domov pro seniory FM, ul. Školská 401 – rekonstrukce budovy – realizace kuchyňských koutů“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání kupní smlouvy č. S/0743/2023/IO ze dne 19. 01. 2024 k veřejné zakázce „Domov pro seniory FM, ul. Školská 401 - rekonstrukce budovy – realizace kuchyňských koutů“.

1.1	Původní článek 5. CENA PLNĚNÍ se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce v rozsahu změnového listu č. 01, který obnáší nacenění vícenákladů.
Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 01 viz příloha č. 1 tohoto Dodatku. 

1.2	Původní článek 2. DOBA, MÍSTO A DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Montáž kuchyňských koutů má návaznost na realizaci díla s názvem „Domov pro seniory FM, ul. Školská 401 – rekonstrukce budovy“, kde musí být pro osazení kuchyňských koutů provedena stavební připravenost, a to finální výmalba, keramické obklady a finální nášlapná vrstva. U rekonstrukce domova pro seniory došlo k posunu dokončení tohoto 
Z důvodu výše uvedeného se lhůta pro splnění díla prodlužuje do 19. 08. 2024.

1.3	Původní článek 5. CENA PLNĚNÍ se upravuje:
Cena díla dle kupní smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 12 % v Kč	Cena vč. DPH v Kč	

Původní cena díla
	372 476,00	44 697,12	417 173,12	
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	21 057,00	2 526,84	23 583,84	
Cena díla dle Dodatku 
č. 1	393 533,00	47 223,96	440 756,96	

1.4	Přípustnost změn

Změna smlouvy dle Dodatku č. 1 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to dodatečné práce včetně termínu dokončení realizace kuchyňských koutů režim přípustné změny dle § 222 odst. 1 ZZVZ*, a to v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele – příloha č. 1 tohoto Dodatku. 

*Dle ust. § 222 odst. 1 ZZVZ platí, že zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení zadávacího řízení; to neplatí v případě změn, u nichž jsou splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení stanovenou tímto zákonem. Je-li taková výjimka omezena pro podlimitní veřejnou zakázku, veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo koncesi malého rozsahu, lze ji pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku použít pouze tehdy, pokud celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit podle
 a) § 25, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku,
 b) § 27, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo
 c) § 178, jde-li o koncesi malého rozsahu.
 
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 1 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu všech doposud dodatečných prací představuje částku 21 057 Kč bez DPH (5,65 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje limit pro zakázku malého rozsahu dle § 222 odst. 1 písm. b) ZZVZ dle ust. § 27 ZZVZ.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

5.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 46. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 25. 06. 2024.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 01

    Za objednatele:				Za zhotovitele:

    _________________________		__________________________
    Petr Korč						Milan Horyl
    primátor                                                            jednatel