DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0330/2024/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx/ xxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxx
tel: xxxx / e-mail: xxxxx
Ing. xxxxxxx – xxxxxxxx
tel.: xxxxxx/e-mail: xxxxxxxx
xxxxxxxx  – xxxxxxx
Tel: xxxxxxx/e-mail: xxxxxxx 
-	dále jen objednatel 
a

DEV COMPANY, spol. s r.o.
se sídlem: Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem
IČ: 47679620
DIČ: CZ47679620
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 4298
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxx, č. ú. xxxx
ID datové schránky: muhpf5v
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Marek Vavrečka, jednatel
zástupce ve věcech technických: xxxxxxx
tel: xxxxxxx / email: xxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0330/2024/IO ze dne 07.05.2024 k veřejné zakázce „Hydroizolace spodní stavby – ZŠ
F-M Lískovec 320 – II. etapa“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

1.  Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o 

dílo č. S/0330/2024/IO ze dne 07.05.2024 k veřejné zakázce „Hydroizolace spodní stavby – ZŠ 
F-M Lískovec 320 – II. etapa“.

1.1.	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce v rozsahu změnového listu č. 1, které obnášejí soupis prací včetně výkazu výměr pro provedení nové trasy dešťové kanalizace před družinou a řešení skutečností zjištěných při realizaci navržených opatření v technické místnosti družiny, popsané v soupisu změnového listu.

1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA BEZ dph	DPH 21 %	Cena včetně DPH	
Cena dle SoD	2 839 818,30 Kč	596 361,74 Kč	3 436 180,14 Kč	
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	211 878,16 Kč	44 494,41 Kč	256 372,57 Kč	
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 1	211 878,16 Kč	44 494,41 Kč	256 372,57 Kč	
Cena díla dle dodatku   č. 1	3 051 696,46 Kč	640 856,25 Kč	3 692 552,71 Kč	

1.3.	Původní článek 3 DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ, odst.2, písm. b) se upravuje takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 30.09.2024 a v této lhůtě jej jako dokončené předat objednateli.

1.4.	Přípustnost změn
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ* ve spojení s ust. § 222 odst. 9 v rozsahu změnového listu č. 2, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí 7,46 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní sjednané ceně díla.
* § 222 odst. 6 ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterém zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
** § 222 odst. 9 ZZVZ - Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.
Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací dle dodatku č. 1 činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 7,46 %.

Objednatel dále konstatuje, že změny smlouvy naplňují dílem vyhrazené změny závazku dle § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 100 odst. 1 ZZVZ a ujednáním článku 3 odst. 12 smlouvy o dílo.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 50. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 20.08.2024.

5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 1
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku        					V Ostravě
                                                      
_______________________		                                 __________________________
Petr Korč                                                                          Ing. Marek Vavrečka
primátor                                                                           jednatel