Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. S/0007/2024/IO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: 	Petr Korč, primátor
IČ:  				00296643
DIČ: 				CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: 	xxxxxxxx/ xxxxxxxxxx
ID datové schránky: 		w4wbu9s
tel.: 				558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxx
tel: xxxxxx / e-mail: xxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx
tel: xxxxxxx
xxxxxx – xxxxxx, xxxxxxx 
Tel.: xxxxxxxx
-	dále jen objednatel 
-	
 a
PPS Kania s.r.o.
se sídlem Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,
jejímž jménem jedná: Jan Kania
IČ: 26821940
DIČ: CZ26821940
č. účtu: xxxxxxx/xxxxx
tel: xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel
-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zpracování PD – Krizové bydlení Bethel“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek). 

článek 1
PŘEDMĚT DODATKU
1.	Smlouva o dílo č. S/0007/2024/IO byla uzavřena za účelem zpracování projektové dokumentace pro novostavbu krizového bydlení ve Frýdku-Místku.
Vzhledem ke skutečnosti, že plnění předmětu smlouvy – díla s ohledem na jeho proveditelnost z hlediska napojení projektovaného objektu na inženýrské sítě dle faktické stávající situace co do technické, finanční a časové náročnosti, jsou natolik komplikovaná, že zjištěný rozsah neodpovídá stávající smlouvě, přičemž objednatel není schopen dodržet případné limity přípustných změn smlouvy dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a proto strany ---------------------------------------------------
ukončují smlouvu o dílo vzájemnou dohodou a vypořádávají vzájemné nároky z doposud provedených prací a služeb v rozsahu dále ujednaném.

Článek 2
Cena a platební podmínky

1.	 Strany vypořádávají závazky ze smlouvy ve finančním rozsahu 450 600,00 Kč bez DPH, tj. 545 226,00 Kč včetně DPH 21 % dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2.	Nárok na zaplacení vzniká nabytím účinnosti dodatku č. 1, předáním provedených částí díla objednateli a následným vystavením faktury na výše uvedenou částku a se všemi odpovídajícími náležitostmi.

článek 3
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1.	Strany sjednávají, že uzavřením tohoto dodatku jsou vypořádány veškeré vzájemné závazky ze smlouvy o dílo.
2.	Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
3.	Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 50. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 20.08.2024. 
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto ujednání.
5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: stanovení rozpracovanosti ze dne 29.07.2024

Za objednatele:		Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku, dne __________		V _____________ dne___________

_____________________________		____________________________
Petr Korč 		Jan Kania
primátor		jednatel