DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx/ xxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx – xxxxxx
tel: xxxxxx / email: xxxxxxx
dále jen objednatel 
a
DEV COMPANY, spol. s r.o.
se sídlem: Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem
IČ: 47679620
DIČ: CZ47679620
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 4298
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxx, č. ú. xxxxx/xxxxxxx
ID datové schránky: muhpf5v
zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Marek Vavrečka, jednatel
zástupce ve věcech technických:
xxxxxx, tel: xxxxx / email: xxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na dodatku č. 2 smlouvy o dílo pod názvem „Sanace zdiva budovy Hospic Frýdek-Místek, p.o.“ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.	Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujícího ujednání smlouvy o dílo ze dne 27.06.2024 na stavební práce pod názvem „Sanace zdiva budovy Hospic Frýdek-Místek, p.o.“

1.1.	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje v odstavci 1. a) o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnových listů č. 4 a 5, které představují provedení injektážní clony v místě hlavního vstupu do budovy, provedení opravy hydroizolace spodní stavby, opravu podzemní části zemnící soustavy v místě výkopových prací, reprofilaci a sanaci kaveren v základové konstrukci, odbourání betonu kolem patky ocelového schodiště, demontáž a zpětnou montáž zámkové dlažby v místě venkovního schodiště pro možnost provedení hydroizolace, provedení ručních výkopových prací namísto strojového výkopu v nepřístupných místech pod schodištěm a terasou, změnu trasy a osazení revizních šachet na drenáži v místě u terasy a průchodu prostorem arboreta, nové napojení stávajícího lapolu tuků a výmalbu místnosti sesterny a části hlavního schodiště, vše v podrobnostech soupisu prací změnových listů 4 a 5.

1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena díla bez DPH	DPH 12 %	Cena včetně DPH	
Cena dle SoD	11 930 834,67 Kč	1 431 700,16 Kč	13 362 534,83  Kč	

Dodatečné  práce dle dodatku č. 1	826 712,52 Kč	99 205,50 Kč	925 918,02 Kč	

Neprováděné práce dle dod. č. 1	-347 543,34 Kč	-41 705,20 Kč	-389 248,54 Kč	
Rozdíl ceny dle dodatku č. 1	479 169,18 Kč	57 500,30 Kč	536 669,48 Kč	
Cena díla dle dodatku č. 1	12 410 003,85 Kč	1 489 200,46 Kč	13 899 204,31 Kč	
Dodatečné  práce dle dodatku č. 2	851 819,35 Kč	102 218,32 Kč	954 037,67 Kč	
Neprováděné práce dle dod. č. 2	-518 213,23 Kč	-62 185,59 Kč	-580 398,82 Kč	
Rozdíl ceny dle dodatku č. 2	333 606,12 Kč	40 032,73 Kč	373 638,85 Kč	
Cena díla dle dodatku č. 2	12 743 609,97 Kč	1 529 233,19 Kč	14 272 843,16	

1.3.	Přípustnost změn
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny:
podle § 222 odst. 6 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 9*, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací po odečtení souvisejích neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ je v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní sjednané ceně díla; tato změna představuje nárůst ceny o 2,80 % oproti původní ceně díla.

* § 222 odst. 6 ZZVZ – Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterém zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
§ 222 odst. 9 ZZVZ – Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

Přípustnost veškerých dodatečných a neprováděných prací dle Dodatků č. 1 a 2  dle § 222 odst. 6 a ve spojení s odst. 9 ZZVZ činí 9,67 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní sjednané ceně díla.

Celková změna ceny díla po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací v rozsahu všech přípustných změn dle dodatku č. 2 činí 6,81 % oproti původní ceně díla.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 69. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 15.04.2025.

5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnové listy č. 4 a 5
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 

Za objednatele:		                                               Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne…………..                                          V Ostravě, dne………

_______________________		                                    __________________________
           Petr Korč                                                                         Ing. Marek Vavrečka
            primátor                                                                                  jednatel