Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč – primátor
IČO:  00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel.  558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:	
xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx/xxxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxx,  xxxxxxx/ xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxx, xxxxx /xxxxxxx
xxxxxxx, xxxxx/ xxxxxxx / xxxxxxxxxx 

•	dále jen objednatel 

a

Sdružení pro KC Frýdek

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. 
se sídlem Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava
zastoupena Ing. arch. Martinem Chválkem, jednatelem
IČ: 05725674
DIČ: CZ05725674
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 69052  
č. účtu: xxxxx/xxxxxx  xxxxxxx
tel: xxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx

jako odpovědný společník

a

Energy Benefit Centre a.s.
se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha
zastoupena Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B vložka 15915 

•	dále jen zhotovitel

•	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/0375/2024/IO k veřejné zakázce  „Zpracování PD – Nové kulturní centrum města: část 1- Národní dům, část 2- Místecká záložna, část 3 - Přístavba Nové scény“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0375/2024/IO ze dne 01.07.2024 k veřejné zakázce „Zpracování PD – Nové kulturní centrum města: část 1- Národní dům, část 2- Místecká záložna, část 3 - Přístavba Nové scény “, z důvodu požadavku objednatele na zpracování dodatečných projekčních prací.

1.1	Původní článek 2. PŘEDMĚT a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět dodatku č.2 se doplňuje o rozšíření předmětu díla spočívající ve zpracování změny dispozičního uspořádání objektu Místecké záložny, která má za následek změnu profesí technické zabezpečení budov (TZB-chlazení, zdravotechnika, vytápění, koncepty elektro silno a slaboproud), architektonicko-stavební řešení (ASŘ), požárně bezpečnostní řešení (PBŘ – požární úseky) a výtahy.
Technické požadavky a zdůvodnění víceprací jsou specifikovány v příloze č. 1, č. 2 a č.3 tohoto dodatku.

1.2.     Původní článek 4. CENA a platební podmínky se upravuje:
Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

CELKOVÁ CENA 	
DÍLČÍ STUPNĚ	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH	
a)	I. FÁZE	150 000	31 500	181 500	
b)	DVSP Místecká záložna	3 096 000	650 160	3 746 160	
c)	DPS Místecká záložna	2 726 000	572 460	3 298 460	
d)	AD Místecká záložna	450 000	94 500	544 500	
e)	DVSP Národní dům	6 075 000	1 275 750	7 350 750	
f)	DPS Národní dům	6 296 000	1 322 160	7 618 160	
g)	AD Národní dům	900 000	189 000	1 089 000	
CELKOVÁ CENA
díla dle SOD	19 693 000	4 135 530	23 828 530	
Dodatečné práce dle dodatku č.1- arch. studie veřejného prostoru. včetně vizualizací min. 4 pohledů	702.500,00	147.525,00	850.025,00	
Další profesionální vizualizace nad rámec (ks)	15.000,00	3.150,00	18.150,00	
Cena díla dle Dodatku č.1	20.395.500,00	4.283.055,00	24.678.555,00	
Dodatečné služby – vícepráce na objektu část 2 - Místecká záložna	630.000,00	132.300,00	762.300,00	
Cena díla dle dodatku č. 2	21.025.500,00	4.415.355,00	25.440.855,00	

1.3	Termín dokončení dodatečných prací
Termín odevzdání kompletní dokumentace pro povolení stavby, včetně podání žádosti o povolení stavby se prodlužuje o 3 měsíce, tj. do 23.08.2025.

1.4	Přípustnost změn
Změna smlouvy dle Dodatku č. 2 naplňuje režim přípustné změny závazku podle § 222 odst. 4* zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), když hodnota této změny, tj. navýšení ceny díla o 630.000 Kč bez DPH představuje 3,19 % oproti původní hodnotě závazku, tj. původní ceně díla.  

*Dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
 a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 1 a č. 2 v rozsahu všech doposud dodatečných projekčních prací představuje částku 1.332.500,00 Kč bez DPH (6,77 % z celkové ceny díla dle smlouvy a nepřekračuje limit pro nadlimitní zakázku na služby, tj částku 5 401 000 Kč dle nařízení vlády č.  172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 78. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 22.07.2025.

5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – cenová nabídka ze dne 29.05.2025
příloha č. 2 – zdůvodnění víceprací ze dne 29.06.2025
příloha č. 3 – schéma zakreslení oblastí dispozičních změn (výkresy č. 1-6)

  Za objednatele						Za zhotovitele:
  
   Ve Frýdku-Místku                                			V Ostravě

________________________			__________________________

    Petr Korč                                                                     Ing.arch. Martin Chválek, MBA          
    primátor