DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0454/2025/IO
 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxx/ xxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx – xxxxxx
tel: xxx / email: xxxx
xxxxx – xxxxxxx
Tel: xxxxx/e-mail: xxx

dále jen objednatel 

a

TVARSTAV-REAL, s.r.o.
se sídlem: Císařská 68, 741 01 Nový Jičín
zastoupena: Josefem Klosem
IČ: 26815648
DIČ: CZ26815648
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C. vložka 27533.
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxx/xxxxx
ID datové schránky: q958s5w
zástupce ve věcech smluvních a technických: Josef Klos
tel:xxxxxx / email: xxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany nebo jen strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/0454/2025/IO ze dne 05.06.2025 k veřejné zakázce „ZŠ nár. um. P. Bezruče, tř. T.G.M. 454 – hydroizolace spodní stavby – I. etapa“ následujícího znění a obsahu (dále jen „dodatek“).

1.  Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0454/2025/IO ze dne 05.06.2025 k veřejné zakázce „ZŠ nár. um. P. Bezruče, tř. T.G.M. 454 – hydroizolace spodní stavby – I. etapa“.

1.1.	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnového listu č. 2, které obnášejí soupis prací včetně výkazu výměr pro provedení sanační hrubé omítky, osazení rohových profilů, natření stropních nosníků a výmalbu v malé tělocvičně, vč. narovnání množství stavebního odpadu, vše popsané v soupisu změnového listu.

1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA BEZ dph	DPH 21 %	Cena včetně DPH	
Cena dle SoD	7 398 254,03 Kč	1 553 633,35 Kč	8 951 887,38 Kč	
Dodatečné práce
dle dodatku č. 1	1 082 217,88 Kč	227 265,75 Kč	1 309 483,63 Kč	
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	-316 458,50 Kč	-66 456,29 Kč	-382 914,78 Kč	
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 1	765 759,38 Kč	160 809,47 Kč	926 568,85 Kč	
Cena dle dodatku č. 1	8 164 013,41 Kč	1 714 442,82 Kč	9 878 456,23 Kč	
Dodatečné práce
dle dodatku č. 2	325 830,98 Kč	68 424,50 Kč	394 255,48 Kč	
Neprováděné práce dle dodatku č. 2	-125 942,00 Kč	-26 447,82 Kč	-152 389,82 Kč	
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 2	199 888,98 Kč	41 976,68 Kč	241 865,66 Kč	
Cena dle dodatku č. 2	8 363 902,39 Kč	1 756 419,50 Kč	10 120 321,89 Kč	

1.3.	Původní článek 3 DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1 se upravuje takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 10.10.2025 a v této lhůtě jej jako dokončené předat objednateli.

1.4.	Přípustnost změn
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ* ve spojení s ust. § 222 odst. 9 v rozsahu změnového listu č. 2, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí 13,05 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní sjednané ceně díla.
* § 222 odst. 6 ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterém zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
** § 222 odst. 9 ZZVZ - Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.
Vzhledem k rozsahu dodatečných prací ve změnovém listu č. 2, projednávaných v tomto dodatku č. 2 a náročnosti při jejich provádění je navrhováno přiměřené prodloužení termínu realizace stavebních prací. Lhůta pro dokončení a předání díla je přiměřeně prodloužena do 10.10.2025. Tato lhůta koresponduje s ujednáním dle článku 3 odst. 10 smlouvy o dílo, kde bylo ujednáno, že:
„Lhůtu pro dokončení díla je možné prodloužit na základě přípustných změn smlouvy dle ust. § 222 ZZVZ, jejichž potřeba vyplynula z důvodu dodatečné změny rozsahu díla ze strany objednatele nebo překážek na straně objednatele v podobě zjištěných vad v projektové dokumentaci pro provedení stavby, které zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče rozpoznat, a které mají vliv na termín dokončení díla jako celku, a to o přiměřenou dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy.“   

Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací dle dodatku č. 2 činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 13,05 %.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 86. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 29.09.2025.

5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 2
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku        					V Novém Jičíně
                                                      
_______________________		                                 __________________________
Petr Korč                                                                          Josef Klos
primátor                                                                           jednatel