číslo smlouvy objednatele: S/0643/2018/IO	číslo smlouvy zhotovitele________________
číslo dodatku objednatele: S/0643/2018/IO/2

Dodatek č. 2

SMLOUVY  O  DÍLO

                      číslo smlouvy objednatele S/0643/2018/IO, číslo smlouvy zhotovitele                                                   

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany 

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
tel:  xxxxxxxxxxxx/email: xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx– technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxx/email: rxxxxxxxxxx,

-	dále jen objednatel
a

Mystic constructions spol. s r.o.
se sídlem Římská 678, 120 00 Praha
za kterou jedná: Radomír Teichmann, jednatel společnosti
IČ: 26177358
DIČ: CZ26177358
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 77222  
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxxxxx
ID datové schránky: om6cun
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx, 
tel: xxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxxxx 

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Skatepark ve Frýdku-Místku III.“ následujícího znění a obsahu.

1.	Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 04.03.2019 na stavební práce pod názvem „Skatepark ve Frýdku-Místku III.“.
1.1.	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět díla se mění o neprováděné práce spočívající v rozsahu a podrobnostech dle změnového listu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku č.2. 

1.2.	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH %	včetně DPH	
Původní cena díla	10 478 071,02 Kč	2 200 394,91 Kč	12 678 465,93 Kč	
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	- 566 902,40 Kč	- 119 049,50 Kč	- 685 951,90 Kč	
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	314 313,11 Kč	66 005,75 Kč	380 318,86 Kč	
Celková cena dle dodatku 
č. 1	10 225 481,73 Kč	2 147 351,16 Kč	12	372 832,89 Kč	
Neprováděné práce dle dodatku č. 2	- 7 592,00 Kč	- 1 594,32 Kč	- 9 186,32 Kč	
Celková cena dle dodatku 
č. 2 	10 217 889,73 Kč	2 145 756,84 Kč	  12 363 646,57 Kč	

1.3.	Přípustnost změn
  
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 2 naplňují podmínky 
ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změn, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací činí 8,48 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla. 

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení  a objednatel 1 vyhotovení.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 30. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 12.11.2019.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Soupis změnových listů
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 4
- Příloha č. 3 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:						Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku dne __________ 2019		V Praze dne _________ 2019

_____________________________			__________________________
Mgr. Michal Pobucký, DiS.			          		Radomír Teichmann
            primátor                                                                     jednatel