SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČO:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxx

-	dále jen objednatel č. 1

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4   
zastoupena: Ing. Janem Kroupou, FEng., generálním ředitelem
osoba oprávněna k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava
adresa sídla správy a doručování:  Mojmírovců 5/597, 70900 Ostrava
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení/číslo účtu: 
ID datové schránky: 
tel. 
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxk, technický pracovník
                                                         xxxxxxxxxx, technický pracovník
	
-	dále jen objednatel č. 2

-	objednatel č. 1 a č. 2 společně dále označováni jako objednatel, pokud z ujednání smlouvy neplyne, že se ujednání týká výslovně objednatele č. 1 nebo č. 2

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem         Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zastoupena      Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
		Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva
		Vladimír Dvořák, člen představenstva
IČ: 		25869523
DIČ: 		CZ25869523
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v KOS Ostrava pod sp. Zn. Oddíl B vložka 2419
bankovní spojení/číslo účtu: KB Olomouc, č.ú:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   č.ú: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: wvcehjc
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel č. 1 a 2 a zhotovitel dále jen strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).
 
ČLÁNEK 1
Úvodní ustanovení
Tuto smlouvu strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

a)	Objednatel č. 1 je územním samosprávným celkem - obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a tedy veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a mimo jiné vlastníkem mostního objektu  M-7, tř. T. G. Masaryka - nadjezd ul. Hlavní ve Frýdku-Místku, který je součástí místní komunikace dle příslušných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

b)	Objednatel č. 2 je státní příspěvkovou organizací zřízenou Rozhodnutím MDS ČR ze dne 4. prosince 1996, č. j. 12164/1996-KM, Zřizovací listina ŘSD ČR, ve znění pozdějších dodatků, a tedy veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ, která spravuje a hospodaří mimo jiné se silnicemi I. třídy, které jsou dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve vlastnictví státu - České republiky a mezi které patří mimo jiné i silnice č. I/48, která se v průjezdním úseku ve Frýdku-Místku na ulici Hlavní mimoúrovňově kříží s ulicí třída               T.G. Masaryka prostřednictvím mostního objektu  M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd            ul. Hlavní (zkráceně tzv. Rubiková křižovatka).
c)	Strany hodlají v roce 2019 realizovat komplexní opravu Rubikové křižovatky, a protože tzv. Rubiková křižovatka představuje funkčně propojenou stavbu dopravní infrastruktury ve vlastnictví objednatele č. 1 a majetkové správě objednatele č. 2, provedly strany jakožto veřejní zadavatelé a na základě Smlouvy o společném zadávání dle § 7 ZZVZ, otevřené řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce pod názvem „Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní“, jehož předmětem byl výběr dodavatele stavebních prací. 
d)	Zhotovitel jako vybraný dodavatel předložil v tomto otevřeném řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:
ČLÁNEK 2
Předmět smlouvy
1.	Předmětem smlouvy je:
-	závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu pod označením „Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní“ (dále také jen dílo) v dále uvedeném rozsahu a
-	závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, to vše v souladu s ujednáními obsaženými v této smlouvě.
1.1.	Dílo je členěno:
•	Část I - Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní v majetku objednatele č. 1 (dále také část I)
•	Oprava se týká mostního objektu, který převádí třídu T. G. Masaryka přes Hlavní třídu (I/48). Stáří mostní konstrukce lze odhadovat na 30 – 40 let. Mostní objekt tvoří prefabrikovaná konstrukce o jednom kolmém poli o rozpětí 16,96 m. Nosná konstrukce je v příčném směru sestavena ze 41 ks prefabrikovaných nosníků typu KA - 73, délky 18 m z dodatečně předpjatého betonu. Celková šířka mostu je 42,44 m. Výška nosníků KA - 73 je 0,85 m. Nosníky jsou uloženy na elastomerová ložiska. Mostní závěry jsou v oblastech chodníků povrchové, ve vozovce jsou pravděpodobně podpovrchové. Opěry mostu tvoří stěna z převrtávaných pilot, která je obetonována obkladní zdí z prostého betonu. Na pilotách je posazen železobetonový úložný práh. Na opěry navazují kolmé opěrné stěny tvořené také převrtávanými pilotami s obkladní zdí z prostého betonu. Vozovka na mostě má šířku mezi obrubami 14,0 m a je živičná. Niveleta komunikace na mostě stoupá v proměnném sklonu od 3,7 % do 4,0 % ve směru do centra Frýdku. V příčném směru má vozovka střechovitý sklon 0,5 % a 0,6 %.
•	Podrobný rozsah prací je uveden v projektové dokumentaci ve stupni pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu prací s výkazem výměr s názvem „Oprava mostu M-7,  tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní“, zpracované společností DOSING – 

Dopravoprojekt group, spol. s r.o., se sídlem Kounicova 13, 602 00 Brno, IČ: 18824943;

Objednatel č. 1 upozorňuje, že rekonstrukce světelně signalizačního zařízení (SSZ) v rámci této části (PD: C401 a soupis prací Oprava mostu M-7_dilci část SSZ) je podmíněna získáním územního rozhodnutí, o které bude objednatelem č. 1 zažádáno z důvodu majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům v průběhu zadávacího řízení.

•	Část II -  I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24 v majetku ČR ve správě objednatele č. 2 (dále také část II)
•	Oprava se týká opěrných zdí včetně čtyř ramp, tj. 2 nájezdových a 2 výjezdových ramp. 

•	Podrobný rozsah prací je uveden v projektové dokumentaci ve stupni DPS pod názvem - „I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24", zpracované společností Geoengineering spol. s r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava.

2.	Součástí provádění díla jsou zejména tyto činnosti zhotovitele:
a)	kontrola objednatelem předané projektové dokumentace způsobem dle této smlouvy, 
b)	monitorování stavu a postupu výstavby v rozsahu sjednaném v této smlouvě,
c)	zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána také 1x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf.
d)	zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
e)	zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, včetně osazení a údržby dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
f)	vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), včetně vyklizení zařízení staveniště, uvedení použitých ploch pro příjezd na staveniště do původního stavu,                                                                  
g)	vytyčení inženýrských sítí a jejich ochrana v průběhu výstavby, včetně zajištění případného nezbytného dohledu správců sítí při provádění prací, bude-li to potřebné,
h)	zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
i)	předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
j)	návrh provozních řádů technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce, včetně zaškolení obsluhy, jeli to potřebné
k)	provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
l)	udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 
m)	zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení a řádné užívání díla, zejména zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby; 
n)	povinnost zhotovitele v rámci realizace díla zpracovávat návrhy dodatečných prací (dále jen více práce) a neprováděných prací méněprací formou změnových listů dle ujednání v této smlouvě.

3.	Dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., následujícím způsobem:
-	do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
-	ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
-	každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení díla, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
-	u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem.   
4.	Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie, a to zejména v souladu:
-	se zadáním a projektovou dokumentací stavby
-	zákonem č. 183/2006 Sb., o stavebním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky   č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a zákony souvisejícími, 
-	vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
-	vyhláškou 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
-	dále v souladu s ČSN, EN, ON, TP, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly,
-	technickými a technologickými normami a podmínkami, které odpovídají standardu současně známých a užívaných technologií a postupu pro daný typ staveb a z toho vyplývající kvality díla, při použití běžných materiálů, standardních výrobků a konstrukcí zaručujících vlastnosti podle § 156 stavebního zákona a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dalších prováděcích předpisů v platném znění. 

5.	Zhotovitel uzavřením smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6.	Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a postupovat dle ujednání v článku 7 této smlouvy. 

Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody

7.	Vlastníkem díla či jeho části se stává objednatel okamžikem zapracování materiálů a výrobků.

8.	Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku převzetí provedeného díla objednatelem.

9.	Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení až do doby převzetí díla objednatelem. 
ČLÁNEK 3
Doba, místo plnění 
1.	Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 9 měsíců od písemné výzvy učiněné objednatelem.  

2.	Strany sjednávají dílčí termíny:

2.1.	přípravné práce v rozsahu a-f do 1 měsíce od písemné výzvy učiněné objednatelem
a)	průzkumné práce v rozsahu dle soupisu prací
b)	zpracování realizační/dílenské dokumentace
c)	návrh ploch určených pro zařízení staveniště

d)	návrh koncepce zajištění zachování dopravní obslužnosti po dobu provádění stavby, příp. návrh obslužných tras)
e)	stanovení vjezdů/výjezdů techniky na staveniště, včetně nezbytných povolení
f)	podání dopravně inženýrských opatření s ohledem na body shora příslušným orgánům státní správy oprávněných k vydání příslušného opatření (souhlasu, povolení).

2.2.	realizace opravy mostu a ramp do 8 měsíců od předání a převzetí staveniště.

3.	Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po předání a převzetí staveniště (PPS), jehož termín bude určen písemnou výzvou objednatele. 

3.1.	Bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy předá objednatel zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci k předmětu díla, včetně stavebního povolení dle článku 2 odst. 1 této smlouvy. 

3.2.	Staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele prostřednictvím osoby jednající ve věcech technických. 

3.3.	Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak. 

Časový a finanční harmonogram 

4.	Při převzetí staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli aktualizovaný návrh finančního a technického harmonogramu postupu prací, (dále jen Harmonogram stavebních prací), 

4.1.	Harmonogram prací začíná převzetím staveniště a končí vyklizením staveniště.

4.2.	V harmonogramu musí být uvedeny základní termíny dle této smlouvy (termín dokončení díla, termín převzetí staveniště, termín vyklizení staveniště), druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla, to vše s rozlišením díla na část I a část II.

4.3.	Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem a průběžně jej aktualizovat, zejména na základě změn termínu způsobem dle smlouvy.

Přerušení lhůty pro dokončení díla

Lhůtu pro dokončení díla je možno přerušit v případě překážek v podobě nepříznivých klimatických podmínek, které brání provádění prací technologickými postupy anebo v souladu s příslušnými technickými normami na díle jako celku; omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku, s uvedením důvodů, pro které nelze započít nebo pokračovat v pracích. Doba vzniku, trvání překážky, o kterou se přeruší běh lhůty pro dokončení díla dle této smlouvy bude zaznamenána zápisem do stavebního deníku. Překážky, včetně důvodů musí být ve stavebním deníku odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Přerušení lhůty plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě a o dobu trvání těchto překážek bude prodloužena lhůta pro dokončení díla. Přerušením lhůty plnění dle tohoto ujednání není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště; strany sjednávají, že doba trvání překážky dle tohoto ujednání musí činit nejméně 5 dnů po sobě jdoucích (např. dlouhodobé srážky při zakládání stavby). 

5.	Lhůtu pro dokončení díla jako celku je možno přerušit v případě překážek, které vzniknou z důvodu skrytých překážek v místě plnění, pro které nemůže zhotovitel pokračovat v plnění díla ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku (např. archeologický nález, pyrotechnický nález); přerušení lhůty plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě a o dobu trvání těchto překážek bude prodloužena lhůta pro dokončení díla. Přerušením lhůty plnění dle tohoto ujednání není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště;

Prodloužení lhůty pro dokončení díla
6.	Lhůtu pro dokončení díla je možné prodloužit na základě přípustných změn smlouvy dle ust. § 222 ZZVZ, jejichž potřeba vyplynula z důvodu dodatečné změny rozsahu díla ze strany objednatele nebo překážek na straně objednatele v podobě zjištěných vad v projektové dokumentaci pro provedení stavby, a které mají vliv na termín dokončení díla jako celku, a to o přiměřenou dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy; 

7.	 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP"), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce, stavební úřad v rámci výkonu stavebního dozoru) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nemá toto přerušení vliv na termín plnění díla čl. 3 odst. 2 tohoto článku smlouvy.

8.	Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci dle článku 2 smlouvy zpracované pro část I a část II. 

ČLÁNEK 4
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.	Určení osob

1.1.	Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména níže uvedené osoby:
jméno, osoba odpovědna za provádění dílaxxxxxxxxxx, tel.: xxxx, e-mail:                           xxxxxxxxxxx

Zhotovitel současně prohlašuje, že výše uvedené osoby jsou zhotovitelem díla pověřeny k vedení a realizaci stavby a odpovídají za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněny:
a)	převzít od objednatele staveniště,
b)	předkládat vyúčtování prací a dodávek,
c)	zastupovat zhotovitele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
d)	navrhovat změnové listy,
e)	předat objednateli předmět díla.

1.2.	Objednatel č. 1 a č. 2 pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

Osoba technického dozoru stavebníka – objednatele (dále jen TDO) s příslušnou autorizací dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve spojení s přísl. ust. zákona č. 360/1992 sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě bude objednatelem určena bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, nejpozději k okamžiku předání a převzetí staveniště zhotoviteli dle této smlouvy.

      další osoby TDO – osoby technického dozoru objednatele č. 1

           xxxxxxx– vedoucí investičního odboru
           tel: xxxx / email: xxxxxxxxx

  xxxxxxx– technik investičního odboru
tel: xxxxxxxx/email:xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx– technik investičního odboru
tel: xxxxxxxx/email: xxxxxxxxxxxxxxxxx

a dále další, kteří budou uvedeni v zápise o předání a převzetí staveniště.  
	 
další osoby TDO – osoby technického dozoru objednatele č. 2

___________________________________________________

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu Technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:
a)	předat zhotoviteli staveniště,
b)	přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty, 
c)	vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,
d)	provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku, 
e)	odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, nevyžadující změny v rozpočtu, nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
f)	zastupovat objednatele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
g)	odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, tj. provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb, a zda tento odpovídá předané projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
h)	vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-li soupis projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti,
i)	převzít od zhotovitele předmět díla,
j)	zastavit stavební práce:
•	není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,
•	nejsou-li prováděny kontroly a zkoušky předepsané v plánu kontrol a zkoušek.
k)	odsouhlasit změnu subdodavatele dle článku 10 této smlouvy
l)	uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy, zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty;

Autorský dozor projektanta

1.3.	Autorský dozor projektanta bude vykonávat zpracovatel projektové dokumentace, která je podkladem pro provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta.

1.4.	Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:
a)	účast na předání a převzetí staveniště,
b)	průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s PD,
c)	účast na kontrolních dnech,
d)	účast při předání a převzetí díla,
e)	provádění zápisů do stavebního deníku,
f)	vstup na stavbu po dobu realizace,
g)	provádění zápisů do změnových listů,
h)	potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení.

Koordinátor BOZP
1.5.	Osoba koordinátora BOZP bude zhotoviteli sdělena nejpozději ke dni předání staveniště. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a řídit se jeho pokyny. 

1.6.	Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:
a)	účast na předání a převzetí staveniště,
b)	průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti účastníků výstavby,
c)	účast na kontrolních dnech,
d)	účast při předání a převzetí díla,
e)	provádění zápisů do stavebního deníku,
f)	vstup na stavbu po dobu realizace,
g)	provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,
h)	potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik.

1.7.	Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátorovi BOZP zejména kontrolní a zkušební plán, technologické postupy provádění prací, informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny své subdodavatele, popřípadě výše uvedené jiné osoby k součinnosti po celou dobu přípravy a realizace stavby.

1.8.	Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění závady.

1.9.	V případě porušení povinnosti zhotovitelem na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně jeho subdodavatelů, jejich zaměstnanců, zjištěných Koordinátorem BOZP, budou tato porušení zaznamenaná ve stavebním či bezpečnostním deníku s výzvou ke sjednání nápravy; v případě nesjednání nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy.

1.10.	Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy.

2.	Monitorování postupu výstavby

2.1.	Zhotovitel je povinen pořídit barevnou fotodokumentaci nebo videozáznam místa plnění v následujícím rozsahu (dále jen fotodokumentace):
a)	Fotodokumentace stavu objektu, včetně staveniště před zahájením stavebních prací; fotodokumentaci dle tohoto ujednání pořídí zhotovitel v rámci předání staveniště, a předá objednateli do 5 dnů od předání staveniště dle této smlouvy. 

b)	Fotodokumentace průběhu realizace stavby, zejména objektu, těch stavebních prací, které budou zakryty spolu s příslušným popisem; tuto dokumentaci pořizuje zhotovitel průběžně a předává objednateli na výzvu osob pověřených TD objednatele. 

c)	Fotodokumentaci dokončeného díla, zejména pohledy objektu, vyklizeného staveniště; fotodokumentaci dle tohoto ujednání pořizuje zhotovitel v rámci přejímacího řízení díla a předá objednateli nejpozději ke dni ukončení předání díla.

2.2.	Veškerá fotodokumentace bude pořízena ve vhodném digitálním formátu (např. JPG, MPEG-4) a musí z ní být patrný údaj o datu pořízení.

3.	Kontrola předané dokumentace pro provedení stavby

3.1.	Zhotovitel je povinen po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se díla nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry; tuto kontrolu je zhotovitel povinen konat i průběžně tj. nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky a navrhnout jejich nápravu způsobem pro změnu smlouvy. 

3.2.	Kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele, či projektanta za úplnost a správnost předané projektové dokumentace.

3.3.	Projektová dokumentace dle článku 2 odst. 1 smlouvy, tj. DPS, nenahrazuje realizační dokumentaci stavby (RDS), která je záležitostí zhotovitele. Realizační dokumentace stavby znamená zhotovitelem na vlastní náklady upravená DPS pro vlastní provedení (realizaci) stavby v závislosti na zhotovitelem použitého řešení, technologií a zpracování a dle zvážení zhotovitele zahrnuje zejména výrobně technickou dokumentaci pro pomocné práce, výrobně technickou dokumentaci pro zhotovovací práce; Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační dokumentace, zajistí si ji zhotovitel na své náklady dle vlastních potřeb.

4.	Staveniště
4.1.	Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté vad v termínu uvedeném v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší než 15 pracovních dnů, je podstatným porušením této smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od smlouvy.

Informační tabule o stavbě
4.2.	Zhotovitel je povinen umístit na vhodném místě na staveništi u každého stavebního objektu mostu z veřejného prostranství viditelnou informační tabuli označující stavbu následujícími údaji:

a)	název stavby: „;
b)	označení povolovacího aktu: - stavební povolení vydané Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního pro část I /územní souhlasu vydané Krajským úřadem MSK pro část II;
c)	označení stavebníka/objednatele/investora: – Statutární město Frýdek-Místek/ Ředitelství silnic a dálnic ČR s uvedením:
•	osob odpovědných ve věcech technických, včetně kontaktních údajů dle odst. 1 tohoto článku smlouvy;
d)	označení zhotovitele stavby: názvem, sídlem, IČ s uvedením:
•	 osob hlavního odpovědného stavbyvedoucího, jeho zástupce, včetně kontaktních údajů dle  odst. 1 tohoto článku smlouvy;

e)	termín zahájení a dokončení díla; 

4.3.	Jiné informační tabule či reklamy lze v místě plnění umístit pouze se souhlasem objednatele.

4.4.	Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

4.5.	Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

4.6.	Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání, a to v rozsahu potřebném pro provádění díla, včetně ploch pro zařízení staveniště. 

4.7.	Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon Technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru projektanta (AD), koordinátora BOZP a respektováním PD předané objednatelem a v souladu s příslušnými právními předpisy.

4.8.	Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel zabezpečí samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií.

4.9.	Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDI, autorského dozoru (AD) a koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. 

4.10.	Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi (používaných plochách, komunikacích) pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál; v případě porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto ujednání bude objednatelem vyzván k sjednání nápravy ve lhůtě určené ve stavebním deníku; v případě nesjednání nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy.

Vyklizení staveniště
4.11.	Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle této smlouvy je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

4.12.	Smluvní strany o vyklizení staveniště vyhotoví zápis do dokumentu Zápis o předání a převzetí díla; součástí zápisu budou zhotovitelem dodaná prohlášení vlastníka,                  př. správců nemovitostí a pozemků dotčených stavbou o uvedení do původního stavu. 

5.	Stavební deník
5.1.	Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést jeden hlavní stavební deník dle               § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), s údaji v minimálním  rozsahu dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.). Dále je zhotovitel povinen vést zvlášť podrobné stavební deníky pro část I a část II.

Společné ujednání pro vedení hlavního stavebního deníku a podrobných stavebních deníků pro část I a část II

5.2.	 Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a tyto si nechává denně potvrzovat osobami pověřenými TD objednatele.

5.3.	Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

5.4.	Stavební deník zpřístupní zhotovitel na stavbě a zajistí, že bude mj. obsahovat:
a)	základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
b)	identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
c)	přehled smluv včetně dodatků a změn,
d)	seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
e)	seznam dokumentace stavby a jejích změn.

5.5.	Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5.6.	Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele a projektant, případně Koordinátor BOZP.

5.7.	Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit; zápisy slouží jako případný podklad pro jednání o změně smlouvy.

5.8.	Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby za účelem archivace při předání díla.

6.	Provádění díla/ kontrola díla, včetně zakrytých částí díla/

6.1.	Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k provedení stavby dnem předání a převzetí staveniště. 

6.2.	Před samotným dodáním a zapracováním materiálů a výrobků budou zhotovitelem osobě TDS, případně autorskému dozoru předloženy veškeré potřebné doklady, zejména certifikáty, prohlášení o shodě, doplněné montážními listy a technologické postupy, na základě kterých bude možno odsouhlasit shodu nabízeného výrobku (technologie) s projektovou dokumentací. Dodávky na stavbu lze realizovat až po předchozím odsouhlasení se zástupcem objednatele. 
	
6.3.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o takové porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

6.4.	Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat osobu TDS písemnou formou – emailem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad odkrýt.

6.5.	Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky. Zhotovitel je povinen informovat TDS o konání předepsaných kontrol a zkoušek dle předcházející věty.

6.6.	Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží TDS.

6.7.	Pokud se TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě TDS  dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.8.	Při provádění opravy bude most vždy z poloviny uzavřen. Doprava bude během stavby z části odvedena na objízdnou trasu a z části bude probíhat vždy po jedné polovině mostu. Během stavby bude nutné částečně omezit provoz na Hlavní třídě pod mostem. Návrhy objízdných tras a dopravních omezení jsou uvedeny v projektových dokumentacích.

Kontrolní dny

6.9.	Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně 1 x týdně, pokud se zástupci ve věcech technických nedohodnou jinak.

6.10.	Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 3 dny předem.

6.11.	Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své subdodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku;

6.12.	Kontrolní dny vede objednatel, prostřednictvím osoby vykonávající funkci TDS. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS, BOZP a AD a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.13.	Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

ČLÁNEK 5
Cena díla
1.	Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:

	
Cena v CZK bez DPH
	DPH v CZK	Cena v CZK včetně DPH	

Část I - Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní	32 780 701,27 Kč	

6 883 947,26 Kč	

39 664 648,53Kč	

Část II - I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24	49 667 869,98 Kč	

10 430 252,70 Kč

60 098 122,68 Kč	

Část I + část II

82 448 571,25 Kč

17 314 199,96 Kč	

99 762 771,21 Kč	

2.	Sjednaná cena je doložena zhotovitelem oceněnými soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr dle přílohy č. 1 smlouvy. 

3.	Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro zřízení, provoz, demontáž a vyklizení zařízení staveniště, opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných výrobků, materiálů, revizí, kontrolních prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, poplatků za odvoz a likvidaci odpadů, nákladů na úschovu (skladování) a opatrování rozestavěného díla, nákladů na dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotoveních, nákladů dalších činností a výkonů dle článku 2 této smlouvy nezbytných pro provedení díla.

4.	Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně.

5.	Sjednanou cenu díla lze měnit pouze:

5.1.	v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále jen méněpráce); v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je jako součást nabídky zhotovitele přílohou č. 1 smlouvy;

5.2.	v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); v tomto případě bude cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které v rámci dodatečných prací jsou nezbytné k dokončení díla nebo které si objednatel vymínil provádět nad rámec, množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou oceňovány:

a)	jednotkovými cenami podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů oceněných zhotovitelem v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb;
b)	pokud nové položky nejsou součástí soupisu prací, dodávek a služeb dle bodu a), provede se ocenění dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací, kterou zhotovitel použil k ocenění soupisu prací dodávek a služeb v příloze č. 1 smlouvy, a to maximálně ve výši jednotkových cen této cenové soustavy aktuální v době ocenění;
c)	v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) tohoto odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele.

5.3.	v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. 

6.	Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě. Rozsah dodatečných prací a méněprací bude projednáván společně s objednatelem č. 1 a č. 2 a zhotovitelem. 

ČLÁNEK 6
Platební podmínky
1.	Objednatel č. 1 a č. 2 neposkytují zálohy.

2.	Objednatel č. 1 a č. 2  při realizaci díla dle této smlouvy se nepovažuje za osobu povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona                    č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. 

3.	Strany sjednávají, že cena za dílo bude účtována samostatně v členění na část I a na část II. Zhotovitel bude vystavovat dle dalších ujednání samostatně daňové doklady v rámci části I díla na objednatele č. 1 a v rámci části díla II na objednatele č. 2.  

4.	Vyúčtování ceny díla u stavebního objektu SO 401 - VO přeložka veřejného osvětlení zhotovitel provede tak, že objednateli č. 1 vyúčtuje zhotovitel cenu za položky za dodávku a montáž výložníků a osvětlení a ostatní náklady tohoto objektu budou vyúčtovány objednateli č. 2.

Společné ujednání k platebním podmínkám pro část I a II

5.	V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména stanovené účetními a daňovými předpisy (dále jen "faktura"). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve po odsouhlasení Zjišťovacího protokolu s přiloženým oceněným soupisem provedených prací za sledované období dle níže uvedených ujednání. Zjišťovací protokol bude součástí faktury. 

6.	Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla pro část I a část II dle této smlouvy. Každá vystavena faktura bude uhrazena do výše 95% fakturované částky bez DPH + 100% DPH, zbývajících 5% fakturované částky bez DPH bude držena objednatelem jako pozastávka do doby řádného dokončení a předání díla bez vad, která bude uvolněna:

a)	do 15 dnů ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků a předání bankovní záruky dle článku 11 smlouvy, nebo
b)	bude-li dílo v souladu s čl. 8 této smlouvy převzato objednatelem s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou pozastávky zhotoviteli uvolněny do 15 dnů ode dne odstranění všech těchto vad a nedodělků nikoliv však dříve, než zhotovitel předá objednateli č. 1 a č. 2 Bankovní záruky dle ujednání článku 11 této smlouvy;

7.	Zjišťovací protokol bude obsahovat údaje o zhotoviteli, objednateli, název stavby a případného dotačního programu, číslo uzavřené smlouvy, finanční částky odpovídající zhotovené části díla s prostavěností a jména s podpisy předávajícího a přebírajícího s daty předání a převzetí provedených stavebních prací. Součástí zjišťovacího protokolu bude:
-	soupis provedených prací s označením názvu výrobku a výrobce konkrétního dodaného výrobku (dodávky).
-	kopie a soupis vážních lístků za fakturované období v listinné nebo elektronické podobě,
-	odkaz na doklady prokazující technické vlastnosti a jakost dodaných a účtovaných materiálů, výrobků dle této smlouvy. 

8.	Zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací bude zhotovitel předkládat v listinné i elektronické podobě pro každou dílčí část samostatně.

Popis a struktura elektronické podoby soupisu provedených prací:

-	soubor bude ve formátu . *.xls a *.xml.
-	tabulka soupisu prací bude obsahovat povinné sloupce: pořadové číslo položky, číslo SO, zjišťované období, ceníkový kód položky, popis položky, MJ, fakturované množství, jednotkovou cenu a fakturovanou cenu.

9.	Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a)	číslo smlouvy objednatele, číslo, název a předmět veřejné zakázky,
b)	označení osoby, která uskutečňuje plnění (obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo), včetně daňového identifikačního čísla, údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky, IČ objednatele,
c)	označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, včetně daňového identifikačního čísla
d)	označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno 
e)	lhůtu splatnosti faktury,
f)	označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
g)	označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční),
h)	evidenční číslo daňového dokladu,
i)	den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu, den splatnosti konečné faktury,
j)	základ daně, sazbu daně, výši daně v české měně

10.	Po předání a převzetí díla zápisem o předání a převzetí, kde objednatel prohlásí, že dílo přejímá, vyhotoví zhotovitel souhrnný daňový doklad - konečnou fakturu. Konečná faktura musí být kromě údajů dle předchozího odstavce písm. a) až j) označena:
k)	výslovný název „konečná faktura“
l)	čísla a částky všech dosud uhrazených dílčích faktur (soupis faktur).

11.	Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebudou faktury akceptovány objednatelem a budou vráceny k opravě dle této smlouvy. 

12.	Ve faktuře budou odděleně uvedeny náklady na práce charakteru oprav a charakteru investic či rekonstrukcí dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

13.	Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě.

Splatnost faktur

14.	Platby budou probíhat výhradně v CZK, doba splatnosti daňových dokladů se sjednává 
na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

15.	V případě, že dílčí nebo konečná faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

16.	Po předání a převzetí díla zápisem o předání a převzetí, kde objednatel prohlásí, že dílo přejímá, vyhotoví zhotovitel souhrnný daňový doklad - konečnou fakturu. 

17.	Za neprovedené práce nelze požadovat úhradu (nelze je fakturovat) a budou z ceny díla odečteny dodatkem ke smlouvě.

ČLÁNEK 7
změna smlouvy
1.	Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a postupovat dle ujednání v tomto článku smlouvy. 

2.	Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo provedeno. Do stavebního deníku zhotovitel, objednatel prostřednictvím TDS zapisují zejména všechny požadavky na změny nebo úpravy díla, které se odchylují od PD a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.

3.	Ke každé změně smlouvy, zejména co do kvality či množství prováděného díla musí být zpracován podkladový dokument označený jako Změnový list. Změny mohou být důvodem ke změně termínu provedení díla. Změnový list je pak podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.
4.	Změnový list vyhotoví zhotovitel díla a předloží jej k vyjádření TD objednatele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů) od provedení zápisu ve stavebním deníku nebo od zjištění změny dle toho, co nastalo dříve. Změnový list bude projednáván společně s objednatelem č. 1 a č. 2 a zhotovitelem. 
5.	Změnový list bude obsahovat údaje v něm uvedené, zejména popis a zdůvodnění změny; přílohou změnového listu budou:
a)	popisy, výkresy a/nebo náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, je-li to nezbytné
b)	fotografie stavu před provedením změny,
c)	další doklady a dokumenty ozřejmující předmět změny, jeli to nezbytné
d)	soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný způsobem dle čl. 5 této smlouvy.
e)	součástí projednávaných změn bude písemné stanovisko zhotovitele a technického dozoru objednatele k vlivu na termín dokončení díla.

6.	Objednatel vždy zajistí stanovisko Autorského dozoru projektanta.  
7.	Pokud zhotovitel před provedením těchto prací toto neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

8.	V případě, že některé práce nebudou prováděny (méněpráce), platí shora uvedená ujednání odst. 1 až 6 obdobně. 
9.	Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě; pro fakturaci platí ujednání o platebních podmínkách.
10.	Změna předmětu a ceny díla je možná pouze postupem, který je v souladu se zákonem             č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

ČLÁNEK 8
Předání díla

1.	Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednavateli termín, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí jako celek. Dílo bude předáváno v části 1 objednateli               č. 1 a v části II objednateli č. 2. 
2.	Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze díla zejména:
-	dílčí zjišťovací protokoly, včetně soupisů dílčích provedených prací/dodávek/služeb a faktur
-	dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací,
-	fotodokumentace stavu v rozsahu dle této smlouvy;
-	zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů,
-	prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, certifikát výrobku dle zákona č. 22 /1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky);
-	zápisy a výsledky předepsaných měření;
-	zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách,
-	doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části,
-	jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, kopie dokladů o likvidaci odpadu, 
-	návody k údržbě zařízení případně další doklady potřebné k užívání díla, 
-	stavební deník. 

3.	Zápis o předání a převzetí díla pořizuje zhotovitel; zápis bude obsahovat:
a)	označení smluvních stran
b)	označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
c)	termín vyklizení staveniště,
d)	termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
e)	seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,

f)	prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 občanského zákoníku), uvedení, že je dílo přebíráno s takovými vadami a seznam vad, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty k odstranění, která činí do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak; splnění závazku zhotovitele, odstranění těchto vad, bude následně zaznamenáno na témže protokole údaji dle písm. g) níže,
g)	jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka datum a místo sepsání protokolu,

4.	Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho řádnému užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 občanského zákoníku), je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v plnění díla.
ČLÁNEK 9
VADY DÍLA, ZÁRUKA 
1.	Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to: 
a)	v délce 60 měsíců od předání dokončeného díla dle smlouvy, přičemž na izolaci mostního objektu v rámci části I – díla  120 měsíců od dokončení díla dle smlouvy;
b)	na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.
2.	Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3.	Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. V případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
4.	V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel č. 1 a č. 2 vady samostatně reklamovat, a to každý z nich na své části díla (část I/část II) bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:  

a)	do datové schránky: wvcehjc
b)	na e-mail: ids@ids-olomouc.cz
c)	na telefonním čísle: ------
 
V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

5.	Objednatel má právo v případě vadného plnění:
a)	na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,
b)	na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě,
c)	na dodání náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad.

6.	Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin od nahlášení. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany z objektivních důvodů (technologický postup, povětrnostní vlivy, součinnost provozovatele, uživatele) nedohodnou písemně jinak.

7.	Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech dle této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná. 
8.	Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, protokol musí obsahovat:
a)	označení zástupců smluvních stran,
b)	číslo smlouvy o dílo,
c)	datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady,
d)	popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
e)	datum zahájení odstraňování vady,
f)	celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
g)	jiná vyjádření.

9.	Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celého díla).

ČLÁNEK 10
  Smluvní pokuty
1.	V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti sjednanému termínu, se sjednává smluvní pokuta ve výši 50 000,- Kč za každý den prodlení. 

2.	V případě porušení povinnosti zhotovitele sjednat nápravu povinností na úseku údržby a čistoty staveniště způsobem a ve lhůtě určené v článku 4 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

3.	V případě porušení povinnosti zhotovitele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci sjednat nápravu způsobem a ve lhůtě určené v článku 4 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

4.	V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla ve lhůtě sjednané v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 20 000,- Kč za každý den prodlení; V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla déle než 30 dnů, se sjednává smluvní pokuta ve výši 40 000,- Kč za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. 

5.	Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy, se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z účtované (fakturované) částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

6.	V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává smluvní pokuta  5 000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou reklamovanou vadu. 

7.	V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a předáním vyčištěného staveniště ve lhůtě sjednané v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 50 000,- Kč za každý den prodlení.
8.	V případě prodlení zhotovitele s předáním listiny bankovní záruky dle článku 11 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení

9.	Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10.	Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy. 

11.	Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

ČLÁNEK 11
BANKOVNÍ ZÁRUKA/ POJIŠTĚNÍ
1.	Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí díla předat každému objednateli, tj. objednateli č. 1 a objednateli č. 2 originál listiny neodvolatelné a nepodmíněné bankovní záruky k zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, (dále jen Bankovní záruka),  za současného dodržení podmínek těchto ujednání:
2.	Bankovní záruky budou:

a)	vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, resp. s platným povolením působit jako banka v rámci Evropského hospodářského prostoru vydaným příslušným orgánem bankovního dohledu;
b)	vystavené v českém jazyce a podléhající režimu ust. § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku;
c)	vystavené ve prospěch:
•	objednatele č. 1 - statutárního města Frýdku-Místku, se sídlem se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ  00296643, jako výlučně oprávněného,
•	objednatele č. 2 - Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4, IČ 65993390, jako výlučně oprávněného 

d)	vyplatitelné bez odkladu a bez námitek, na základě první výzvy objednatele č. 1 či objednatele č. 2
e)	zajištovat řádné a včasné splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, tj., za řádné a včasné splnění povinností zhotovitele v záruční době k předmětu díla, včetně závazků z titulu smluvních pokut zajištujících tyto nároky, nároků z náhradního plnění a škod ve smyslu ujednání článku 9 a 10 této smlouvy, a to:
•	u objednatele č. 1 vztahujících se k části I předmětu díla až do maximální výše 5 % celkové ceny předmětu díla pro část I díla bez DPH sjednané v této smlouvě, (dále jen zaručená částka),
•	u objednatele č. 2 vztahujících se k části II předmětu díla až do maximální výše              5 % celkové ceny předmětu díla pro část II díla bez DPH sjednané v této smlouvě, (dále jen zaručená částka).
f)	budou platné a účinné od okamžiku vystavení až do uplynutí 60-ti měsíční záruční doby k provedenému dílu dle této smlouvy + 3 měsíce;
3.	Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky či bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo.

4.	Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

Pojištění 

5.	Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že pojištění musí zahrnovat:

a)	pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky výkonem jejich činností pro případ jejich právní odpovědnosti za usmrcení nebo újmy na zdraví jakékoliv třetí osoby v příčinné souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy v místě plnění a jeho blízkém okolí;
b)	pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky pro případ jejich právní odpovědnosti za škodu na majetku jakékoliv třetí osoby, která vznikne v příčinné souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy v místě plnění a jeho blízkém okolí;
c)	výši pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě po celou dobu provádění ve výši stejné nebo vyšší než je cena díla uvedená ve smlouvě o dílo z jedné škodné události;

6.	Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději v termínu podpisu této smlouvy k nahlédnutí originál pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát na požadované pojištění dle tohoto ujednání, prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky a výši spoluúčasti); objednatel je oprávněn si pořídit fotokopie předložených dokladů.

ČLÁNEK 12
   PODDODAVATELÉ
1.	Zhotovitel nesmí zadat provedení celého díla dalším subjektům.
2.	Při provádění díla poddodavatelem bude zhotovitel odpovídat, jakoby tyto částí díla prováděl sám. Poddodavatelem se rozumí také poddodavatelé zhotovitelova poddodavatele a jejich poddodavatelé, tedy všechny subjekty podílející se na plnění předmětu smlouvy v místě jeho realizace.
3.	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat potřebné údaje a bude doložena kvalifikačními doklady.
4.	Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli. Zhotovitel nesmí zadat provedení jakékoliv části díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatele. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být poskytnuta rovněž koordinátorovi BOZP. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

ČLÁNEK 13
  Ostatní ujednání
1.	Zhotovitel bere na vědomí a byl objednatelem seznámen, že financování předmětu díla v části I je zajištěno z dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a zhotovitel se zavazuje k následujícím povinnostem:

a)	V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), strpět kontrolu od kontrolních orgánů, které jsou oprávněny si vyžádat ke kontrole kompletní dokumentaci o zadání, realizaci a fakturaci veřejné zakázky. 

b)	Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele pro umožnění kontroly předložit kopie daňových dokladů – faktur, o provedených úhradách výrobků a subdodávek.

c)	Zhotovitel je povinen umožnit výkon práva kontroly SFDI ve vztahu k prostředkům poskytnutým ze SFDI a je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

d)	Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran 
ze smlouvy, odpovídajícími ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

e)	Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni nabytí účinnosti této smlouvy s pravidly projektu, která jsou zveřejněná na www.sfdi.cz seznámen.

2.	Údaje, týkající se identifikace smluvních stran uvedené ve smlouvě souhlasí se skutečným stavem. Smluvní strany jsou povinny změny těchto údajů oznámit bez prodlení druhé smluvní straně.
3.	Veškeré změny smlouvy jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Postoupení smlouvy není přípustné.
4.	Smlouva se vyhotovuje ve 5 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel č. 1 a č. 2 po 2 vyhotoveních.
5.	Dle uzavřené smlouvy je objednatel oprávněn započítat jakoukoli pohledávku vůči zhotoviteli oproti vystavenému platebnímu dokladu (faktuře) zhotovitele.
6.	Tato smlouva o dílo je uzavřena ze strany objednatele č. 1 na základě rozhodnutí 12. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 12.3.2019.
7.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Příloha smlouvy:

 – oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Za objednatele č. 1:			Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku                                                               	V Olomouci

_________________________		          __________________________
Mgr. Michal Pobucký, DiS.		          Vladimír Dvořák
primátor                                                                                     člen představenstva                                                                                       

Za objednatele č. 2 
	
__________________________________		                                                                 
Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava