DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO Č. S/0292/2019/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČO:  00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxx– vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxx

xxxxxxxxxxx– technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxxx/email: xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx– technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx/email: xxxxxxxxxxxx

-	dále jen objednatel č. 1

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4   
zastoupena: Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem
osoba oprávněna k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava
adresa sídla správy a doručování:  Mojmírovců 5/597, 70900 Ostrava
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení/číslo účtu: 
ID datové schránky: 
tel. 
kontaktní osoba ve věcech technických:xxxxxxxxx, technický pracovník
                                                         xxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník
	
-	dále jen objednatel č. 2

-	objednatel č. 1 a č. 2 společně dále označováni jako objednatel, pokud z ujednání smlouvy neplyne, že se ujednání týká výslovně objednatele č. 1 nebo č. 2

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem         Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zastoupena      Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
		Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva
		Vladimír Dvořák, člen představenstva
IČ: 		25869523
DIČ: 		CZ25869523
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v KOS Ostrava pod sp. Zn. Oddíl B vložka 2419
bankovní spojení/číslo účtu:xxxxxxxxx, č.ú: xxxxxxxxx;   xxxxxx, č.ú: xxxxxxxxx                    
ID datové schránky: wvcehjc
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxx
tel: xxxxxxxxx/ email: xxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel č. 1 a č. 2 společně dále označováni jako objednatel, pokud z ujednání smlouvy neplyne, že se ujednání týká výslovně objednatele č. 1 nebo č. 2

1.	Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 15.04.2019 na stavební práce pod názvem „Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní“.
1.1.	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce:
Dodatečnými stavebními pracemi jsou:
-	Během bouracích a výkopových prací za rubem opěry 1 (od mostu směrem do centra Frýdku-Místku) bylo zjištěno, že v úrovni základové spáry opěry se objevuje poměrně velké množství vody. Úroveň zastižené vody byla ve větší hloubce, než byl původní předpoklad. Pro odvedení této vody z oblasti za rubem opěry bylo navrženo zvětšení průměru z původně navržené drenáže DN150 na DN250.  V rámci souvisejících stavebních prací "části II - I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24“ bylo zdokumentováno, že hloubka kanalizačních přípojek ze stávajících uličních vpustí na rampách je pro zaústění drenáže z rubu mostu nedostatečná. Tato skutečnost vedla k navržení nové uliční vpusti v začátku nájezdu na rampu R1, do které bude nově navržená drenáž zaústěna. Drenážní potrubí bude tedy vedeno za rubem opěry 1 v hloubce cca 3,30m a dále bude pokračovat za rubem opěrné zdi nájezdové rampy R1 do nové uliční vpusti. Dodatečné práce se týkají části I a části II a jsou zaznamenány v změnových liset č. I.1 a č. II.1 
-	Objednatel č. 1 vznesl dodatečný požadavek spočívající v doplnění světelného signalizačního zařízení (SSZ) o detekční systém na rampách silnice I/48 a signalizace dvou přechodů na těchto rampách. Důvodem je zvýšení bezpečnosti chodců při přechodu přes místní komunkaci. Dodatečné práce se týkají části I a jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.2
-	Po otryskání líce opěry č. 1 mostu M-7 v rámci její sanace byly obnaženy trhliny na povrchu betonu, které bylo nutno zainjektovat. Dodatečné práce se týkají části I a jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.4.
-	V rámci bouracích prací stávajících říms a koncových náběhů ramp R1 a R2 bylo nutné vybourat vetší množství oproti předpokladu z projektové dokumentace. Dodatečné práce se týkají části II a jsou zaznamenány ve změnovém listu č. II.2.
Neprováděnými stavebními pracemi jsou:
-	K méněpracím došlo na základě upřesnění skutečného množství výztuže spřažené desky, příčníků a závěrných zídek mostu M-7. Jedná se o dodávky na hlavní stavební výrobě, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství. Neprováděné práce se týkají části I a jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.3.
Všechny podrobnosti jsou popsány ve změnových listech č. I.1 až I.4 (část I) a č. II.1 a II.2 (část II), které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1. 

1.2.	Původní článek 3. Doba, místo plnění, odstavec 1. se doplňuje o následující ujednání:
Termín dokončení díla se prodlužuje z důvodu dodatečných prací o 50 dnů.
1.3.	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:
Část I - Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní
PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	32 780 701,27 Kč	
dODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE bez dph DLE DODATKU Č. 1	2 230 113,62 Kč	
nEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ dph DLE DODATKU Č. 1	- 604 910,00 Kč	
cELKOVÁ cena DLE DODATKU Č. 1 bez DPH	34 405 904,89 Kč	

Část II - I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24
PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	49 667 869,98 Kč	
dODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE bez dph DLE DODATKU Č. 1	1 306 318,24 Kč	
nEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ dph DLE DODATKU Č. 1	-319 254,00 Kč	
cELKOVÁ cena DLE DODATKU Č. 1 bez DPH	50 654 934,22 Kč	

Část I + část II 
PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	82 448 571,25 Kč	
cELKOVÁ cena DLE DODATKU Č. 1 bez DPH	85 060 839,11 Kč	

1.4.	Přípustnost změn

Část I
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn části I smlouvy dle dodatku č. 1 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:
a)	dodatečné práce dle změnovém listu č. I.1 a I.3 naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, když hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 3,96 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 3,85 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla, 
b)	dodatečné práce dle změnovém listu č. I.2 naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací prací činí 2,90 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla, 
c)	neprováděné práce dle změnového listu č. I.4. nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které byly závislé na skutečnosti, tj. shora neprováděné práce byly oceněny jednotkovými cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení, tzn. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo.
Celkové zvýšení ceny oproti původní ceně v SoD činí 4,96 %.

Část II
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn části I smlouvy dle dodatku č. 1 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:
a)	dodatečné práce dle změnovém listu č. II.1 naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, když hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 2,34 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 1,05 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla,
b)	dodatečné stavební práce dle změnového listu č. II.2. nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § dle ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které byly závislé na skutečnosti, tj. shora neprováděné práce byly oceněny jednotkovými cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení, tzn. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo.
Celkové zvýšení ceny oproti původní ceně v SoD činí 1,99 %.

Součet veškerých dodatečných prací (část I a část II) činí 4,29% původní ceny díla. Při započtení měně prací činí rozdíl v ceně díla oproti SoD 3,17%.

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel č. 1 a č. 2 po dvou vyhotoveních.
3.	Tento dodatek je uzavřen ze strany objednatele č. 1 na základě rozhotnutí 28. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 08.10.2019.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1  nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn (část I a část II)
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn – část I
- Příloha č. 3 – Rekapitulace dosud provedených změn – část II
- Příloha č. 4 – Soupis změnových listů č. I.1 až I.4, č. II.1 a II.2 
- Příloha č. 5 – Změnové listy č. I.1 až I.4 (část I)
- Příloha č. 6 – Změnové listy č. II.1 a II.2 (část II)

Za objednatele č. 1:			Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku                                                               	V Olomouci

_________________________		          __________________________
Mgr. Michal Pobucký, DiS.		          Vladimír Dvořák
primátor                                                                                     člen představenstva                                                                                       

Za objednatele č. 2 

__________________________________		                                                                 
Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava