DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO Č. S/0292/2019/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČO:  00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxx/ xxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxx

xxxxxxxxxx– technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx/email: xxxxxxxxx

xxxxxxxxx– technik investičního odboru
tel: xxxx/email: xxxxxxxxxx

-	dále jen objednatel č. 1

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4   
zastoupena: Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem
osoba oprávněna k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava
adresa sídla správy a doručování:  Mojmírovců 5/597, 70900 Ostrava
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení/číslo účtu: 
ID datové schránky: 
tel. 
kontaktní osoba ve věcech technických:xxxxxxxxxxxx, technický pracovník
                                                         xxxxxxxxxx, technický pracovník
	
-	dále jen objednatel č. 2

-	objednatel č. 1 a č. 2 společně dále označováni jako objednatel, pokud z ujednání smlouvy neplyne, že se ujednání týká výslovně objednatele č. 1 nebo č. 2

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem         Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zastoupena      Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
		Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva
		Vladimír Dvořák, člen představenstva
IČ: 		25869523
DIČ: 		CZ25869523
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v KOS Ostrava pod sp. Zn. Oddíl B vložka 2419
bankovní spojení/číslo účtu: xxx, č.ú: xxxxxxxxxx;  
                                  xxxxxxxxxxxx, č.ú: xxxxxxxx 
ID datové schránky: wvcehjc
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel
-	objednatel č. 1 a č. 2 a zhotovitel, dále jen strany 

1.	Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 15.04.2019 na stavební práce pod názvem „Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní“.
1.1.	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce, ke kterým došlo z objektivních důvodů dle skutečnostem vzniklým během realizace díla a objednatel, ačkoli jednal s náležitou péčí, nemohl tyto skutečnosti předvídat:

1.1.1.	Dodatečné a neprováděné práce v části I: Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní:
a)	Na rozhraní výstavby v přechodových oblastech mostu byl místo zásypu ze štěrkodrti proveden mezerovitý beton, který zajistil, že nedošlo k vysypání materiálu ze zásypu při výkopových prací 2. etapy. Z hlediska méněprací bylo pro 2. etapu možné zachovat záporové pažení z 1. etapy. Po provedení výkopu v přechodových oblastech dále nebylo nutné provádět stabilizaci záporového pažení šikmými kotvami. Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.5.
b)	Při provádění výkopů přechodových oblastí mostu po úroveň úložného prahu bylo zjištěno, že povrch rubu opěr, které tvoří stávající pilotové stěny, je značně nerovný a nesoudržný. Vzhledem k navržené aplikaci hydroizolace z celoplošně natavovaných izolačních pásů, bylo nutné provést vyrovnání rubu opěr dobetonávkami v tl. cca 0,15m vyztužených  KARI sítí. Dodatečné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.6.
c)	K neprováděným pracím došlo na základě upřesnění skutečného množství výztuže spřažené desky, příčníků a závěrných zídek mostu M-7. Jedná se o dodávky na hlavní stavební výrobě, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství. Neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.7.
d)	Původně navrhované multikanály pro SSZ a VO nebudou realizovány, protože jejich osazení do mostních říms ani přechodových oblastí mostu vzhledem k jejich rozměru není možné. Kabelovody jsou nahrazeny plastovými chráničkami DN 63 mm, DN 75 mm a DN 160 mm. Skutečné délky a průměry chrániček jsou vykázány dle RDS. Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.8.
a)	Z důvodu celkového prodloužení termínu dokončení stavby se prodlužuje také doba pronájmu provizorního dopravního značení. Dodatečné náklady jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.9.
e)	Po otryskání líce opěry č. 2 mostu M-7 v rámci její sanace byly obnaženy trhliny na povrchu betonu. S ohledem na riziko prokopírování nalezených trhlin na nový sanovaný povrch je nutné před samotnou sanací provést injektáž trhlin v souladu s TP88, tedy stejným způsobem jaký byl použitý na opěře č. 1 a  na opěrných zdech související akce „Opěrné zdi ramp silnice I/48 - stavební úpravy“. Dodatečné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.10.
f)	Během bouracích a výkopových prací za rubem opěry 2 (od mostu směr Kostíkovo náměstí) bylo zjištěno, že navrhovanou drenáž za rubem opěry není možné zaústit do stávající uliční vpusti v ulici T. G. Masaryka. Zaústění drenáže bude realizováno do stávající nejbližší uliční vpusti na silnici I/48. Drenáž bude vedena skrz konstrukci rampy a následně ve vysekané drážce stěny rampy. Dodatečné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.11.

1.1.2.	Dodatečné a neprováděné práce v části II: Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní:
a)	Dle požadavku objednatele č. 2 bude realizován „jednořádek“ z žulových kostek podél obrubníků chodníků ramp R2 a R3. Dodatečné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. II.3.
b)	Dle zadávací dokumentace měly být stěny výkopů pro koncové náběhy opěrných stěn paženy štětovnicemi. Ve výkresové dokumentaci nebyly ale štětovnicové stěny zakresleny a při tvorbě RDS se ukázalo, že nejsou pro stavbu potřebné a nebyly tedy realizovány. Pro založení opěrných stěn byly provedeny větší otevřené svahované výkopy. Neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. II.4.
c)	Dle zadávací dokumentace měla být tloušťka stříkaného betonu na opěrných zdech 0,1m. Během realizace stříkaného betonu na opěrných zdech ramp R1 a R2 bylo zjištěno, že dle vytyčovaných bodů daných realizační dokumentací je potřeba provést větší tloušťky stříkaného betonu. Líc opěrné zdi byl zaměřen před odfrézováním pohledové vrstvy betonu a dále po nanesení stříkaného betonu. Ze zaměření byla vypočtena celková kubatura stříkaného betonu ramp R1 a R2, která je vyšší o 53,8m3, včetně ztratného 30% potom  69,9m3- viz geodetický protokol ze dne 12.12.2019. Dodatečné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. II.5.
d)	Při tvorbě realizační dokumentace byl zjištěn rozpor v zadávací dokumentaci týkající se svodidel na betonovém obrubníku podél opěrných zdí na I/48. V průběhu výstavby bylo dále zjištěno velké množství podkladních betonů podél pilotových stěn v místě budoucího svodidla, které by nebylo možné do takového podkladu zaberanit. Dle odsouhlasené RDS a požadavku objednatele proto bylo navrženo svodidlo mostní kotvené do betonového obrubníku. Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. II.6.
e)	V rámci provádění DIO (dopravně inženýrských opatření) byla z prostorových důvodů osazena kratší délka provizorního betonového svodidla na I/48. Neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. II.7.
f)	K dodatečným pracím došlo z objektivních důvodu dle skutečnostem vzniklým během realizace díla. Během provádění demoličních prací na rampách R3 a R4 byl zjištěn větší rozsah bourání, a to jak na koncových nábězích, tak na stávajících římsám. Celkem bylo odbouráno o 169,38 m3 betonu navíc. Tato skutečnost je doložena geodetickým zaměřením po odbourání - viz Technická zpráva číslo: 4119041 – 31/2020 – M7 vypracovaná geodetem stavby firmou GEFOS a.s. Dodatečné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. II.8.

Všechny podrobnosti jsou popsány ve změnových listech č. I.5 až I.11 (část I) a č. II.3 až II.8 (část II), které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2. 

1.2.	Původní článek 3. Doba, místo plnění, odstavec 1. se doplňuje o následující ujednání:
1.2.1.	Termín dokončení díla se prodlužuje z důvodu dodatečných prací o 45 dnů. Na základě dodatků č. 1 a č. 2 a technologické přestávky (přerušení prací) od 20.12.2019 do 12.01.2020 je zhotovitel povinen provést dílo ve lhůtě do 14.05.2020.
1.2.2.	Zhotovitel zabezpečí plné obnovení dopravy na mostě ve lhůtě do 30.04.2020 včetně.

1.3.	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:
Část I - Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní
Cena sjednaná v SOD	32 780 701,27 Kč bez DPH,
tj. 39 664 648,53 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 604 910,00 Kč bez DPH,
tj. – 731 941,10  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	2 230 113,62 bez DPH,
tj. 2 698 437,48 vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 1	34 405 904,89 Kč bez DPH,
tj. 41 631 144,91 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	-  1 164 936,00 Kč bez DPH,
tj. - 1 409 572,56  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2	897 815,75 bez DPH,
tj. 1 086 357,06 vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 2	34 138 784,64 Kč bez DPH,
tj. 41 307 929,41 Kč vč. DPH	

Část II - I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24
Cena sjednaná v SOD	49 667 869,98 Kč bez DPH,
tj. 60 098 122,68 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 319 254,00 Kč bez DPH,
tj. – 386 297,34  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	1 306 318,24 bez DPH,
tj. 1 580 645,07 vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 1	50 654 934,22 Kč bez DPH,
tj. 61 292 470,41 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	- 2 945 493,00 Kč bez DPH,
tj. – 3 564 046,53  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2	4 322 713,70 bez DPH,
tj.  5 230 483,58  vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 2	52 032 154,92 Kč bez DPH,
tj. 62 958 907,45 Kč vč. DPH	

Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní (část I a část II)
Cena sjednaná v SOD	82 448 571,25 Kč bez DPH,
tj. 99 762 771,21 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 924 164,00 Kč bez DPH,
tj. – 1 118 238,44  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	3 536 431,86 bez DPH,
tj. 4 279 082,55 vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 1	85 060 839,11 Kč bez DPH,
tj. 102 923 615,32 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	- 4 110 429,00 Kč bez DPH,
tj. – 4 973 619,09  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2	 5 220 529,45 bez DPH,
tj. 6 316 840,63 vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 2	86 170 939,56 Kč bez DPH,
tj. 104 266 836,86 Kč vč. DPH	

1.4.	Přípustnost změn

Část I
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn části I smlouvy dle dodatku č.1 a č. 2 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 3 a 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:
a)	neprováděné práce dle změnových listů č. I.7 a I.9. nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které byly závislé na skutečnosti, tj. shora neprováděné práce byly oceněny jednotkovými cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení, tzn. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo,
b)	dodatečné práce dle změnových listů č. I.5, I.6, I.8, I.10 a I.11 naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, když hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 8,77 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 3,80 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. 
Celkové zvýšení ceny oproti původní ceně v SoD činí 4,14 %.

Část II
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn části II smlouvy dle dodatku č.1 a č. 2 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 3, 4 a 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:
a)	neprováděné práce dle změnových listů č. II.5, II.7 a II.8 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které byly závislé na skutečnosti, tj. shora neprováděné práce byly oceněny jednotkovými cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení, tzn. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo,
b)	dodatečné práce dle změnového listu č. II.3 naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací prací činí 1,22 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla, 
c)	dodatečné práce dle změnovém listu č. II.4 a II.6 naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, když hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 13,53 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 1,12 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla.
Celkové zvýšení ceny oproti původní ceně v SoD činí 4,76 %.

Dle dodatku č 1 a 2 součet veškerých dodatečných prací části I a části II činí 11,33% původní ceny díla. Při započtení měně prací činí rozdíl v ceně díla oproti SoD 4,51%.

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel č. 1 a č. 2 po dvou vyhotoveních.
3.	Tento dodatek je uzavřen ze strany objednatele č. 1 na základě rozhotnutí 44. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 24.03.2020.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2  nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn (část I a část II)
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn – část I
- Příloha č. 3 – Rekapitulace dosud provedených změn – část II
- Příloha č. 4 – Soupis změnových listů (část I a část II)
- Příloha č. 5 – Soupis změnových listů č. I.5 až I.11 
- Příloha č. 6 – Změnové listy č. I.5 až I.11 (část I)
- Příloha č. 7 – Soupis změnových listů č. II.3 až II.8 
- Příloha č. 8 – Změnové listy č. II.3 až II.8 (část II)

Za objednatele č. 1:			Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku                                                               	V Olomouci

_________________________			_____________________        
Mgr. Michal Pobucký, DiS.		          Vladimír Dvořák
primátor                                                                                     člen představenstva                                                                                       

Za objednatele č. 2 

__________________________________		                                                                 
Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava