Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Frýdek-Místek,  Radniční 1148, PSČ 738 01
osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS. – primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
tel.  558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxx, vedoucí IO, xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, technik IO, xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx

•	dále jen objednatel 

a

jméno, příjmení/ název, obchodní firma/  KONEKO, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
jejímž jménem jedná  /v případě právnické osoby/ Ing. Oldřich Kazda,  jednatel
IČ: 00577758
DIČ: CZ00577758
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl C, vložka 166
Č. účtu: xxxxxxxxxx/xxxxx
Tel: xxxxxxxx
Fax: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx

•	dále jen zhotovitel
•	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce pod názvem „Výstavba vodovodního řadu - Panské Nové Dvory“, následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

I.
Předmět dodatku

V článku 2. Předmět a rozsah plnění a v článku 4. Cena a platební podmínky, odst. 2. se v souvislosti se zúžením rozsahu předmětu díla v části Lokalita č. 1 o dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro provedení stavby včetně související inženýrské činnosti a autorský dozor, které nebudou prováděny z důvodu nesouhlasu vlastníka vodovodu spol. Stavebniny CARBOL s.r.o. s napojením plánovaného vodovodního řadu, snižuje cena díla pro Lokalitu č. 1 a tím se snižuje celková cena za Lokality č. 1-3. 

Cena plnění je tedy členěna následovně:
Lokalita č. 1 – okolí ulice Nové Dvory-Kamenec	bez DPH	DPH %	včetně DPH	
PD pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby vč. inženýrské činnosti	74 000,- Kč	15 540,- Kč	89 540,- Kč	
Cena celkem	74 000,- Kč	15 540,- Kč	89 540,- Kč	

Lokalita č. 2 – okolí ulice Panské Nové Dvory – naproti hřbitovu	bez DPH	DPH %	včetně DPH	
PD pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby vč. inženýrské činnosti	69 000,- Kč	14 490,- Kč	83 490,- Kč	
PD pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti	73 080,- Kč	15 346,80 Kč	88 426,80 Kč	
PD pro provádění stavby vč. inženýrské činnosti	42 840,- Kč	8 996,40 Kč	51 836,40 Kč	
Autorský dozor po celou dobu realizace stavby (maximální částka)	7 560,- Kč	1 587,60 Kč	9 147,60 Kč	
Cena celkem	192 480,- Kč	40 420,80 Kč	232 900,80 Kč	

Lokalita č. 3 – okolí ulice Panské Nové Dvory  - u Frýdecké skládky	bez DPH	DPH %	včetně DPH	
Rozpracovanost PD pro vydání územního rozhodnutí vč. inž. činnosti v původní trase	56 300,- Kč	11 823,- Kč	68 123,- Kč	
Geodetické zaměření nové trasy	6 500,- Kč	1 365,- Kč	7 865,- Kč	
PD pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby vč. inženýrské činnosti	87 500,- Kč	18 375,- Kč	105 875,- Kč	
PD pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti	115 016,90 Kč	24 153,50 Kč	139 170,40 Kč	
PD pro provádění stavby vč. inženýrské činnosti	67 423,70 Kč	14 159,- Kč	81 582,70 Kč	
Autorský dozor po celou dobu realizace stavby (maximální částka)	9 720,- Kč	2 041,20 Kč	11 761,20 Kč	
Cena celkem	342 460,60 Kč	71 916,70 Kč	414 377,30 Kč	

CELKOVÁ CENA LOKALITA 1-3	608 940,60 Kč	127 877,50 Kč	736 818,10 Kč	

Autorský dozor - cena za 1 hod.	490,- Kč	102,90 Kč	592,90 Kč	

II.
Závěrečná ujednání
2.1.	Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, dvě objednatel.
2.2.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2.3.	Tento dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv provede v souladu s citovaným zákonem objednatel. 
2.4.	Tento dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí 50. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 26.5.2020

     Za objednatele:			Za zhotovitele:

     Ve Frýdku-Místku, dne 			V Ostravě, dne 

    ________________________			_________________________
 
      RNDr. Michal Pobucký, DiS.                                             Ing. Oldřich Kazda          
                 primátor                                                                         jednatel