DODATEK Č. 5
SMLOUVY O DÍLO Č. S/0292/2019/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČO:  00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxx/xxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxx/ email: xxxxxxxx

xxxxxxxx– technik investičního odboru
tel: xxxxxxxx/email: xxxxxxxx

xxxxxxxxxk– technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxx/email: xxxxxxxx

-	dále jen objednatel č. 1

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4   
zastoupena: Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem
osoba oprávněna k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava
adresa sídla správy a doručování:  Mojmírovců 5/597, 70900 Ostrava
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení/číslo účtu: 
ID datové schránky: 
tel. 
kontaktní osoba ve věcech technických:xxxxxxxxx, technický pracovník
                                                         xxxxxxxx, technický pracovník
	
-	dále jen objednatel č. 2

-	objednatel č. 1 a č. 2 společně dále označováni jako objednatel, pokud z ujednání smlouvy neplyne, že se ujednání týká výslovně objednatele č. 1 nebo č. 2

a
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem         Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zastoupena      Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
		Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva
		Vladimír Dvořák, člen představenstva
IČ: 		25869523
DIČ: 		CZ25869523
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v KOS Ostrava pod sp. Zn. Oddíl B vložka 2419
bankovní spojení/číslo účtu:xxxxxxxxx, č.ú: xxx;   xxxxxxxxx, č.ú: xxxxxxxxx 
ID datové schránky: wvcehjc
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxx
tel: xxxxx/ email: xxx

-	dále jen zhotovitel
-	objednatel č. 1 a č. 2 a zhotovitel, dále jen strany 

1.	Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 15.04.2019 na stavební práce pod názvem „Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní“.
1.1.	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce, ke kterým došlo z objektivních důvodů dle skutečnostem vzniklým během realizace díla a objednatel, ačkoli jednal s náležitou péčí, nemohl tyto skutečnosti předvídat:

1.1.1.	Dodatečné a neprováděné práce v části I: Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní:
K dodatečným a neprováděným pracím došlo z objektivních důvodu dle skutečnostem vzniklým během realizace díla. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo. Dodatečné práce spočívají v opravě výměry reprofilace podhledu nosné konstrukce mostu a stěn opěr. Neprováděné práce se týkají skutečných výměr železobetonu spřažené desky mostní konstrukce, výměr komunikací, úprav povrchů, izolací, ochranných nátěrů nosných konstrukcí, vodorovného dopravního značení apod. K neprováděným pracím patří rovněž dočasná svodidla, která nebyla v rámci stavby použita.
Dodatečné a neprováděné prace jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.19.

1.1.2.	Dodatečné práce v části II: I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24:
a)	Při provádění betonového obrubníku podél ramp R3 a R4 v rámci druhé etapy výstavby bylo zjištěno, že šířka obubníku neumožní osazení mostního svodidla MS4-H2, které bylo schváleno dodatkem č. 2. Z tohoto důvodu bylo osazeno kotvené zábradelní svodidlo ZSKLS-I/H2 o stejné zádržnosti H2, které má ale užší distanční díl pro osazení svodnic a jsou tak dodrženy požadované šířky jízdních pruhů na I/48.
Dodatečné a naprováděné prace jsou zaznamenány ve změnovém listu č. II.10.

b)	K neprováděným pracím došlo z objektivních důvodu dle skutečnostem vzniklým během realizace díla. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo. Jedná se o méněpráce týkající se skutečně provedeného množství příkopových žlabů podél ramp R1 a R4 v rámci SO 101 a množství frézování opěrných stěn ramp R1, R2, R3 a R4.
Neprováděné prace jsou zaznamenány ve změnových listech č. II.11 a II.12.

Všechny podrobnosti jsou popsány ve změnových listech č. I.19 (část I) a II.10, II.11 a II.12 (část II), které jsou přílohou tohoto dodatku č. 5. 

1.2.	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 5 se sjednává v Kč celkem ve výši:
Část I - Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní
Cena sjednaná v SOD	32 780 701,27 Kč bez DPH,
tj. 39 664 648,53 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 604 910,00 Kč bez DPH,
tj. – 731 941,10  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	2 230 113,62 bez DPH,
tj. 2 698 437,48 vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 1	34 405 904,89 Kč bez DPH,
tj. 41 631 144,91 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	-  1 164 936,00 Kč bez DPH,
tj. - 1 409 572,56  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2	897 815,75 bez DPH,
tj. 1 086 357,06 vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 2	34 138 784,64 Kč bez DPH,
tj. 41 307 929,41 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3	-  236 200,00 Kč bez DPH,
tj. - 285 802,00  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3	15 904,00 bez DPH,
tj. 19 243,84 vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 3	33 918 488,64 Kč bez DPH,
tj. 41 041 371,25 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 4	-  50 000,00 Kč bez DPH,
tj. – 60 500,00  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4	306 534,60 bez DPH,
tj. 370 906,87 vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 4	34 175 023,24 Kč bez DPH,
tj. 41 351 778,12 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 5	-  1 191 417,60 Kč bez DPH,
tj. – 1 441 615,30 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 5	113 223,00 bez DPH,
tj. 136 999,83 vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 5	33 096 828,64 Kč bez DPH,
tj. 40  047 162,65 Kč vč. DPH	

Část II - I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24
Cena sjednaná v SOD	49 667 869,98 Kč bez DPH,
tj. 60 098 122,68 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 319 254,00 Kč bez DPH,
tj. – 386 297,34  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	1 306 318,24 bez DPH,
tj. 1 580 645,07 vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 1	50 654 934,22 Kč bez DPH,
tj. 61 292 470,41 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	- 2 945 493,00 Kč bez DPH,
tj. – 3 564 046,53  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2	4 322 713,70 bez DPH,
tj.  5 230 483,58  vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 2	52 032 154,92 Kč bez DPH,
tj. 62 958 907,45 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3	- 0,00Kč bez DPH,
tj. - 0,00  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3	0,00 bez DPH,
tj.  0,00  vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 3	52 032 154,92 Kč bez DPH,
tj. 62 958 907,45 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 4	- 0,00Kč bez DPH,
tj. - 0,00  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4	476 010,00 bez DPH,
tj.  575 972,10  vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 4	52 508 164,92 Kč bez DPH,
tj. 63 534 879,55 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 5	- 2 821 768,00 Kč bez DPH,
tj. – 3 414 339,28  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 5	2 778 414,00 bez DPH,
tj.  3 361 880,94  vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 5	52 464 810,92 Kč bez DPH,
tj. 63 482 421,21 Kč vč. DPH	

Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní (část I a část II)
Cena sjednaná v SOD	82 448 571,25 Kč bez DPH,
tj. 99 762 771,21 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 924 164,00 Kč bez DPH,
tj. – 1 118 238,44  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	3 536 431,86 bez DPH,
tj. 4 279 082,55 vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 1	85 060 839,11 Kč bez DPH,
tj. 102 923 615,32 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	- 4 110 429,00 Kč bez DPH,
tj. – 4 973 619,09  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2	 5 220 529,45 bez DPH,
tj. 6 316 840,63 vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 2	86 170 939,56 Kč bez DPH,
tj. 104 266 836,86 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3	-  236 200,00 Kč bez DPH,
tj. - 285 802,00  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3	15 904,00 bez DPH,
tj. 19 243,84 vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 3	85 950 643,56 Kč bez DPH,
tj. 104 000 278,70 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 4	-  50 000,00 Kč bez DPH,
tj. – 60 500,00  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4	782 544,60 bez DPH,
tj. 946 878,97 vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 4	86 683 188,16 Kč bez DPH,
tj. 104 886 657,67 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 5	-  4 013 185,60 Kč bez DPH,
tj. – 4 855 954,58  Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 5	2 891 637,00 bez DPH,
tj. 3 498 880,77 vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 5	85 561 639,56 Kč bez DPH,
tj. 103 529 583,86 Kč vč. DPH	
1.3.	Přípustnost změn

Část I
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn části I smlouvy dle dodatku č. 1 až 5 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:
a)	Dodatečné stavební práce dle změnového listu č. I.19 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které byly závislé na skutečnosti, tj. shora neprováděné práce byly oceněny jednotkovými cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení, tzn. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo.
Celkové zvýšení ceny oproti původní ceně ve smlouvě činí 0,96 %.

Část II
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn části II smlouvy dle dodatku č. 1 až 5 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 3 a 7 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:
a)	Dodatečné stavební práce dle změnovýcho listů č. II.11 a II.12 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které byly závislé na skutečnosti, tj. shora neprováděné práce byly oceněny jednotkovými cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení, tzn. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo.
b)	Dodatečné práce dle změnového listu č. II.10 naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 7 ZZVZ, jelikož se jedná o záměnu položky soupisu stavebních prací, která je kvalitativně srovnatelná a cenově nižší ve vztahu k nahrazované položce.
Celkové zvýšení ceny oproti původní ceně ve smlouvě činí 5,63 %.

Dle dodatků č. 1 až 5 součet veškerých dodatečných prací části I a části II činí 15,10% původní ceny díla. Při započtení měně prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě +3,78%.

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 5, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel č. 1 a č. 2 po dvou vyhotoveních.
3.	Tento dodatek je uzavřen ze strany objednatele č. 1 na základě rozhotnutí 56. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 11.08.2020.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 5 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 5  nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 5 podle tohoto ujednání.

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn (část I a část II)
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn – část I
- Příloha č. 3 – Rekapitulace dosud provedených změn – část II
- Příloha č. 4 – Soupis změnových listů č. I.19, a II.10, II.11 a II.12 
- Příloha č. 5 – Změnový list č. I.19 (část I)
- Příloha č. 6 – Změnové listy č. II.10, II.11 a II.12 (část II)

Za objednatele č. 1:						Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku                                                              V Olomouci

_________________________		          __________________________
RNDr. Michal Pobucký, DiS.		          Vladimír Dvořák
primátor                                                                                     člen představenstva                                                                                       

Za objednatele č. 2 

__________________________________		                                                                 
Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava