DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č.  S/0667/2019/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu:  xxxxxxxx/ xxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
 xxxxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
tel:  xxxxxx/ email: xxxxxxx
 xxxxxxxxx– technik investičního odboru
tel:  xxxxxxxxxx/email: xxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel:  xxxxxxx/email: xxxxxxxxxxx

-	dále jen objednatel

a 

Metrostav a.s.
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8
zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci
IČ: 00014915
DIČ: CZ0014915
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx / xxx, kód xxxxxxx
ID datové schránky: bnpcf46
Kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx, ředitel oblasti Severomoravský region, divize 1
tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0667/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 3 – kanalizace Zelinkovice a Lysůvky následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0667/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 následujícího rozsahu:
1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:
-	v přeložce podzemního vedení veřejného osvětlení na stoce L1; 
-	v prodloužení kanalizační stoky L3/1 na ulici Hraniční;   
-	v úpravě stávající spodní šachty na stoce L2 podkopu pod dálnicí;
-	ve zřízení spádišťové a nové průběžné kanalizační šachty na stoce L1;
-	ve změně zatřídění hornin při výskyty rostlé skály na stoce L4 a L4/1 na ulici Hraniční na stoce L3/1 na ulici Zahradnická;
-	v provedení oplocení čerpací stanice;
-	v doplnění skruží u kanalizačních šachet v zeleni, která je obdělávána zemědělskou technikou z důvodu zabránění poškození šachet při seči či sklizni na stokách L3, L4 a L4/1.
Předmět se plnění upravuje o neprováděné práce spočívající:
-	v odpočtu skruže tělesa šachty související se změnou výšky šachty na stoce L1; 
-	ve změny zatřídění těžené zeminy na stokách L4 a L4/1 na ulici Hraniční a na stoce L/3 na ulici Zahradnická; 
-	v odpočtu původních poklopů, které budou nahrazeny poklopy vodotěsnými na stoce L/3.
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. viz příloha č. 2. 
1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK	
 Původní cena díla	14 123 984,29	2 966 0,36,70	17 090 020,992	
 Neprováděné stavební práce 
 dle dodatku č. 1	        -23 645,40	-4 965,53	  -28 610,93	
 Dodatečné stavební práce 
 dle dodatku č. 1	1 154 117,00	242 364,57	1 396 481,57	
 Celkové navýšení ceny 
 dle dodatku č. 1	1 130 471,60  	237 399,04	1 367 870,64	
 Celková cena dle dodatku č. 1	15 254 455,89	3 203 435,74	18 457 891,63	

Dle dodatku č. 1 součet veškerých dodatečných prací po započtení neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní celkové ceně dle smlouvy 8 %.

1.3.	Přípustnost změn
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

a)	Dodatečné práce vyžádané objednatelem dle změnových listů č. 3 a č. 7 naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tzv. přípustnou změnu deminimis, když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací činí 4,93 % oproti sjednané ceně díla, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla. 
b)	Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnových listů č. 2, 4, 5, 6 a 8 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tzn., že zadavatel postupoval dle zpracované projektové dokumentace, nicméně až realizací stavebních prací se projevily fakticky odchylky, jak je popsáno ve změnových listech, přičemž tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn dodatečných a neprováděných prací činí 3,41 % původní hodnoty závazku, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla a po odečtení souvisejících neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku, když činí 3,25% z původní ceny díla.
Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 1.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 59. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 06. 10. 2020.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.
Přílohy smlouvy:
příloha č. 1 – rekapitulace změnových listů 
příloha č. 2 – Změnový list č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 

Ve Frýdku-Místku dne __________			V Praze dne_______________

    Za objednatele:					Za zhotovitele:

    _________________________			__________________________
    RNDr. Michal Pobucký, DiS.				Ing. Václav Apolín
    primátor						ředitel divize 1, Metrostav a.s.