Title: MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDEK–MÍSTEK
Author: ValkovaM
Last saved by: Ing. Simona HANDLÍŘOVÁ
Company: Město Frýdek-Místek

S/0877/2019/IO/3

*MMFMX01DKR6X*
	S/0877/2019/IO/3

_Dodatek _č. _3 _Smlouvy _o _dílo _k _veřejné _zakázce _č. _P19V00000135
_„Výstavba _vodovodních _řadů _v _části _Panské _Nové _Dvory _a _Skalice  _- _část _2. _– _Panské _Nové _Dvory _– _lokalita _č. _3“

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany 

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01
osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxx– vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxx/email: xxxxxxxx

xxxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxx/email:xxxxxxxxxxxxxx,

-	dále jen objednatel
a

INSTALL CZ, s.r.o.
se sídlem Kúty 1723, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupena Dušanem Poláchem, jednatelem
IČ:  25876643
DIČ: CZ25876643
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 23792  
č. účtu: xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx, xxxxxxxx
tel: +420 xxxxxxxx
fax: --- 
email: xxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel
-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Výstavba vodovodních řadů v části Panské Nové Dvory a Skalice – část 2. – Panské Nové Dvory – lokalita č. 3“ následujícího znění a obsahu.

1.	Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.1.2020 na stavební práce pod názvem „Výstavba vodovodních řadů v části Panské Nové Dvory a Skalice – část 2. – Panské Nové Dvory – lokalita č. 3“.
1.1.	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět díla se mění o neprováděné práce spočívající v rozsahu a podrobnostech dle změnového listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku č. 3. 
K neprováděným pracím (méněpracím) došlo na základě vyjádření stávajícího provozovatele vodovodních řadů oproti předpokladu v projektové dokumentaci. Jedná se o tyto neprováděné práce: 
a)	dodávka a montáž vodoměru, který je nutný k přepojení stávající přípojky na nově budovaný vodovodní řad. Vodoměr je instalován provozovatelem na jeho náklady. 

1.2.	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 3 se sjednává v Kč celkem ve výši:
| bez DPH | DPH % | včetně DPH
Původní cena díla | 5 956 994,17 Kč | 1 250 968,78 Kč | 7 207 962,95 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1
(dodatek č. 1 neměl vliv na změnu ceny díla)

5 956 994,17 Kč

1 250 968,78 Kč

7 207 962,95 Kč

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2 | - 1 551 222,69 Kč | - 325 756,76 Kč | - 1 876 979,45 Kč
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3 | - 1 485,- Kč | - 311,85 Kč | - 1 796,85 Kč

Celková cena dle Dodatku 
č. 3

4 404 286,48 Kč

924 900,16 Kč

5 329 186,64 Kč

1.3.	Přípustnost změn
  
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 3 naplňují podmínky dle 
ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změn, a to v části dle článku 1 odst. 1.1. písm. a) dodatku č. 3, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku neprováděných prací činí 0,02 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla.

Neprováděné práce tak byly poměřovány skutečným množstvím a účtovány dle smlouvy o dílo dle jednotkových cen, a to konkrétně dle článku 5 odst. 5.1. smlouvy, kde bylo ujednáno, že: v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále jen méněpráce); v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
2.	Ostatní ujednání smluvy se nemění. 
3.	Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 60. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 20.10.2020.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 3 způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Za objednatele:						Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku 						Ve Frýdlantu nad Ostravicí  

_____________________________				__________________________
RNDr. Michal Pobucký, DiS.			          		Dušan Polách
primátor                                                                          jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2
Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn