DODATEK č. 1
  
SMLOUVY O DÍLO Č. S/0456/2020/IO
 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: RNDr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx/ xxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
				xxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
				tel. xxxxxxxxx/email: xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx – stavební technik
tel.: xxxxxxxxxx/email: xxxxxxxxx
xxxxxxxxx – stavební technik
tel: xxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen objednatel 

a

FICHNA – HUDECZEK a.s. 
se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť 
zastoupena: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva 
IČ: 27765857 
DIČ: CZ27765857 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka 3018 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxx 
ID datové schránky: 7pkd4fx
 
zástupce ve věcech smluvních: 
Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva
 
zástupce ve věcech technických: 
xxxxxxx, výrobní ředitel 
tel: xxxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Dům včelařů Chlebovice - výměna střešní krytiny“.

1.	Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 27.7.2020 na stavební práce pod názvem „Dům včelařů Chlebovice - výměna střešní krytiny“.
1.1.	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje a upravuje o následující dodatečné stavební práce a neprováděné práce:
a)	dodatečné práce 
-	na tesařských konstrukcích včetně souvisejících dodatečných prací,
-	dodatečné práce týkající se osvětlení,
-	nový typ zachytávačů sněhu – kované háky s dřevěnou kulatinou podél okapů,
-	malby v podkroví,
b)	neprováděné práce
-	původní sněhové háky rozmístěné v ploše celé střechy.
 
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1 až 4.

1.2. Původní článek 3 Doba a místo plnění, v odst. 2. se mění, upravuje a doplňuje následovně:
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu:

-	přípravné práce – maximálně do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (do předání a převzetí staveniště)
-	stavební práce – do 172 dnů od předání a převzetí staveniště,
     dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo a v této lhůtě jej jako dokončené předat objednateli.
     
Strany konstatují, že změna termínu dokončení stavebních prací odpovídá ujednání článku 3 odst. 9 smlouvy ve znění „Lhůtu pro dokončení díla je možné prodloužit na základě přípustných změn smlouvy dle ust. § 222 ZZVZ, jejichž potřeba vyplynula z důvodu dodatečné změny rozsahu díla ze strany objednatele nebo překážek na straně objednatele v podobě zjištěných vad v projektové dokumentaci pro provedení stavby, které zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče rozpoznat, a které mají vliv na termín dokončení díla jako celku, a to o přiměřenou dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy.“
Původní termín dokončení stavebních prací 120 dnů od předání a převzetí staveniště se na základě dodatečných prací ze změnových listu č. 1 a č. 2 prodlužuje v tomto dodatku č. 1 celkem o 52 dnů.

Všechny podrobnosti jsou popsány ve změnových listech č. 1 až 4, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1.

1.3.	Původní článek 5 Cena díla se v odst. 1 upravuje následovně:
1.	Cena díla se dle dodatku č. 1 sjednává v Kč celkem ve výši:
 
Cena sjednaná ve smlouvě o dílo	3 274 045,25 Kč bez DPH,
tj. 3 961 594,75 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	761 258,63 bez DPH,
tj. 921 122,94 vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 71 550,00 Kč bez DPH,
tj. – 86 575,50 Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 1	3 963 753,88 Kč bez DPH,
tj. 4 796 142,19 Kč vč. DPH	

1.4.	Přípustnost změn
         
Strany konstatují, že dodatečné a neprováděné práce z dodatku č. 1 dílem naplňují režim přípustné změny de minimis podle analogické aplikace § 222 odst. 4 ZZVZ, dílem představují dodatečné práce dle analogické aplikace § 222 odst. 6 ZZVZ, který umožnuje tyto změny, a to:
a)	dodatečné stavební práce dle změnového listů č. 1 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu analogické aplikace ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které zadavatel nemohl předvídat, resp. byly závislé a seznatelné po postupném odkrytí nosných konstrukcí krovu; s ohledem na jejich technický (reálný) stav, je nutné nahradit nosný konstrukční systém novými prvky, přičemž i nové prvky byly oceněny jednotkovými cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení; hodnota změny dodatečných prací činí oproti původní ceně dle smlouvy 16,15 % , což je v zákonném limitu § 222 odst. 6 ZZVZ.
b)	dodatečné stavební práce dle změnových listů č. 2 až 4 naplňují přípustnou změnu ve smyslu analogické aplikace ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, když hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje změnu hodnoty smlouvy, která oproti původně sjednané ceně díla činí 9,29 %, tedy je v zákonném přípustném limitu, který nepřesahuje 15 % oproti původní sjednané ceně díla, a dle § 222 odst. 4 ZZVZ (jedná se o hodnotu změny smlouvy de minimis, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat).
Součet veškerých dodatečných prací dle dodatku č. 1 po započtení neprováděných prací činí oproti ceně díla ve smlouvě 21,07%. Ve výsledku tato hodnota nepřevyšuje při analogické aplikaci pravidel dle § 222 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku.

2.	Závěrečná ustanovení

2.	Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
3.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 63. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 24. 11. 2020.
5.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
- Příloha č. 4 – Změnový list č. 4
- Příloha č. 5 – Rekapitulace změnových listů 

Za objednatele:		                                             Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne…………..                                          V Píšti, dne………………………

______________________		                                   __________________________
RNDr. Michal Pobucký, DiS.                                                           Ing. Milan Hudeczek 
           primátor                                                                        předseda představenstva