Název veřejné zakázky: „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky “

Část 3 – Zelinkovice a Lysůvky

číslo smlouvy objednatele: S/0667/2019/IO			číslo smlouvy zhotovitele: DZC 19010625/Ve

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č.  S/0667/2019/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx/ xxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx /email: xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx /email: xxxxxxxxxxx 

-	dále jen objednatel

a 

Metrostav a.s.
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8
zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci
IČ: 00014915
DIČ: CZ0014915
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxx, kód xxxxxxxxx
ID datové schránky: bnpcf46
Kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxx, ředitel oblasti Severomoravský region, divize 1
tel: xxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/0667/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 3 – kanalizace Zelinkovice a Lysůvky následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku
V návaznosti na skutečnost, že se v průběhu realizace díla vyskytly okolnosti, které:
a)	objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat a odhalit a dále,
b)	zhotoviteli objektivně bránily v provádění díla dle harmonogramu realizace díla a zároveň bezprostředně ovlivnily lhůtu pro dokončení díla a jeho předání objednateli, přičemž 
c)	jde o okolnosti, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou jednoznačně vymezeny v objednatelem vyhrazené změně závazku dle ust. § 100 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v čl. 3 odst. 6 a násl. smlouvy o dílo, 
se smluvní strany ve smyslu ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změnách smlouvy o dílo. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0667/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 následujícího rozsahu:

1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající v provedení:
-	Dočasné zpevnění komunikace stoky L3-1 mezi Š 31-4 až 10 pro zimní provoz;
Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 12, viz příloha č. 1 dodatku č. 2.
 
1.2. Původní článek 3 DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 2, se nahrazuje následujícím  ujednáním: 
Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli do 31.5.2021.

1.3. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK	
 Původní cena díla	14 123 984,29	2 966 0,36,70	17 090 020,992	
 Celková cena dle dodatku č. 1	15 254 455,89	3 203 435,74	18 457 891,63	
 Dodatečné stavební práce 
 dle dodatku č. 2	    456 569,85	    95 879,67	   552 449,52	
 Celková cena dle dodatku č. 2 	15 711 025,74	3 299 315,41	19 010 341,15	

Součet veškerých dodatečných prací po započtení neprováděných prací sjednaných v dodatku č. 1 a č. 2 smlouvy představuje navýšení 11,24 % oproti původní celkové ceně dle smlouvy.

1.4. Přípustnost změn
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:
a)	změna termínu provádění díla byla objednatelem vyhrazena podle § 100 ZZVZ ve spojení s ujednáním v čl. 3 odst. 6 a násl. smlouvy o dílo, a tedy naplňuje přípustnou změnu ve smyslu:

•	ust. § 222 odst. 2 ZZVZ tzv. přípustné uplatnění vyhrazené změny, kdy plnění díla bylo dílem ovlivněno zpožděním realizace příjezdové komunikace k čerpací stanici, která nebyla součástí stavebních prací zhotovitele v rozsahu smlouvy, naopak šlo o objednatelem vymíněné dodatečné práce - realizace příjezdové komunikace k čerpací stanici, kterou objednatel prováděl mimo režim této smlouvy samostatně v rámci vertikální spolupráce dle § 11 ZZVZ se společností TS a.s. a výstavba čerpací stanice se opozdila oproti smluvnímu harmonogramu, tedy dle ust. § 2627 občanského zákoníku zhotovitel při provádění díla zjistil skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem a oznámil to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhl mu změnu a dobu provedení díla, tedy v důsledku překážky na straně objednatele se termín dokončení díla nad rámec smlouvy o dílo sjednává do 31. 5. 2021.

b)	změna rozsahu díla včetně termínu provedení díla, a to ve smyslu: 

•	přípustné změny smlouvy stran dodatečných prací dle změnového listu č. 12, jež naplňují režim § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tzn., že objednatel postupoval dle zpracované projektové dokumentace, nicméně až realizací stavebních prací se projevily fakticky odchylky, jak je popsáno ve změnovém listu č. 12, přičemž tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn dodatečných a neprováděných prací činí 3,23 % původní hodnoty závazku, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla. Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 1.

2.	Závěrečná ujednání
1.	Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 63. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 24. 11. 2020.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

Přílohy smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 12
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Ve Frýdku-Místku dne __________			V Praze dne_______________

    Za objednatele:					Za zhotovitele:

    _________________________			__________________________
    RNDr. Michal Pobucký, DiS.				Ing. Václav Apolín
    primátor						ředitel divize 1, Metrostav a.s.