DODATEK č. 2
  
SMLOUVY O DÍLO Č. S/0456/2020/IO
 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: 			Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: 			RNDr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem
IČ:  				00296643
DIČ: 				CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: 	xxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 		w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
				xxxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
				tel. xxxxxxxxx/email: xxxxxxxxxx
xxxxxxxx – stavební technik
tel.: xxxxxxxxxx/email: xxxxxxxx
xxxxxxxx – stavební technik
tel: xxxxxxxx / email: xxxxxxxxxx

dále jen objednatel 

a

FICHNA – HUDECZEK a.s. 
se sídlem: 			Opavská 535/17, 747 18 Píšť 
zastoupena: 			Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva 
IČ: 				27765857 
DIČ: 				CZ27765857 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka 3018 
bankovní spojení/číslo účtu: 	xxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 		7pkd4fx
 
zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva
 
zástupce ve věcech technických: 	xxxxxxxxxxx, výrobní ředitel 
				tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Dům včelařů Chlebovice - výměna střešní krytiny“.

1.	Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 27.7.2020 na stavební práce pod názvem „Dům včelařů Chlebovice - výměna střešní krytiny“.
1.1.	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

a) Předmět díla se rozšiřuje a upravuje o následující dodatečné stavební práce spočívající v:
- prodloužení použití fasádního lešení,
- navýšení ošetření dřevěných konstrukcní tlakovou injektáží,
- dodávce dřevěných lišt mezi omítkovou římsou a okapovým plechem,
- dodávce závětrných lišt z titanziku,
- ve výměně dřevěných konstrukcní, 
- opravě stupňů podlah v podkroví u pozednic,
- navýšení elektroinstalačních prací,
- navýšení plochy střešního pláště o 30,6 m2 z důvodu rozdílu mezi výměrou v projektové  dokumentaci a skutečností zjištěnou během realizace na stavbě.
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 5 a 6, viz příloha č. 1 a 2.

b) Předmět díla se upravuje o následující neprováděné stavební práce spočívající v:
- po dobu stavby nebylo možné fasádní lešení opatřit ochrannou sítí,
- nebyl osazen 1 ks ventilačního komínku,
- snížení nákladů na skládkovné odpadů.
Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listě č. 5, viz příloha č. 1.

1.2.	Původní článek 5 Cena díla se v odst. 1 upravuje následovně:
1.	Cena díla se dle dodatku č. 2 sjednává v Kč celkem ve výši:
 
Cena sjednaná ve smlouvě o dílo	3 274 045,25 Kč bez DPH,
tj. 3 961 594,75 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	761 258,63 bez DPH,
tj. 921 122,94 vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 71 550,00 Kč bez DPH,
tj. - 86 575,50 Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 1	3 963 753,88 Kč bez DPH,
tj. 4 796 142,19 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2	193 251,02 Kč bez DPH,
tj. 233 833,74 Kč vč. DPH
	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	-	20 471,05 Kč bez DPH,
 tj. - 24 769,97 vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 2	4 136 533,85 Kč bez DPH,
tj. 5 005 205,96 Kč vč. DPH  	

1.3.	Přípustnost změn
         
Strany konstatují, že dodatečné a neprováděné práce z dodatku č. 2 naplňují režim dle analogické aplikace § 222 odst. 6 ZZVZ, který umožnuje tyto změny. Dodatečné stavební práce a neprováděné práce dle změnových listů č. 5 a č. 6 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu analogické aplikace ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které zadavatel nemohl předvídat, resp. byly závislé a seznatelné při postupném provádění prací. Hodnota změny dodatečných a neprováděných prací celkem (dodatek č. 1 a dodatek č. 2) činí oproti původní ceně dle smlouvy 21,43 %, což je v zákonném limitu § 222 odst. 6 ZZVZ.

Součet veškerých dodatečných prací dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 po započtení neprováděných prací činí oproti ceně díla ve smlouvě 26,34 %. Ve výsledku tato hodnota nepřevyšuje při analogické aplikaci pravidel dle § 222 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku.

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 70. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 09. 02. 2021.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

Přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 5 
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 6 
- Příloha č. 3 – Rekapitulace změnových listů

Za objednatele:		                                             Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku, dne…………..                                          V Píšti, dne………………………

______________________		                                   __________________________
RNDr. Michal Pobucký, DiS.                                                           Ing. Milan Hudeczek 
           primátor                                                                        předseda představenstva