Název veřejné zakázky: „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky “

Část 3 – Zelinkovice a Lysůvky

číslo smlouvy objednatele: S/0667/2019/IO			číslo smlouvy zhotovitele: DZC 19010625/Ve

DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo č.  S/0667/2019/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxxx / email: xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx /email: xxxxxxxxx 
xxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxxx /email: xxxxxxxxxxx 

-	dále jen objednatel

a 

Metrostav a.s.
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8
zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci
IČ: 00014915
DIČ: CZ0014915
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx / xxxxxxxxx
ID datové schránky: bnpcf46
Kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Severomoravský region, divize 1
tel: xxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S/0667/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 3 – kanalizace Zelinkovice a Lysůvky následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).
1.  Předmět dodatku
V návaznosti na skutečnost, že se v průběhu realizace díla vyskytly okolnosti, které:
a)	objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat a odhalit a dále,
b)	jde o okolnosti, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou jednoznačně vymezeny v objednatelem vyhrazené změně závazku dle ust. § 100 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v čl. 3 odst. 6 a násl. smlouvy o dílo, 
se smluvní strany ve smyslu ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změnách smlouvy o dílo. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0667/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 následujícího rozsahu:
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0667/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 následujícího rozsahu:
1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:
-	v provedení kanalizačních přípojek dle skutečného počtu a výměry; 
-	ve změně trasy stoky L1;   
-	ve změně trasy protlaku z důvodu kolize s neznámým potrubím;
-	v prodloužení délky přípojky NN k čerpací stanici;
-	v prodloužení délky výtlaku z čerpací stanice včetně doplnění vybavení čerpací stanice;
-	ve změně poměru délky kanalizace prováděné v zeleni a ve zpevněných plochách a částečné úpravě zásypu rýhy pod opraveným povrchem komunikací.
Předmět plnění se upravuje o neprováděné práce:
-	související s úpravou délek případně záměnou poklopů revizních šachtic kanalizačních přípojek; 
-	zemní práce a terénní úpravy související se změnou trasy stoky L1. 
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1, 9, 11, 14, 15 a 17 viz příloha č. 1 tohoto dodatku. 
1.3. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK	
 Původní cena díla	14 123 984,29	2 966 0,36,70	17 090 020,99	
 Celková cena dle dodatku č. 1	15 254 455,89	3 203 435,74	18 457 891,63	
 Celková cena dle dodatku č. 2	 15 711 025,74	3 299 315,41    	 19 010 341,15	
 Neprováděné stavební práce 
 dle dodatku č. 3	- 77 575,46	16 290,85	- 93 866,31	
 Dodatečné stavební práce 
 dle dodatku č. 3	    1 983 175,83	    416 466,92	2 399 642,75	
 Celková cena dle dodatku č. 3 	17 616 626,11	3 699 491,49	21 316 117,60	

Součet veškerých dodatečných prací po započtení neprováděných prací sjednaných v dodatcích č. 1, 2 a 3 smlouvy představuje navýšení o 24,73 % oproti původní celkové ceně dle smlouvy.

1.4. Přípustnost změn
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:
1)	Dodatečné a neprováděné práce vyžádané objednatelem dle změnových listů č. 1, 14 a 15 naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tzv. přípustnou změnu de minimis a nemění celkovou povahu závazku, neboť:
-	hodnota změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 3 v rozsahu neprováděných prací dle změnového listu č. 1 činí 61 701,04 Kč bez DPH, 
-	hodnota změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 3 v rozsahu dodatečných prací dle změnových listů č. 1, 14 a 15 činí 893 779,97 Kč bez DPH, což: 
v součtu hodnot změny závazků ze smlouvy  dle dodatku č. 3 v rozsahu neprováděných a dodatečných prací dle změnových listů  ZL č. 1, 14 a 15 činí 955 481,01 Kč bez DPH, což představuje  6,76 % oproti sjednané ceně díla, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně díla. 
Celková hodnota přípustné změny závazku v důsledku dodatečných a neprováděných prací ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ v součtu dodatků č. 1, 2 a 3 činí 11,69 % oproti sjednané ceně díla, je tedy v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla.
2)	Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnových listů č. 9, 11 a 17 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tzn., že zadavatel postupoval dle zpracované projektové dokumentace, nicméně až samotnou realizací stavebních prací se projevila fakticky reálná geologická skladba podloží v rozsahu celého místa plnění -budované sítě, včetně neočekávaných překážek v podobě křížení jiných sítí, z čehož vyplynul nezbytný rozsah dodatečných a neprováděných prací, jak je popsáno ve změnových listech, přičemž tyto dodatečné/neprováděné stavební práce, resp. postupy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť: 

-	hodnota změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 3 v rozsahu neprováděných prací dle změnového listu č. 9 činí    15 874,42 Kč bez DPH Kč,        
-	hodnota změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dle dodatku č. 3 v rozsahu dodatečných prací dle změnových listů č. 9, 11 a 17 činí 1 089 395,86 Kč bez DPH, což:

v součtu hodnot změny závazků ze smlouvy  dle dodatku č. 3 v rozsahu neprováděných a dodatečných prací dle změnových listů č. 9, 11 a 17 činí 1 105 270,28 Kč bez DPH, což představuje 7,83 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.

Celková hodnota doposud sjednaných neprováděných a prováděných prací ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ dle dodatků č. 1, 2 a 3 činí 14,47 % původní hodnoty závazku, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla a po odečtení souvisejících neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku, tj. původní sjednané ceny díla dle smlouvy.

2.	Závěrečná ujednání
1.	Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 74. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 30. 03. 2021.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 3 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 3 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 3 podle tohoto ujednání.

Přílohy smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 1, 9, 11, 14, 15 a 17
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Ve Frýdku-Místku dne __________			V Praze dne_______________

    Za objednatele:					Za zhotovitele:

    _________________________			__________________________
    Petr Korč						Ing. Václav Apolín
    primátor						ředitel divize 1, Metrostav a.s