Název veřejné zakázky: „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky “

Část 3 – Zelinkovice a Lysůvky

číslo smlouvy objednatele: S/0667/2019/IO			číslo smlouvy zhotovitele: DZC 19010625/Ve

DODATEK č. 4
Smlouvy o dílo č.  S/0667/2019/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu:xxxxxxxxxxxx./ xxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxIng. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxxx /email: xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx /email: xxxxxxxxxxxxx 

-	dále jen objednatel

a 

Metrostav a.s.
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8
zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci
IČ: 00014915
DIČ: CZ0014915
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx
ID datové schránky: bnpcf46
Kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Severomoravský region, divize 1
tel:  xxxxxxxxxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. S/0667/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 3 – kanalizace Zelinkovice a Lysůvky následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku
V návaznosti na skutečnost, že se v průběhu realizace díla vyskytly okolnosti, které:
a)	objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat a odhalit a dále,
b)	jde o okolnosti, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou jednoznačně vymezeny v objednatelem vyhrazené změně závazku dle ust. § 100 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v čl. 3 odst. 6 a násl. smlouvy o dílo, 
se smluvní strany ve smyslu ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změnách smlouvy o dílo. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0667/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 následujícího rozsahu:
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0667/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 následujícího rozsahu:

1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:
-	ve změně zatřídění horniny při výskytu rostlé skály a oprava vodovodu na stoce L3/1 na ulicích Hraniční a Zahradnická.
Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 10 viz příloha č. 1 tohoto dodatku. 

1.3. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 4 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK	
 Původní cena díla	14 123 984,29	2 966 0,36,70	17 090 020,99	
 Celková cena dle dodatku č. 1	15 254 455,89	3 203 435,74	18 457 891,63	
 Celková cena dle dodatku č. 2	 15 711 025,74	3 299 315,41    	 19 010 341,15	
 Celková cena dle dodatku č. 3	17 616 626,11	3 699 491,49	21 316 117,60	
 Dodatečné stavební práce 
 dle dodatku č. 4	    828 454,20	    173 975,38	1 002 429,58	
 Celková cena dle dodatku č. 4 	18 445 080,31	3 873 466,87	22 318 547,18	

Součet veškerých dodatečných prací po započtení neprováděných prací sjednaných v dodatcích č. 1, 2, 3 a 4 smlouvy představuje navýšení o 30,59 % oproti původní celkové ceně dle smlouvy.

1.4. Přípustnost změn
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:
1)	Dodatečné práce dle změnového listu č. 10 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tzn., že zadavatel postupoval dle zpracované projektové dokumentace, nicméně až samotnou realizací stavebních prací se projevila fakticky reálná geologická skladba podloží v rozsahu celého místa plnění - budované sítě, včetně neočekávaných překážek v podobě křížení jiných sítí, z čehož vyplynul nezbytný rozsah dodatečných prací, jak je popsáno ve změnovém listu č. 10, přičemž tyto dodatečné stavební práce, resp. postupy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť: 

Hodnota změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dle dodatku č. 4 v rozsahu dodatečných prací dle změnového listu č. 10 činí 828 454,20 Kč bez DPH, což představuje 5,87 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.

Celková hodnota doposud sjednaných neprováděných a prováděných prací ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ dle dodatků č. 1, 2 , 3 a 4 činí 20,34 % původní hodnoty závazku, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla a po odečtení souvisejících neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku, tj. původní sjednané ceny díla dle smlouvy.

2.	Závěrečná ujednání
1.	Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 75. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 13. 04. 2021.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 3 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 4 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 4 podle tohoto ujednání.

Přílohy smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 10
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Ve Frýdku-Místku dne __________			V Praze dne_______________

    Za objednatele:					Za zhotovitele:

    _________________________			__________________________
    Petr Korč						Ing. Václav Apolín
    primátor						ředitel divize 1, Metrostav a.s