číslo smlouvy objednatele: S/0666/2019/IO	           číslo smlouvy zhotovitele IMOS: 201903401/0428/19/VHSaDS
					           číslo smlouvy zhotovitele VHS stavby a.s.: 596/2019

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č.  S/0666/2019/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx  – vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxx
xxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxx /email: xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx /email: xxxxxxxxxxxxxxx 

-	dále jen objednatel

a 

společníci společnosti označované názvem „Společnost pro Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“

Vedoucí společník a správce společnosti – IMOS Brno a.s.
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, ve věci předmětného zadávacího řízení oprávněn jednat p. Dušan Stříž, vedoucí oddělení nabídek, na základě Pověření ze dne 15. 10. 2018
IČ: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl B vložka 2211
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 562eh6n
Kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxx, ředitel Závodu Brno - VHS a DS
tel: xxxxxxxx, / email: xxxxxxxxxx 
a

Společník - VHS stavby a.s.

se sídlem Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov
zastoupena Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva a Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva
IČ: 251 83 052
DIČ: CZ25183052
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl B vložka 4147
-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/0666/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 2 – kanalizace Chlebovice následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0666/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 2 – kanalizace Chlebovice.

1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:
-	v rekonstrukci stávající dešťové kanalizace z betonových trub DN 300mm, která je v kolizi s novou kanalizací splaškovou a přepojení stávajících dešťových přípojek k přiléhajícím nemovitostem;
-	ve změně položek výkopových prací a zásypového materiálu v části trasy stok B-4 a B-6 souvisejících s provedením kanalizace v komunikaci;

Předmět se plnění upravuje o neprováděné práce spočívající:
-	v odečtení příslušných položek výkopů, zásypů a uvedení pozemku do původního stavu pro realizaci stok B-4 a B-6 v zeleni; 

 
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 11 a 14 viz příloha č. 1 dodatku. 

1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění jejích dodatků se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK	
 Původní cena díla	67 573 198,84	14 190 371,76	81 763 570,60	
 Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 1	    -781 924,23	-164 204,09	-946 128,32	
 Dodatečné stavební práce 
 dle dodatku č. 1	1 432 900,60	300 909,13	1 733 809,73	
 Celkové navýšení ceny 
 dle dodatku č. 1	650 976,37	136 705,04	787 681,41	
 Celková cena dle dodatku č. 1	68 224 175,21	14 327 076,80 	82 551 252,01	
Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 2	-24 649,12	-5 176,32	-29 825,44	
Dodatečné stavební práce 
 dle dodatku č. 2	6 619 833,00	1 390 164,93	8 009 997,93	
Celkové navýšení ceny 
 dle dodatku č. 2	 6 595 183,88	1 284 988,61	7 980 172,49	
Celková cena dle dodatku č. 2	74 819 359,09	15 746 074,19	90 531 424,50	

Součet veškerých dodatečných prací činí 11,92 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 10,72 %.

1.3.	Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), tím, že:
 
Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnových listů č. 11 a 14 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tzn., že zadavatel postupoval dle zpracované projektové dokumentace, nicméně až realizací stavebních prací se projevily fakticky odchylky, jak je popsáno ve změnových listech, přičemž tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn dodatečných a neprováděných prací činí 9,83 % původní hodnoty závazku, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla a po odečtení souvisejících neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku, tj. původní sjednané ceny díla dle smlouvy.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení  
a objednatel 2 vyhotovení.

5.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 77. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 27.04.2021.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnové listy č. 11 a 14
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 
    Za objednatele:				Za zhotovitele:

    _________________________		__________________________
    Petr Korč					za IMOS Brno, a.s.
    primátor                                                 Ing. Robert Suchánek 
						předseda představenstva

						__________________________
    						za VHS stavby, a.s.
    	                             		           Ing. Martin Žagan 
					           místopředseda představenstva

						__________________________
    						za VHS stavby, a.s.
                                                                 Ing. Michal Maděra 
						člen představenstva