DODATEK Č. 4

SMLOUVY O DÍLO Č. S/0449/2020/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxx/ xxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxx – stavební technik
tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx – stavební technik
tel: xxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxxx 

-	dále jen objednatel

a

MORYS s. r. o. 
se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem
                   na základě plné moci ze dne 21. 12. 2020 
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 1504
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx, č.ú: xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx/ xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 2tcnqr9
tel/e-mail: xxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxx
zástupce ve věcech technických: 
xxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 4 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111“ následujícího znění a obsahu.

1.	Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 05.08.2020 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111“.

1.1.	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce, ke kterým došlo z objektivních důvodů dle skutečnostem vzniklým během realizace díla a objednatel, ačkoli jednal s náležitou péčí, nemohl tyto skutečnosti předvídat:

a)	Při bouracích pracích původních výplní otvorů byly zjištěny porušené konstrukce nadpraží a chybějící překlady nad jednotlivými okny. Autorský dozor navrhl doplnění porušených kleneb a překladu nadpraží novými ocelovými překlady tvaru L 130/65/8 mm, které se osadí dle potřeby z jednoho či obou líců. Celková délka překladů činí 58,55m; celková hmotnost činí: 58,55 x 1,1 x 11,80 = 759,797 kg.
Dodatečné náklady jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 9.
b)	Po demontáží stávajícího nákladního výtahu a po přesném zaměření výtahové šachty byl zjištěn rozměrový nesoulad s uvažovanými rozměry výtahové šachty v PD, který neumožnuje instalovat výtah požadovaných rozměrů. Po dohodě s autorským dozorem 
a dodavatelem nákladního výtahu, je navrženo vybourání stávajících konstrukcí opláštění výtahové šachty ve všech patrech (1.PP-3.NP). Dále dojde k rozšíření prostupů šachty přes stropy jednotlivých podlaží na nutný požadovaný rozměr, podchycení stávajících konstrukcí stropu a jejich konečná statická fixace pomocí ocelových konstrukcí. Nově je také navrženo sádrokartonové opláštění výtahové šachty v požadované protipožární úpravě.
Dodatečné náklady jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 10.
c)	Při vzorkování fasádního obkladu stěn a obkladu ŽB konstrukce rampy byl ve spolupráci hlavního architekta města FM, autorským dozorem a zástupcem uživatele vybrán materiál ORO Brasil, který vzhledově a barevně navazuje na celkové barevné řešení fasády (barvy fasádní omítky, lazura oken a dveří, barva klempířských prvků). Zhotovitel však navrhl změnu tloušťky materiálu, kterou přizpůsobuje typu umístění žulového obkladu (fasádní obklad, dlažba rampy a obklad schodišťových stupňů). Tato změna nebude mít vliv na požadovanou kvalitu, odolnost a životnost realizovaného žulového obkladu. Svislý obklad stěn rampy a schodiště bude proveden v tl. 10mm, dlažba rampy bude provedena 
v tloušťce 20mm. Jedná se o záměnu tloušťky materiálu, který byl původně navržen v tl. 30 mm.
Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 11.
d)	Zhotovitel společně s uživatelem a autorským dozorem navrhl ochranný nátěr fasády 
a žulové dlažby/obkladů 1.NP, jako ochranu těchto konstrukcí, proti nepříznivým účinkům silného dopravního provozu v okolí budovy, solím a biologickým znečištěním soklu. Tento ochranný nátěr bude aplikován na fasádě při ulici Hlavní do úrovně římsy nad 1.NP a fasádě u parkoviště (naproti Policie ČR). Plocha žulových povrchů na rampě, schodišti a soklu činí 209,411 m2, plocha fasády do úrovně římsy nad 1.NP činí 160,00 m2.
Dodatečné náklady jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 12.
e)	V průběhu koordinací rozvodů elektroinstalací s provozem a vnitřním vybavení knihovny vyvstaly nutné požadavky na úpravy (doplnění/vypuštění) rozvodů silnoproudu 
a slaboproudu a to dodatečná úprava kabelových tras přívodu napájení výtahu z 1.NP do 4.NP; doplnění elektroinstalací výkladců pro potřeby prezentace provozu knihovny; doplnění rozvodů slaboproudých kabeláží pro potřebu doplnění kamerového systému zabezpečení budovy a pro instalace WiFi routeru v celé budově nové knihovny; doplnění propojovací trasy kabelového svazku (21 kabelů) v trase nové servrovny v 1.NP ke stávajícímu racku ve 3.NP; doplnění rozvodů slaboproudých kabeláží, pro potřebu nouzového tlačítka (asistent invalida) při použití invalidního WC s obslužným pultem ve 2.NP, dodávka a instalace systému zvonků s komunikátory, doplnění podlahových krabic 
a méněpráce v podobě odečtení 2 ks venkovních svítidel včetně výložníků (konzol).
Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 13.
f)	Jedná se o doplnění bednění svislých ploch střešních vazníku a střešních říms (obvod okapu střechy nad 4.NP), které byly uvažovány v PD , ale nebyly zohledněny ve výkazu výměr. 
K této konstrukci je i dopočítáno příslušné oplechování dle skutečné délky.
Dodatečné náklady jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 14.

1.2.	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 4 se sjednává v Kč celkem ve výši:
Cena sjednaná ve smlouvě o dílo	37 351 587,30 Kč bez DPH,
tj. 45 195 420,63 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	376 031,61 bez DPH,
tj. 454 998,25 vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 3 495,76 Kč bez DPH,
tj. - 4 229,87  Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 1	37 724 123,15 Kč bez DPH,
tj. 45 646 189,01 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2	2 110 217,60 bez DPH,
tj. 2 553 363,30 vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	- 1 585 026,20 Kč bez DPH,
tj. - 1 917 881,70  Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 2	38 249 314,55 Kč bez DPH,
tj. 46 281 670,61 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3	1 453 633,46 bez DPH,
tj. 1 758 896,49 vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3	- 1 222 849,14 Kč bez DPH,
tj. - 1 479 647,46  Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 3	38 480 098,87 Kč bez DPH,
tj. 46 560 919,64 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4	599 331,44 Kč bez DPH,
tj. 725 191,04 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 4	- 147 402,43 Kč bez DPH,
tj. - 178 356,94 Kč  Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 4	38 932 027,88 Kč bez DPH,
tj. 47 107 753,74 Kč vč. DPH	

1.3.	Přípustnost změn
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č.4 naplňují podmínky ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Dle dodatku č. 4 naplňují dodatečné práce a neprováděné práce:
a)	dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ*, a to v rozsahu dle změnových listů č. 9, 10, 11 a 14 , když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 1,17%, tedy je v zákonném přípustném limitu 50% oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 0,43 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. 
* Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, 
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
Je skutečností, že podkladovou projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) zpracovala autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jako odborně způsobilá osoba, které přísluší vykonávat tuto tzv. vybranou činnost ve výstavbě ve smyslu § 156 odst. 1, odst. 2 písm. h) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.  Uvedeným způsobem zadavatel vyhověl veřejnoprávním předpisům a taktéž požadavkům na obsah zadávací dokumentaci pro stavební práce ve smyslu § 92 zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ ve spojení s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Projektová dokumentace představuje pokyn zadavatele ve smyslu ust. § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve vztahu ke zhotoviteli, podle kterého se má řídit a stavbu provést. V souladu se smlouvou a tímto ustanovením § 2594 upozornil zhotovitel na nevhodné řešení stavebních prací s návrhem změn, a to postupem, jak předvídá smlouva. 

b)	dílem režim přípustné změny deminimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ**, a to v rozsahu dle změnových listů č. 12 a 13, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelem vymíněných dodatečných 
a neprováděných prací prací činí 0,92 %,  tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla,  
** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatků č. 1 až 4 v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací představuje 0,92 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatků č. 1 až 4 v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací představuje 14,66 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50% oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 3,74 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.
Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 2 k důvodové zprávě.

Dle dodatků č. 1 až 4 celková cena dodatečných stavebních prací (cena více prací) činí 4 539 214,11 Kč bez DPH, což představuje 12,15 % z ceny dle smlouvy.
Dle dodatků č. 1 až 4 celková cena neprováděných prací (cena méně prací) činí  - 2 958 773,53 Kč bez DPH, což představuje 7,92 % z ceny dle smlouvy.
Po započtení neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 4,23 %.

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 81. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 15. 06. 2021.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 4 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 4 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 4 podle tohoto ujednání.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 9, 10, 11, 12, 13 a 14
Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne…………………….                             	V Ostravě, dne……………………..

_________________________				_________________________
Petr Korč							Ing. Jiří Šmidák
primátor                                                                          výkonný ředitel