Název veřejné zakázky: „Frýdek-Místek - odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a 
                                       Lysůvky“ 

Část 3 – Zelinkovice a Lysůvky

číslo smlouvy objednatele: S/0667/2019/IO			číslo smlouvy zhotovitele: DZC 19010625/Ve
DODATEK č. 5
Smlouvy o dílo č.  S/0667/2019/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxx / email: xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx /email: xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxx /email: xxxxxxxxxxxx 

-	dále jen objednatel

a 

Metrostav a.s.
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci
IČ: 00014915
DIČ: CZ0014915
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxx, kód xxxxxxxxx
ID datové schránky: bnpcf46
Kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxx, ředitel oblasti Severomoravský region, divize 1
tel: xxx / email: xxxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo                         č. S/0667/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 3 – kanalizace Zelinkovice a Lysůvky následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku
V návaznosti na skutečnost, že se v průběhu realizace díla vyskytly okolnosti, které:
a)	objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat a odhalit a dále,
b)	zhotoviteli objektivně bránily v provádění díla dle harmonogramu realizace díla a zároveň bezprostředně ovlivnily lhůtu pro dokončení díla a jeho předání objednateli, 
c)	jde o okolnosti, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou jednoznačně vymezeny v objednatelem vyhrazené změně závazku dle ust. § 100 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v čl. 3 odst. 6 a násl. smlouvy o dílo, přičemž
se smluvní strany ve smyslu ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změnách smlouvy o dílo. 
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0667/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 následujícího rozsahu:

1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:
-	v doplnění trasovacích tyčí – sloupků v zatravněných plochách dle požadavku předpokládaného provozovatele kanalizace,
-	dodávky a montáže dvou dešťových vpustí.
Předmět plnění se upravuje o neprováděné práce:
-	práce, které nebyly v rámci realizace zakázky provedeny,
-	odečet pamětní tabule. 
Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 18 a 19 viz příloha č. 1 tohoto dodatku. 

1.2. Původní článek 3 DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 2, se nahrazuje následujícím ujednáním: 
Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli do 20. 07. 2021. Z čehož činí období    od 01.06.2021 do 06.07.2021 nepříznivé klimatické podmínky znemožňující provádění zemních         a dokončovacích prací a období od 07.07.2021 do 20.07.201 dodávka a montáž dodatečně požadovaných trasovacích tyčí.

1.3. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 5 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK	
 Původní cena díla	14 123 984,29	2 966 0,36,70	17 090 020,99	
 Celková cena dle dodatku č. 1	15 254 455,89	3 203 435,74	18 457 891,63	
 Celková cena dle dodatku č. 2	 15 711 025,74	3 299 315,41    	 19 010 341,15	
 Celková cena dle dodatku č. 3	17 616 626,11	3 699 491,49	21 316 117,60	
				
 Celková cena dle dodatku č. 4 	18 445 080,31	3 873 466,87	22 318 547,18	
 Neprováděné stavební práce 
 dle dodatku č. 5	- 377 161,24	- 79 203,86	- 456 365,10	
 Dodatečné stavební práce 
 dle dodatku č. 5	63 928,47	13 424,98	77 353,45	
 Celková cena dle dodatku č. 5 	18 131 847,54	3 807 687,99	21 939 535,53	

Součet veškerých dodatečných prací po započtení neprováděných prací sjednaných v dodatcích č. 1, 2, 3, 4 a 5 smlouvy představuje navýšení o 28,38 % oproti původní celkové ceně dle smlouvy.

1.4. Přípustnost změn
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:
a)	Dodatečné a neprováděné práce vyžádané objednatelem dle změnových (změnového) listů(u) č. 18 a 19 naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tzv. přípustnou změnu de minimis, když hodnotay závazku v důsledku dodatečných prací činí 0,19 % oproti sjednané ceně díla, tedy je v zákonném přípustném limitu (v součtu všech dodatků ke smlouvě o dílo) do 15% oproti původně sjednané ceně díla.  a nemění celkovou povahu závazku, neboť:
hodnota změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 5
v rozsahu dodatečných prací dle změnového listu č. 19 činí 63 927,47 Kč bez DPH     a v rozsahu neprováděných prací dle změnpvého listu č. 18 činí 377 161,24 Kč bez DPH, což: 
v součtu hodnot změny závazků ze smlouvy  dle dodatku č. 5 v rozsahu neprováděných a dodatečných prací dle změnových listů  ZL č. 18 a 19 činí 441 089,71 Kč bez DPH, což představuje  14,81 % oproti sjednané ceně díla, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně díla. 

b)	změna termínu provádění díla byla objednatelem vyhrazena podle § 100 ZZVZ ve spojení s ujednáním v čl. 3 odst. 6 a násl. smlouvy o dílo, a tedy naplňuje přípustnou změnu
ve smyslu:

•	ust. § 222 odst. 4 ZZVZ tzv. přípustné uplatnění vyhrazené změny, kdy plnění díla bylo dílem ovlivněno nepříznivými klimatickými podmínkami, které bránily provádění prací technologickými postupy anebo v souladu s příslušnými 
technickými normami na díle jako celku, znemožňujícími provést dílo dohodnutým způsobem a oznámil to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhl mu změnu 
a dobu provedení díla, tedy v důsledku klimatických podmínek se termín dokončení díla nad rámec smlouvy o dílo sjednává do 20. 07. 2021.

2.	Závěrečná ujednání
1.	Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 83. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 29. 06. 2021.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 5 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření.
Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 5 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku 
č. 5 podle tohoto ujednání.

Přílohy smlouvy:
příloha č. 1 – Změnové listy č. 18 a 19
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 

Ve Frýdku-Místku dne __________			V Praze dne_______________

    Za objednatele:					Za zhotovitele:

    _________________________			__________________________
    Petr Korč						Ing. Václav Apolín
    primátor						ředitel divize 1, Metrostav a.s