Dodatek č. 1
smlouvy č. S/0438/2020/IO o výkonu činností koordinátora BOZP na stavbě 
„Domov pro seniory 28. října – společenské prostory “

Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: 	Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupené: 	Ing. Peterem Mikulenkou, vedoucím investičního odboru
IČO: 		00296643
bankovní spojení: 	xxxx
číslo účtu: 	xxxxx/xxxx
kontaktní osoba: 	xxxxxxxxx, xxxxxxx
telefon: 		xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
e-mail: 		xxxxxxxxxxx; lxxxxxxxxxxx 

-	dále jen objednatel

a

HGH safety s.r.o.
se sídlem:		Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9
zastoupena:		Ing. Davidem Hoďou, jednatelem společnosti
IČ: 			018007544
DIČ: 			CZ01807544
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 211957
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx/xxxxxxx
ID datové schránky: 	
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxx

	
-	dále jen koordinátor BOZP
-	objednatel a koordinátor BOZP dále jen strany

smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Domov pro seniory 28. října – společenské prostory“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.	Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 16.03.2021 pro výkon činnosti koordinátora BOZP na zakázce pod názvem „Domov pro seniory 28. října – společenské prostory“.    
                
1.1.	Původní článek č. II. Předmět smlouvy se upravuje o následující ujednání:
1.výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi Stavby se prodlužuje o 41 dnů.

1.2.	Původní článek č. VI. Odměna se upravuje o následující ujednání:
1.Koordinátoru BOZP náleží za výkon činnosti dle této smlouvy odměna. Odměna se sjednává ve výši:

BOZP	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH	
Vypracování plánu BOZP	4.000,00 Kč	840,00 Kč	4.840,00 Kč	
Výkon činností za celou dobu realizace Stavby dle čl. II. odst. 2.2. smlouvy 	40.000,00 Kč	8.400,00 Kč	48.400,00 Kč	
Výkon činností za 1 kalendářní den realizace Stavby dle čl. VI. odst. 5	Nesčítat v rámci sloupce
330 Kč	Nesčítat v rámci sloupce
69 Kč	Nesčítat v rámci sloupce
399 Kč	
Výkon činností za prodlouženou lhůtu
41 x 330,00 Kč	13 530,00 Kč	2 841,30 Kč	16 371,30 Kč	
Cena celkem 	57 530,00 Kč	12 081,30 Kč	69	611,30 Kč	

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2.	Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž koordinátor BOZP obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
4.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Ve Frýdku-Místku dne              			V Třinci dne 

za objednatele						za koordinátora BOZP

_________________________	                     ____________________________		
Ing. Peter Mikulenka					Ing. David Hoďa	                                                    
vedoucí investičního odboru				jednatel společnosti