DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. S/0527/2020/IO 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany-------------------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem:	 		Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: 	Petr Korč, primátor
IČ: 				00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel.:  				558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:	
xxxxxx, vedoucí IO, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxx, technik IO, xxxxxxxxxx, xxxxx

▪	dále jen objednatel 
 a

Ateliér Velehradský, s.r.o.
se sídlem: 			Libušino údolí 76, 623 00 Brno
adresa provozovny: 		Výstaviště 1, Poštovní přihrádka 2, 603 00, Brno
zastoupena: 			Ing. arch. Tomáš Velehradský, jednatel
IČ: 				29263140
DIČ: 				CZ29263140
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C 69046
č. účtu: 			xxxxxxx, xxxxxxxxx/xxxxxxxxx
tel: 				xxxxxxxxxx
e-mail: 				xxxxxx

▪	dále jen zhotovitel
▪	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce Národního domu a bývalého objektu Moravia banky – zpracování PD“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0527/2020/IO ze dne 20. 10. 2020 následujícího rozsahu:
1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PLNĚNÍ se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
1. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavce: 
c) dodatečné služby – dopracování studie ND+MOBA o zpracování studii s názvem „Přístavba multifunkčního sálu k Národnímu domu“ - ověřovací studie + investiční záměr“, vypracovaná AI–

DESIGN, s.r.o., se sídlem Anenské náměstí 211/2, 110 00 Praha, IČ 26122812 v roce 2018 a dokoordinování a projednání případných kolizních míst. 

V rámci zpracování studie byl postupně blíže konkretizován provozní model ND jako souboru staveb ND+MOBA. Tento model nebyl znám v době zpracování studie s názvem „Přístavba multifunkčního sálu k Národnímu domu“ - ověřovací studie + investiční záměr“ (dále jen STUDIE Přístavby ND), vypracované společností AI–DESIGN, s.r.o., se sídlem Anenské náměstí 211/2, 110 00 Praha, IČ 26122812 v roce 2018. Nový požadavek na přímé zahrnutí objektu Nové scény (NS) znamená revizi vzájemných provozních vazeb zasahující do obou studií, koordinaci obou záměrů a jejich zapracování do sjednocující studie. Zhotovitel vyzve společnost AI–DESIGN, s.r.o. k součinnosti a bude koordinovat spolupráci za účelem dosažení komplexní studie sjednocující všechny tři klíčové objekty (ND, MOBA, NS).

d) optimalizace celkových investičních nákladů souborů staveb. 
Zadavatel požaduje znovu projít jednotlivé provozní celky a vyhodnotit rozsah plánovaných úprav s ohledem na celkové investiční náklady souboru staveb ND+MOBA+NS. Cílem je nalezení rovnováhy získané hodnoty a přijatelných investičních nákladů. Studie navrhne v koncepční rovině členění, které umožní projekčně i následně stavebnětechnicky realizovat výstavbu v závislosti na ekonomické a finanční situaci města uceleně, tj. na základě jednotného projektu, resp. i více projektů, avšak vzájemně zkoordinovaných, které umožní realizaci po dílčích výstavbových etapách.

1.2. Původní článek 3. DOBA, MÍSTO A DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ se v bodě 2 a) upravuje:
2.    Dílo bude prováděno postupně v následujících dílčích plněních:
     a) STUDIE - do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy;

1.3. Původní článek 5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se upravuje:
Cena za plnění dle čl. 2 smlouvy a dodatku se sjednává v Kč ve výši:
a)	
STUDIE	
DÍLČÍ VÝKONY/CENA	bez DPH	DPH %	včetně DPH	
výškopisné a polohopisné zaměření řešených objektů	127,800.00 Kč	26,838.00 Kč	154,638.00 Kč	
zpracování STUDIE v požadovaných variantách včetně inženýrské činnosti – objekt Národní dům (ND)	415,350.00 Kč	87,223.50 Kč	502,573.50 Kč	
zpracování STUDIE v požadovaných variantách včetně inženýrské činnosti – objekt MORAVIA BANKA (MOBA)	415,350.00 Kč	87,223.50 Kč	502,573.50 Kč	
DODATEČNÉ SLUŽBY - DOPRACOVÁNÍ STUDIE ND+MOBA  O ZPRACOVANOU STUDII PŘÍSTAVBY ND, VČETNĚ KOORDINACE STUDIÍ  	600,000.00Kč	126,000.00 Kč	726,000.00 Kč	
CENA ZA STUDII DLE DODATKU Č.1 CELKEM	1.558,500.00 Kč	327,285.00 Kč	1,885,785.00 Kč	

b)	
DOPRAVNÍ STUDIE	
DÍLČÍ VÝKONY/CENA	bez DPH	DPH %	včetně DPH	
Dopravní studie	447,300.00 Kč	93,933.00 Kč	541,233.00 Kč	
CENA ZA STUDII CELKEM	447,300.00 Kč	93,933.00 Kč	541,233.00 Kč	

c)	
DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ	
DÍLČÍ VÝKONY/CENA	bez DPH	DPH %	včetně DPH	
Geologický průzkum	38,340.00 Kč	8,051.40 Kč	46,391.40 Kč	
Hydrogeologický průzkum	19,170.00 Kč	4,025.70 Kč	23,195.70 Kč	
Radonový průzkum	9,585.00 Kč	2,012.85 Kč	11,597.85 Kč	
Dendrologický průzkum	15,975.00 Kč	3,354.75 Kč	19,329.75 Kč	
Ornitologický průzkum	4,473.00 Kč	939.33 Kč	5,412.33 Kč	
Hluková studie (součást DÚR)	22,365.00 Kč	4,696.65 Kč	27,061.65 Kč	
Vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), včetně inženýrské činnosti	976,392.00 Kč	205,042.32 Kč	1,181,434.32 Kč	
CENA ZA DÚR CELKEM	1,086,300.00 Kč	228,123.00 Kč	1,314,423.00 Kč	

d)	
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (DSP)	
DÍLČÍ VÝKONY/CENA	bez DPH	DPH %	včetně DPH	
Plán BOZP (součást dokumentace pro stavební povolení)	9,585.00 Kč	2,012.85 Kč	11,597.85 Kč	
PENB (součást dokumentace pro stavební povolení)	15,975.00 Kč	3,354.75 Kč	19,329.75 Kč	
zpracování dokumentace pro stavební řízení (DSP), včetně inženýrské činnosti	1,571,940.00 Kč	330,107.40 Kč	1,902,047.40 Kč	
CENA ZA DSP CELKEM	1,597,500.00 Kč	335,475.00 Kč	1,932,975.00 Kč	

e)	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
DÍLČÍ VÝKONY/CENA	bez DPH	DPH %	včetně DPH	
Vyhotovení dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně dokumentace ZOV	1,917,000.00 Kč	402,570.00 Kč	2,319,570.00 Kč	
Projektová dokumentace interiérů	383,400.00 Kč	80,514.00 Kč	463,914.00 Kč	
CENA ZA DPS CELKEM	2,300,400.00 Kč	483,084.00 Kč	2,783,484.00 Kč	

f)	
VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU	
DÍLČÍ VÝKONY/CENA	bez DPH	DPH %	včetně DPH	
Autorský dozor jednotková cena
(1 h výkonu AD bez DPH/hod)	750.00 Kč	157.50 Kč	907.50 Kč	

g)	
CELKOVÁ CENA	
DÍLČÍ STUPNĚ	bez DPH	DPH %	včetně DPH	
STUDIE	1558,500.00 Kč	327,285.00 Kč	1,885,785.00 Kč	
CELKOVÉ NAVÝŠENÍ CENY DLE DODATKU Č.1 ČINÍ 	600,000.00Kč
(nesčítat v rámci sloupce)	126,000.00 Kč
(nesčítat v rámci sloupce)	726,000.00 Kč
(nesčítat v rámci sloupce)	
DOPRAVNÍ STUDIE	447,300.00 Kč	93,933.00 Kč	541,233.00 Kč	
DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ	1,086,300.00 Kč	228,123.00 Kč	1,314,423.00 Kč	
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	1,597,500.00 Kč	335,475.00 Kč	1,932,975.00 Kč	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	2,300,400.00 Kč	483,084.00 Kč	2,783,484.00 Kč	
CELKOVÁ CENA	6,990,000.00 Kč	1,467,900.00 Kč	8,457,900.00 Kč	

Součet dodatečných prací dle dodatku činí 9,39 % původní ceny díla.  

1.3.	Přípustnost změn
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací činí 9,39 % oproti sjednané ceně díla, tedy je v zákonném přípustném limitu do 10 % oproti původní hodnotě závazku. 
Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 1.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 85. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 24.8.2021.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku podle tohoto ujednání.

Příloha č. 1 – Rekapitulace provedených změn 

Za objednatele:						      Za zhotovitele:

____________________			       _________________
Petr Korč			       Ing. arch. Tomáš Velehradský 
primátor			       jednatel