DODATEK Č. 5

SMLOUVY O DÍLO Č. S/0449/2020/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxx/ xxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxx – stavební technik
tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxx 

-	dále jen objednatel

a

MORYS s. r. o. 
se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem
                   na základě plné moci ze dne 21. 12. 2020 
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 1504
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx/ xxxxxxxxxx
ID datové schránky: 2tcnqr9
tel/e-mail: xxxxxxxxxx/ xxxxxxx
zástupce ve věcech technických: 
xxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 5 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111“ následujícího znění a obsahu.

1.	Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 05.08.2020 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111“.

1.1.	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce, ke kterým došlo z objektivních důvodů dle skutečnostem vzniklým během realizace díla a objednatel, ačkoli jednal s náležitou péčí, nemohl tyto skutečnosti předvídat:

a1)  Před vybouráním stěny pro provedení průchodu/propojení z budovy 111 do budovy 112 ve 4. NP bylo nutné realizovat přemístění stávajícího rozvaděče, který byl v místě budoucího průchodu. Práce spočívaly v přemístění tohoto rozvaděče včetně navazující elektrokabeláže. Tyto práce nebyly součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr, ale jejich provedení bylo nezbytné.
a2)  Úprava stávajícího napojení internetové přípojky budov knihovny 111 a 112 byla nutná pro finální provedení fasády a soklu budovy 111. Stávající internetová nadzemní kabelová přípojka byla původně ukotvena na ocelovém sloupku na střeše objektu. Během provádění stavebních prací byla montážně převěšena a v rámci dokončovacích prací na fasádě objektu byla upravena finální trasa skrz fasádu a suterén objektu. Tyto práce nebyly součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr.
a3) V rámci kompletace systému PZTS (poplachový zabezpečovací tísňový systém) byly doplněny 3 ks tísňových tlačítek pro případné bezpečnostní krizové situace s napojením na PCO (pult civilní ochrany) a to včetně nezbytné kabeláže, pospojování a komunikace.  Tyto práce a dodávky nebyly součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr.
a4) V rámci dohledu nad zabezpečením knihovny je na policii ČR nezbytné dodaní grafické (vizuální) nástavby na pult civilní ochrany, a to pro přesnější zmapovaní krizové bezpečnostní situace objektu knihovny. Tato dodávka nebyla součástí projektové dokumentaci ani výkazu výměr.
Dodatečné náklady jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 15.
b)	Jedná se o změnu ve vizuálním označení budovy knihovny, vzhledem k požadavkům uživatele na snadnější (bezúdržbové) provedení oproti PD. Projektovaný fasádní banner byl nahrazen nápisem přímo na fasádě objektu, dle grafického návrhu architekta. Vzhledem k skutečnosti, že se jedná o veřejnou budovu byla dále dohodnuta instalace 2 ks držáků na vlajky. Držáky jsou v provedení třížerďovém.
Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 16.
c)	Jedná se o úpravu typu zábradlí vzhledem k dořešení detailu kotvení zábradlí na vnitřní konstrukci atiky, ve vztahu k hydroizolační vrstvě střešního pláště, klempířských detailů oplechování atiky a k celkové vizuální a provozní (údržby) stránce venkovní terasy. Oproti PD je původní prosklené zábradlí nahrazeno tyčovým zábradlím ve stejném provedení jako zábradlí vstupu a rampy.
Dále byla upravena i stínící markýza terasy z projektované zavěšené stínící rolety na samostatně stojící dvojici markýz na ocelové konstrukci. Změna typu a druhu stínící techniky byla vyvolaná potřebami projektované rolety, které v daném umístění nemohly být splněny (sklon rolety vůči slunci, kotvení v rozích terasy/atiky, kotvení do podstřešní konstrukce věnce). Nově je navržena dvojice výsuvných markýz, které jsou uchycené do samostatně stojící ocelové konstrukce. Ocelová konstrukce je přikotvena do obvodové stěny (věnce) a stropu terasy. Veškeré takto navržené terasy lze bezpečně zaizolovat, utěsnit a zaručit pevné kotvení do nosných železobetonových konstrukcí objektu.
Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 17.
d)	Jedná se o opravu povrchu stávajících mezipodest, které jsou z přírodního teraca mezi 1. až 3.NP tak, aby byl zachován jejich původní historizující vzhled. V projektové dokumentaci bylo uvažováno s nášlapnou vrstvou z PVC. Z důvodu sjednocení a zachování architektonické celistvosti schodiště bylo dohodnuto doplnění teraca rovněž na vstupní mezipodestě 1.NP a 4.NP. Barevně je teraco navrženo v souladu s původním barevným řešením a nově sanovanému kamennému schodišti. Nově je také do této změny zahrnuta i dodávka keramického soklu, která nebyla součásti projektové dokumentace ani výkazu výměr.
Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 18.
e)	Jedná se o nutnou úpravu nosné konstrukce rastru požárního podhledu ve 3.NP, vzhledem k nemožnosti se standartně kotvit do ŽB kce stropu. Stávající strop je tvořen dutinovými betonovými stropními panely, které jsou uloženy do již zesílených stropních ocelových nosníků. V těchto PZD panelech však nelze bezpečně zakotvit standartní nosná táhla podhledů, a proto byla navržená nová konstrukce podhledu tvořená nosnými ocelovými prvky UA. 
Dodatečné náklady jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 19.
f)	Jedná se o úpravu výkazu výměr dle skutečného typu (druhu) stávajících konstrukcí původního parkoviště ve dvorní části. Stávající povrch komunikace je tvořen vyspádovanou vyztuženou betonovou deskou v tl. 200mm. V projektové dokumentaci se předpokládalo s pouze s výskytem hutněných podsypů. Bourání betonové desky je však technicky obtížnější a nákladnější. Celkový objem bouraných betonových konstrukcí je 58,2 m3.
Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 20.
g)	Jedná se o specifikaci dohodnutých a neprováděných prací na objektu knihovny. V projektové dokumentaci bylo uvažováno s úpravou vnitřních okenních ostění v podobě podlepení z polystyrénových desek. Zhotovitel však provedl jejich vyrovnání klasickými zednickými vysprávkami. V 1.PP nebylo nutné provádět spojovací můstky z reprofilovaných betonů. S ohledem na technologii osazení obkladů schodiště nebude nutné provádět vyrovnávací stěrku.
Neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 21.
h)	Jedná se o požadovanou úpravu typu sklepních oken z dřevěných na plastové. Materiálová změna, by měla zajistit vyšší životnost oken ve vztahu s jejich umístěním do sklepa a jejich odolností vůči soli a provozu na okolní komunikaci. Dále je před tyto okna požadována i ochranná mříž proti vniknutí hlodavců. Tato nebyla součástí dokumentace ani výkazu výměr.
Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 22.

1.2.	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 5 se sjednává v Kč celkem ve výši:
Cena sjednaná ve smlouvě o dílo	37 351 587,30 Kč bez DPH,
tj. 45 195 420,63 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	376 031,61 bez DPH,
tj. 454 998,25 vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 3 495,76 Kč bez DPH,
tj. - 4 229,87  Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 1	37 724 123,15 Kč bez DPH,
tj. 45 646 189,01 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2	2 110 217,60 bez DPH,
tj. 2 553 363,30 vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	- 1 585 026,20 Kč bez DPH,
tj. - 1 917 881,70  Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 2	38 249 614,55 Kč bez DPH,
tj. 46 281 670,61 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3	1 453 633,46 bez DPH,
tj. 1 758 896,49 vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3	- 1 222 849,14 Kč bez DPH,
tj. - 1 479 647,46  Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 3	38 480 098,87 Kč bez DPH,
tj. 46 560 919,64 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4	599 331,44 Kč bez DPH,
tj. 725 191,04 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 4	- 147 402,43 Kč bez DPH,
tj. - 178 356,94 Kč  Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 4	38 932 027,88 Kč bez DPH,
tj. 47 107 753,74 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 5	911 888,70 Kč bez DPH,
tj. 1 103 385,33 Kč  vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 5	- 740 558,41 Kč bez DPH,
tj. - 896 075,68  Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 5	39 103 358,17 Kč bez DPH,
tj. 47 315 063,39 Kč vč. DPH	

1.3.	Přípustnost změn
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č.5 naplňují podmínky ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Dle dodatku č. 5 naplňují dodatečné práce a neprováděné práce:
a)	dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ*, a to v rozsahu dle změnových listů č. 17, 19, 20 a 21 , když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 3,50%, tedy je v zákonném přípustném limitu 50% oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny -0,06 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. 
* Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, 
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
Je skutečností, že podkladovou projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) zpracovala autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jako odborně způsobilá osoba, které přísluší vykonávat tuto tzv. vybranou činnost ve výstavbě ve smyslu § 156 odst. 1, odst. 2 písm. h) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.  Uvedeným způsobem zadavatel vyhověl veřejnoprávním předpisům a taktéž požadavkům na obsah zadávací dokumentaci pro stavební práce ve smyslu § 92 zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ ve spojení s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Projektová dokumentace představuje pokyn zadavatele ve smyslu ust. § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve vztahu ke zhotoviteli, podle kterého se má řídit a stavbu provést. V souladu se smlouvou a tímto ustanovením § 2594 upozornil zhotovitel na nevhodné řešení stavebních prací s návrhem změn, a to postupem, jak předvídá smlouva. 

b)	dílem režim přípustné změny deminimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ**, a to v rozsahu dle změnových listů č. 15, 16. 18 a 22, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelem vymíněných dodatečných 
a neprováděných prací prací činí 0,92 %,  tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla,  
** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatků č. 1 až 5 v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací představuje 1,84 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatků č. 1 až 5 v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací představuje 18,16 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50% oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 3,69 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.
Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 2.

Dle dodatků č. 1 až 5 celková cena dodatečných stavebních prací (cena více prací) činí 5 451 102,81 Kč bez DPH, což představuje 14,59 % z ceny dle smlouvy.
Dle dodatků č. 1 až 5 celková cena neprováděných prací (cena méně prací) činí - 3 699 331,94 Kč bez DPH, což představuje 9,90 % z ceny dle smlouvy.
Po započtení neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 4,69 %.

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 5, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 88. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 12. 10. 2021.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 5 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 5 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 5 podle tohoto ujednání.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Rekapitulace změnvých listů
Příloha č. 2 – Změnový list č. 15
Příloha č. 3 – Změnový list č. 16
Příloha č. 4 – Změnový list č. 17
Příloha č. 5 – Změnový list č. 18
Příloha č. 6 – Změnový list č. 19
Příloha č. 7 – Změnový list č. 20
Příloha č. 8 – Změnový list č. 21 
Příloha č. 9 – Změnový list č. 22
Příloha č. 10 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne…………………….                             	V Ostravě, dne……………………..

_________________________				_________________________
Petr Korč							Ing. Jiří Šmidák
primátor                                                                          výkonný ředitel