číslo smlouvy objednatele: S/0666/2019/IO	           číslo smlouvy zhotovitele IMOS: 201903401/0428/19/VHSaDS
					           číslo smlouvy zhotovitele VHS stavby a.s.: 596/2019

DODATEK č. 5
Smlouvy o dílo č.  S/0666/2019/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: 	Petr Korč, primátor
IČ:  				00296643
DIČ: 				CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu:	xxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxx
ID datové schránky:		w4wbu9s
tel. 				558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxxx /email: xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx /email: xxxxxxxxxxx 

-	dále jen objednatel

a 

společníci společnosti označované názvem „Společnost pro Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“

Vedoucí společník a správce společnosti – IMOS Brno a.s.
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, ve věci předmětného zadávacího řízení oprávněn jednat p. Dušan Stříž, vedoucí oddělení nabídek, na základě Pověření ze dne 15. 10. 2018
IČ: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl B vložka 2211
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxx, č.ú.: xxxxxx
ID datové schránky: 562eh6n
Kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx, ředitel Závodu Brno - VHS a DS
tel: xxxxxxx, / email: xxxxxxxxxx 
a

Společník - VHS stavby a.s.
se sídlem Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov
zastoupena Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva a Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva
IČ: 251 83 052
DIČ: CZ25183052
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl B vložka 4147

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. S/0666/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 2 – kanalizace Chlebovice následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0666/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 2 – kanalizace Chlebovice.

1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:
-	v provedení devatenácti veřejných částí kanalizačních přípojek nad rámec projektové dokumentace;
-	v navrtávce dvou prefabrikovaných betonových kanalizačních šachtic pro možnost dopojení dvou kanalizačních přípojek a možnost změny výšky napojení kanalizační stoky;
-	v provedení trvalého odvedení spodních vod z prostoru kolem čerpací stanice ČS1.
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 2/8-26, 22, 23 a 24, viz příloha č. 1 dodatku.

1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 5 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK	
 Původní cena díla	67 573 198,84	14 190 371,76	81 763 570,60	
 Cena dle dodatku č. 1	68 224 175,21	14 327 076,80 	82 551 252,01	
 Cena dle dodatku č. 2	74 819 359,09	15 712 065,41	90 531 424,50	
 Cena dle dodatku č. 3	84 738 151,13	17 795 011,74	102 533 162,87	
 Cena dle dodatku č. 4	85 222 497,89	17 896 724,56	103 119 222,45	
Cena neprováděných prací
dle Dodatku č. 5	- 0,00	-0,00	- 0,00	
Cena dodatečných prací
dle Dodatku č. 5	694 150,49	145 771,60	839 922,09	
Celkové navýšení ceny  
dle Dodatku č. 5	694 150,49	145 771,60	839 922,09	
Cena díla dle Dodatku č. 5	85 916 648,38	18 042 496,16	103 959 144,54	

Součet veškerých dodatečných prací činí 36,13 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 27,15 %.

1.3.	Přípustnost změn
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy  naplňují  režim přípustné změny podle  § 222 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), tím, že:

Dodatečné práce vyžádané objednatelem dle změnových listů č. 2/8-26 naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tzv. přípustnou změnu deminimis, když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací činí 0,91 % oproti sjednané ceně díla, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla.
Dodatečné práce dle změnových listů č. 22. 23 a 24 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 5 v rozsahu neprováděných a dodatečných prací dle změnových listů č. 22, 23 a 24 činí 78 249,90 Kč bez DPH, což představuje 0,12 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 5 v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací představuje 1,17 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 5 v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací představuje 42,01 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 26,06 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení  
a objednatel 2 vyhotovení.

5.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 93. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 14.12.2021.

Přílohy:
příloha č. 1 – Změnové listy č. 2/8-26, 22, 23 a 24
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 
    Za objednatele:		Za zhotovitele:

   _________________________		__________________________
    Petr Korč					za IMOS Brno, a.s.
    primátor                                             	Ing. Robert Suchánek 
						předseda představenstva

						__________________________
    						za VHS stavby, a.s.
    	                                           		Ing. Robert Suchánek
						předseda představenstva IMOS Brno a.s.
                                                                       na základě plné moci