DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO Č. S/0149/2021/IO
č. zhotovitele 09-0144a21

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx/ xxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
				xxxxxxxxx, vedoucí IO
tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxx 

-	dále jen objednatel

a

Porr a.s.
se sídlem Dubečská  3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupena:
                  Stanislavem Faranou, na základě plné moci
                  Ing. Romanem Kašparem, na základě plné moci
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl B vložka 1006 
č. účtu: xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx/ xxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxx
fax: ----
e-mail: xxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Úprava cyklostezky v oblasti Olešná, ulice Kvapilova“ následujícího znění a obsahu.

1.	Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 10.03.2021 na stavební práce pod názvem „Úprava cyklostezky v oblasti Olešná, ulice Kvapilova“.

1.1.	Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné práce, ke kterým došlo z objektivních důvodů, kdy byly provedné práce oceněny v souladu se smlouvou o dílo dle skutečného rozsahu provedení.

1.2.	Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo	5 117 313,75 Kč bez DPH,
tj. 6 191 949,64 Kč vč. DPH	
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	83 161,03 bez DPH,
tj. 100 624,85 vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 16 400,20 Kč bez DPH,
tj. - 19 844,24 Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 1	5 184 074,58 Kč bez DPH,
tj. 6 272 730,24 Kč vč. DPH	
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	- 14 938,14 Kč bez DPH,
tj. - 18 075,15 Kč vč. DPH	
Cena díla dle Dodatku č. 2	5 169 136,44 Kč bez DPH,
tj. 6 254 655,09 Kč vč. DPH	

1.3.	Přípustnost změn
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 2 naplňují podmínky ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Dle dodatku č. 2 naplňují neprováděné práce režim přípustné změny deminimis dle § 222 odst. 3 ZZVZ, a to v rozsahu dle změnového listu č. 2, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelem neprováděných prací prací činí 0,29 %. 

Neprováděné stavební práce dle změnového listu č. 2 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které byly závislé na skutečnosti, tj. shora neprováděné práce byly oceněny jednotkovými cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení, tzn. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo.

** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 2.

Dle dodatků č. 1 a 2 celková cena dodatečných stavebních prací (cena více prací) činí 83 161,03 Kč bez DPH, což představuje 1,62 % z ceny dle smlouvy.
Dle dodatků č. 1 a 2 celková cena neprováděných prací (cena méně prací) činí  - 31 338,34 Kč bez DPH, což představuje 0,61 % z ceny dle smlouvy.
Po započtení neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 1,01 %.

2.	Závěrečná ustanovení

1.	Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 93. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 14. 12. 2021.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Rekapitulace ZL a změnový list č. 2
Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne…………………….                             	V Ostravě, dne……………………..

_________________________				_________________________
Petr Korč							 Stanislav Farana
primátor                                                               		 na základě plné moci

								_________________________								Ing. Roman Kašpar
                                                              			na základě plné moci