číslo smlouvy objednatele: S/0665/2019/IO			číslo smlouvy zhotovitele: DZA 19010625/Ve

DODATEK č. 10
Smlouvy o dílo č.  S/0665/2019/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx/ xxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx – pověřená vedením investičního odboru
tel: xxxxxxx / email: xxxxxxxxx
Ing. xxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxx /email: xxxxxxxx 
xxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxx /email: xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx /email: xxxxxxxxxx 

-	dále jen objednatel

a 

Metrostav a.s.
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci
IČ: 00014915
DIČ: CZ0014915
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx / xxxxxxxxx
ID datové schránky: bnpcf46
Kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Severomoravský region, divize 1

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 k veřejné zakázce „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice.

1.1	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:
-	v opravách zpevněných ploch
-	ve změně trasy stoky D

Předmět se plnění upravuje o neprováděné práce spočívající:
-	odpočtu položek při změnách způsobu realizace stavby
 
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 10a, 16a, 23, 29 viz příloha č. 2 dodatku č. 10. 

1.2	Původní článek 9 Vady díla, záruka v odst. 1. se mění, upravuje a doplňuje následovně:

Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to: 
a) na stavební část díla v délce 60 měsíců od předání dokončeného díla dle smlouvy;
b) na technologickou část díla, tj. na dodávky strojů, zařízení 36 měsíců; 
c) na předměty postupné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku v délce shodné se zárukou    poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že na úpravu asfaltových povrchů na komunikacích mimo rýhu specifikovaných ve ZL č. 23, vzhledem k její skladbě komunikace pod asfaltovým krytem, nebude zhotovitelem poskytována záruka za jakost.  

1.3	Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 10 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK	
 Původní cena díla	116 262 176,71	24 415 057,11	140 677 233,82	
 Celková cena dle dodatku č. 1	116 617 885,88	24 489 756,04	141 107 641,92	
 Celková cena dle dodatku č. 2	118 062 793,92	24 793 186,73	142 855 980,65	
 Celková cena dle dodatku č. 3	120 809 624,72	25 370 021,20	146 179 645,92	
 Celková cena dle dodatku č. 4	132 978 719,75	27 925 531,16	160 904 250,91	
 Celková cena dle dodatku č. 5	132 978 719,75	27 925 531,16	160 904 250,91	
 Celková cena dle dodatku č. 6	134 564 309,33	28 258 504,97	162 822 814,30	
 Celková cena dle dodatku č. 7	139 287 739,35	29 250 425,27	168 538 164,62	
 Celková cena dle dodatku č. 8	143 666 632,53	30 169 992,84	173 836 625, 37   	
 Celková cena dle dodatku č. 9	151 089 598,55	31 728 815,70	182 818 414,25   	
 Neprováděné stavební práce 
 dle dodatku č. 10	- 837 874,96 	
-175 953,74
	– 1 013 828,70 	
 Dodatečné stavební práce 
 dle dodatku č. 10	5 412 564,48 	
1 136 638,50
	6 549 203,02	
 Celkové navýšení ceny 
 dle dodatku č. 10	4 574 689,52 	
960 684,80
	5 535 374,32 	
 Celková cena 
 dle dodatku č. 10	155 664 288,07	
32 689 500,48
	188 353 788,57   	

Součet veškerých dodatečných prací činí 45,90 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 33,89 %.

1.4	Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Dle dodatku č. 10 naplňují dodatečné práce a neprováděné práce:
a)	dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ*, a to v rozsahu dle změnových listů č. 29, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 0,05 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50% oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 0,05 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. 
* Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, 
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

b)	dílem režim přípustné změny deminimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ**, a to v rozsahu dle změnového listu č. 10a, 16a a 23, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelem vymíněných dodatečných a neprováděných prací činí 5,33 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla,  
** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací dle dodatků č. 1 až 10 představuje 9,02 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací dle dodatků č. 1 až 10 představuje 40,59 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 27,49 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.
Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 33,89 %.
Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 1 dodatku.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení  
a objednatel 2 vyhotovení.

5.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 102. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 05. 04. 2022.

Přílohy smlouvy:
příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn 
příloha č. 2 – Změnové listy č. 10a, 16a, 23, 29

    
   Za objednatele:			                            Za zhotovitele:

    _________________________			       __________________________
    Petr Korč			                                      Ing. Václav Apolín
    primátor                                                                 ředitel divize 1, Metrostav a.s.