číslo smlouvy objednatele: S/0665/2019/IO			číslo smlouvy zhotovitele: DZA 19010625/Ve

DODATEK č. 11
Smlouvy o dílo č.  S/0665/2019/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxx/ xxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx – pověřená vedením investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxx
xxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxx /email: xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx /emailxxxxxxxxx 
xxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxx /email: xxxxxxxxxxx 

-	dále jen objednatel

a 

Metrostav a.s.
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci
IČ: 00014915
DIČ: CZ0014915
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx / xxxxxxx, xxxxxx
ID datové schránky: bnpcf46
Kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx, ředitel oblasti Severomoravský region, divize 1

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo č. S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 k veřejné zakázce „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice.

1.1	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:
-	v opravách zpevněných ploch
-	v nových přípojkách nad rámec projektové dokumentace

Předmět se plnění upravuje o neprováděné práce spočívající:
-	odpočtu položek při změnách způsobu realizace stavby
 
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 25a, 26, 50, viz příloha č. 2 dodatku č. 11. 

1.2	Původní článek 9 Vady díla, záruka v odst. 1. se mění, upravuje a doplňuje následovně:

Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to: 
a) na stavební část díla v délce 60 měsíců od předání dokončeného díla dle smlouvy;
b) na technologickou část díla, tj. na dodávky strojů, zařízení 36 měsíců; 
c) na předměty postupné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku v délce shodné se zárukou    poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že na úpravu asfaltových povrchů na komunikacích mimo rýhu specifikovaných ve ZL č. 26, vzhledem k její skladbě komunikace pod asfaltovým krytem, nebude zhotovitelem poskytována záruka za jakost.  

1.3	Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 11 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK	
 Původní cena díla	116 262 176,71	24 415 057,11	140 677 233,82	
 Celková cena dle dodatku č. 1	116 617 885,88	24 489 756,04	141 107 641,92	
 Celková cena dle dodatku č. 2	118 062 793,92	24 793 186,73	142 855 980,65	
 Celková cena dle dodatku č. 3	120 809 624,72	25 370 021,20	146 179 645,92	
 Celková cena dle dodatku č. 4	132 978 719,75	27 925 531,16	160 904 250,91	
 Celková cena dle dodatku č. 5	132 978 719,75	27 925 531,16	160 904 250,91	
 Celková cena dle dodatku č. 6	134 564 309,33	28 258 504,97	162 822 814,30	
 Celková cena dle dodatku č. 7	139 287 739,35	29 250 425,27	168 538 164,62	
 Celková cena dle dodatku č. 8	143 666 632,53	30 169 992,84	173 836 625, 37   	
 Celková cena dle dodatku č. 9	151 089 598,55	31 728 815,70	182 818 414,25   	
 Celková cena dle dodatku č. 10	155 664 288,07	32 689 500,48	188 353 788,55   	
 Neprováděné stavební práce 
 dle dodatku č. 11	- 457 653,80 	
-96 107,30
	– 553 761,10 	
 Dodatečné stavební práce 
 dle dodatku č. 11	3 446 811,52 	
723 830,42
	4 170 641,94	
 Celkové navýšení ceny 
 dle dodatku č. 11	2 989 157,72 	
627 723,12
	3 616 880,84 	
 Celková cena 
 dle dodatku č. 11	158 653 445,79	
33 317 223,64
	191 970 669,41   	

Součet veškerých dodatečných prací činí 48,86 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 36,46 %.

1.4	Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Dle dodatku č. 10 naplňují dodatečné práce a neprováděné práce:
a)	dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ*, a to v rozsahu dle změnových listů č. 50, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 0,03 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50% oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 0,03 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. 
* Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, 
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

b)	dílem režim přípustné změny deminimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ**, a to v rozsahu dle změnového listu č. 25a, 26, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelem vymíněných dodatečných a neprováděných prací činí 3,33 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla,  
** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací dle dodatků č. 1 až 11 představuje 12,34 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací dle dodatků č. 1 až 11 představuje 40,62 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 27,52 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.
Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 36,46 %.
Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 1 dodatku.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení  
a objednatel 2 vyhotovení.

5.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 105. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 17. 05. 2022.

6.	Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

Přílohy smlouvy:
příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn 
příloha č. 2 – Změnové listy č. 25a, 26, 50

    
   Za objednatele:			                                       Za zhotovitele:

    _________________________			                 __________________________
    Petr Korč			                                                 Ing. Václav Apolín
    primátor                                                                            ředitel divize 1, Metrostav a.s.