DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. S/0527/2020/IO 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany------------------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel.  558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:	
xxxxxxxx, pověřená vedením IO, xxxxxxxxx / xxxxxxxxx
xxxxxxxxx, technik IO,  xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

▪	dále jen objednatel 
 a

Ateliér Velehradský, s.r.o.
se sídlem Libušino údolí 76, 623 00  Brno
adresa provozovny Výstaviště 1, Poštovní přihrádka 2, 603 00, Brno
zastoupena Ing. arch. Tomáš Velehradský, jednatel
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C 69046
č. účtu: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx/xxxxxxxx
tel: xxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxx

▪	dále jen zhotovitel
▪	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce Národního domu a bývalého objektu Moravia banky – zpracování PD“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1
PŘEDMĚT DODATKU
1.	Smlouva o dílo č. S/0527/2020/IO byla uzavřena za účelem zpracování komplexní projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce Národního domu a bývalého objektu Moravia banky“ ve stupních studie využitelnosti objektu, studie dopravní v řešeném území, dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně výkonu autorského dozoru.

2.	Vzhledem ke skutečnosti, že:
a)	Dodatkem č. 1 byl předmět plnění rozšířen ve stupni studie o Přístavbu multifunkčního sálu k Národnímu domu v režimu přípustné změny smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ;
b)	Objednatel nemůže o Přístavbu multifunkčního sálu k Národnímu domu rozšířit rozsah plnění i ve stupních DÚR, DSP DPS, aniž by porušil pravidla pro přípustnou změnu závazku dle § 222 ZZVZ, 
c)	na základě ujednání v článku 9 smlouvy si objednatel vyhradil právo odstoupit od smlouvy po ukončení kterékoli ucelené části díla,
ukončují strany smlouvu o dílo vzájemnou dohodou a vypořádávají vzájemné nároky z doposud provedených prací a služeb.
3.	Smluvní strany sjednávají, že uzavřením tohoto dodatku jsou vypořádány veškeré vzájemné závazky ze smlouvy o dílo.

článek 2
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1.	Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
2.	Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 105. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 17.05.2022. 
3.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto ujednání.
4.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Za objednatele:		Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne __________		V _____________ dne___________ 

_____________________________		____________________________
Petr Korč 		Ing. arch. Tomáš Velehradský
primátor		jednatel