DODATEK č. 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx/ xxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxx – stavební technik
tel.: xxxxxxx/email: xxxx
xxxxxxxxxxx – stavební technik
                                           tel.: xxxxxxxxxx/ email: xxxxxxx
-	dále jen objednatel 

a

MORYS s. r. o. 
se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem - na základě plné moci
IČ: 42864771 
DIČ: CZ42864771
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 1504
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxx / xxxxxx
ID datové schránky: 2tcnqr9 
zástupce ve věcech smluvních:
				Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
zástupce ve věcech technických:
xxxxxxxxx, xxxxxxx 
tel: xxxxxxx / email: xxxxxxxxxx 
-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0251/2021/IO ze dne 18. 05. 2021 a následujícího rozsahu:
1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

1.1	Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:
v části objektu určenému SDH
-	v zazdívce otvoru a dodávce okna namísto nerealizovaných sklobetonových tvárnic;
-	v obezdívkách nutných pro instalace zdravotechniky (přizdívky ŽB konstrukcí) a elektroinstalace (obezdívky sloupů);
-	ve vyzdívkách ztužení pilířů mezi vraty garáže pro zajištění dodatečné stability mezivratových pilířů;
-	v dodatečném opláštění vnějších ocelových podhledových konstrukcí přístaveb v úrovni stropu nad 1.NP pro provedení venkovní fasády;
v části objektu bytové jednotky
-	v provedení sádrokartonových podhledů (SDK) celé ploše bytu, které budou zakrývat rozvody UT, ZTI a elektroinstalace vedené pod stropní konstrukcí; 
v části objektu určenému SDH po revizi projektové dokumentace a požadavků SDH 
-	v doplnění silnoproudých rozvodů, doplnění osvětlení v garážových stáních a ochranného pospojování v 1.NP - 3.NP;
-	v silnoproudé přípojce stávajícího „zahradního“ domku včetně jeho vnitřní elektroinstalace;
-	v doplnění přívodu pro průmyslovou pračku se sušičkou na záchranářské obleky SDH;
-	v napojení sirény SDH;, 
-	v doplnění elektroinstalace podlahových zásuvkových krabic m.č.202 dle požadavků SDH;
-	v doplnění elektroinstalace - kabelové trasy pro venkovní čidlo teploty systému UT (dle požadavku DISTEP);
-	ve změně poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) spočívající v doplnění systému o bezkontaktní čipy, úpravy zón kódování s ohledem na provoz HZ a samostatného bytu, v dořešení vazeb na revidovaný svolávací a poplachový systém (SPS) a MaR;
-	ve změně v oblasti místního rozhlasu (MR) spočívající v doplnění rozhlasu o reproduktory a místní zvukovou korekci a doplnění vazeb na revidovaný SPS;
-	v doplnění společné televizní antény (STA) o anténu a příslušnou kabeláž;
-	v doplnění strukturovaných kabeláží (SK) o požadované datové zásuvky v garáži a doplnění vazeb na revidovaný SPS;
-	v doplnění domácího telefonu (DT) o dveřní elektro zámky s ohledem na revidovaný systém PZTS;
-	v odpočtu aktivní části SPS Fireport pro záměnu za RCS Kladno dle požadavků SDH. 

1.2	Předmět plnění se upravuje o neprováděné práce spočívající:
-	v nerealizaci sklobetonových výplní otvorů; 
-	v nerealizací omítek stropu v celé ploše bytu;
-	v nerealizaci silnoproudé elektroniky v místě nerealizovaného 1.PP;
-	v nerealizaci aktivní části svolávacího a poplachového systému (SPS) firmy Fireport – uvedeno v PD (bude nahrazeno systémem RCS Kladno dle požadavku SDH).
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 11, 12, 13 a 14 viz příloha č. 1. 

2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Bez DPH	DPH %	včetně DPH	
 Původní cena díla	51 074 644,84 Kč	10 725 675,42 Kč	61 800 320,26 Kč	
Cena dle Dodatku č. 1	50 372 454,03	10 578 215,35	60 950 669,38	
Cena dle Dodatku č. 2	59 276 895,17 	12 448 147,99	71 725 043,16 	
 Neprováděné stavební práce 
 dle Dodatku č. 3	- 190 884,87 	- 40 085,82	- 230 970,69	
 Dodatečné stavební práce 
 dle Dodatku č. 3	606 125,65	127 286,39	733 412,04	
 Celkové navýšení ceny 
 dle Dodatku č. 3	415 240,78	87 200,56	502 441,34	
Celková cena celkem dle Dodatku č. 3	59 692 135,95	12 535 348,55	72 227 484,50	

Dle dodatku č. 3 součet veškerých dodatečných prací po započtení neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní celkové ceně dle smlouvy 16,87 %.

1.4. Přípustnost změn:
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:
a)	dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ*, a to v rozsahu dle změnových listů č. 11, 13 a 14, když se z technických důvodů jedná o nezbytné dodatečné práce navazující na stávající práce a hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje oproti původní hodnotě závazku (sjednané ceně díla) změnu ve výši  1,34 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50% oproti původní sjednané ceně díla a po odečtení souvisejích neprováděných pracích dle § 222 odst. 9 ZZVZ nepřevyšují limit 30% původní hodnoty závazku. 

* Dle § 222 odst. 5 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
 a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

b)	dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ*, a to v rozsahu dle změnového listu č. 12, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje oproti původní hodnotě závazku (sjednané ceně díla) změnu ve výši 0,22 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50% oproti původní sjednané ceně díla a a po odečtení souvisejích neprováděných pracích dle § 222 odst. 9 ZZVZ nepřevyšují limit 30% původní hodnoty závazku. 

* Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, 
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 2.

2. Ostatmí ujednání
1.	Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 3. zůstávají beze změny v celém rozsahu.
2.	Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení, strany smlouvy budou číslovány.
3.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 112. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 30. 08. 2022.
4.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento Dodatek č. 3 způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření.
5.	Dodatek č. 3 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
6.	Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 3 včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. 
7.	Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Za objednatele:		Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne…………..                                          V Ostravě, dne …………………….

_______________________					__________________________
Petr Korč						           Ing. Jiří Šmidák
primátor							výkonný ředitel
						                      na základě plné moci

Přílohy smlouvy:
příloha č. 1 – Změnové listy č. 11, 12, 13 a 14
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn