DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO S/0335/2017/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
tel.  558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxx, technik IO, xxxxxxxxxx /xxxxxxx
xxxxxxxxxxx, technik IO, xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx

•	dále jen objednatel 

a

obchodní firma 	Sweco Hydroprojekt a.s. 
se sídlem 	Táborská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa); 
divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (korespondenční adresa)
zastoupena 	představenstvem společnosti, ve složení:
Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva,
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
IČ: 			26475081
DIČ: 			CZ26475081
zapsána v OR 	vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl B, 
			vložka 7326
Č. účtu: 		xxxxxxxxxx/xxxxx
Tel: 			xxxxxxxxxx
Fax: 			+420 541 214 973
E-mail: 		xxxxxxxxxx
kontaktní a odpovědná osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxx
tel.: xxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, 
e-mail: xxxxxxxxxx

•	dále jen zhotovitel
•	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 4:

I.
Předmět dodatku č. 4

1.	Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0335/2017/IO ze dne 12.6.2017  na veřejnou zakázku s názvem „Odkanalizování částí města Frýdku-Místku:
a.	Aktualizace stávajících projektů
b.	Dokumentace kanalizačních přípojek
c.	Dokumentace splaškové kanalizace ul. Na Bažinách“

2.	Původní článek  2. Předmět a rozsah plnění se v odstavci 2. doplňuje takto:

2.4	ČÁST D – Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 
Předmětem plnění části D. je zpracování projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby, a to samostatně pro dokončené stavby
a)	Kanalizace Frýdek-Místek – Skalice
b)	Odkanalizování oblastí povodí Olešné – kanalizace obce Chlebovice

2.4.1	Projektová činnost bude zahrnovat
a)	Zpracování výkresové části projektové dokumentace, která bude vycházet z dokumentace skutečného provedení stavby a z geodetického zaměření skutečného provedení stavby
b)	Porovnání a soutisk skutečného provedení stavby s dokumetací pro stavební povolení
c)	Reprografické práce – vyhotovení 4 paré dokumentace

2.4.2	Inženýrská činnost
Inženýrská činnost tj. projednání s vlastníky dotčených nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí není předmětem plnění

3.	Původní článek 4. Doba, místo a další podmínky plnění se v odstavci 1. doplňuje  takto:

1.4	Část D – Dokumentace pro dodatečné povolení stavby
a)	Projektová dokumentace pro stavbu „Kanalizace Frýdek-Místek – Skalice“ bude dokončena do 30.11.2022
b)	Projektová dokumentace pro stavbu „Odkanalizování oblastí povodí Olešné – kanalizace obce Chlebovice“ bude dokončena do 31.10.2022
4.	Původní článek 4. Cena a platební podmínky se mění takto: 

Cena díla dle dodatku č. 4 se sjednává následovně:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH	
ČÁST A – Aktualizace stávajících projektů	
Kanalizace Frýdek-Místek – Skalice	450 000,- Kč	94 500,- Kč	544 500,- Kč	
Dodatečné práce pro kanalizaci Skalice  dle dodatku č. 1	143 000,- Kč	30 030,- Kč	173 030,- Kč	
Odkanalizování oblastí povodí Olešné - kanalizace obce Chlebovice Frýdek - Místek	480 000,- Kč	100 800,- Kč	580 800,- Kč	
Dodatečné práce pro kanalizaci Chlebovice dle dodatku č. 1	172 000,- Kč	36 120,- Kč	208 120,- Kč	
Odkanalizování oblastí povodí Olešné místních částí Zelinkovice a Lysůvky	430 000,- Kč	90 300,- Kč	520 300,- Kč	
Dodatečné práce pro kanalizaci Zelinkovice – Lysůvky dle dodatku č. 1	35 000,- Kč	7 350,- Kč	42 350,- Kč	
Cena celkem za část A	1 710 000,- Kč	359 100,- Kč	2 069 100,- Kč	
ČÁST B – Dokumentace kanalizačních přípojek	
I. kategorie – gravitační přípojky a tlakové přípojky bez rozlišení délky, v trase přípojky pozemky veřejné (vlastník MS kraj, SMFM či přilehlé obce) a pozemky majitele připojované nemovitosti	450 000,- Kč	94 500,- Kč	544 500,- Kč	
II. kategorie – gravitační i tlakové přípojky bez rozlišení délky s komplikovanými majetkoprávními vztahy v trase přípojky (kromě vlastníka připojované nemovitosti, další vlastníci dotčených pozemků).	350 000,- Kč	73 500,- Kč	423 500,- Kč	
Nevyfakturovaná částka za nižší počet PD oproti původnímu předpokladu 	- 37 486,- Kč	- 7 872,06 Kč	-45 358,06 Kč	
Dodatečné kanalizační přípojky I. a II. kategorie v předpokládaném počtu 72 ks 	78 901,- Kč	16 569,21 Kč	95 470,21 Kč	
Cena celkem za část B	841 415,- Kč	176 697,15 Kč	1 018 112,15 Kč	
ČÁST C – Dokumentace splaškové kanalizace ul. Na Bažinách 	
Vyhotovení DUR, včetně inženýrské činnosti	580 000,- Kč	121 800,- Kč	701 800,- Kč	
Cena celkem za část C	580 000,- Kč	121 800,- Kč	701 800,- Kč	
ČÁST D – dokumentace pro dodatečné povolení stavby	
Kanalizace Frýdek-Místek – Skalice	530 000,- Kč	111 300,- Kč	641 300,- Kč	
Odkanalizování oblastí povodí Olešné - kanalizace obce Chlebovice	320 000,- Kč	67 200,- Kč	387 200,- Kč	
Cena celkem za část D	850 000,- Kč	178 500,- Kč	1 028 500,00 Kč	
Cena celkem za části A, B, C, D	3 981 415,00 Kč	836 097,15 Kč	4 817 512,15 Kč	

Hodnota dodatečných prací dle dodatku č. 4 činí navýšení o 22,43 % oproti původní ceně dle smlouvy o dílo. Při započtení neprováděných prací činí zvýšení ceny díla oproti SoD o 21,44%.

II.
  Závěrečná ujednání
1.	Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních; jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

2.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

3.	Objednatel jako povinná osoba uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení 
§ 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění tento dodatek č. 3 nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření v registru smluv. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle tohoto ujednání, uveřejnění dodatku smlouvy provede v souladu s citovaným zákonem objednatel.

4.	Dodatek č. 4 je uzavřen na základě rozhodnutí 114. schůze Rady města Frýdku-Místku 
ze dne 20.09. 2022.

5.	Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

     Za objednatele:			Za zhotovitele:

     Ve Frýdku-Místku, dne 			V  Praze dne 

    ________________________			__________________________
            Petr Korč, primátor                              

    
                                                                                       __________________________