DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0597/2022/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: 	Petr Korč, primátor
IČ:  				00296643
DIČ: 				CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: 	xxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 		w4wbu9s
tel.: 				558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx – xxxxxxxx
tel: xxxxxxxxx / e-mail: xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxx /e-mail: xxxxxxxxxxxx

•	dále jen objednatel
a

S-O-D Holding,   spol. s r.o.
se sídlem Polesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné
za kterou právně jedná: 	František Doležal, jednatel
IČ:				26830272
DIČ: 				CZ26830272
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka číslo 40026
bankovní spojení/číslo účtu: 	xxxxxxxxxx/xxxxxxxx
zástupce ve věcech smluvních:
xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxx
zástupce ve věcech technických:
xxxxxxxx, tel.: xxxxxxx, email: xxxxxxxxx
                  
•	dále jen zhotovitel

•	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění a obsahu dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Výměna oken Žirafa – IC FM“ (dále jen dodatek).

1.	Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0597/2022/IO ze dne 22.9.2022 k veřejné zakázce „Výměna oken Žirafa – IC FM“.

1.1	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprovedené práce v rozsahu změnového listu č. 1, který obnáší změnu provedení vnitřních parapetů v pobytových místnostech klientů s ohledem na demontáž a montáž bezpečnostních krytů otopných těles a rozvodů k nim vedoucích. 

1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA BEZ dph	DPH 21 %	Cena včetně DPH	
Cena dle SoD	7 777 888,00 Kč	1 633 356,48 Kč	9 411 244,48  Kč	
Dodatečné práce 
dle dodatku č. 1	193 984,05 Kč	40 736,65 Kč	234 720,70 Kč	
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	 - 38 202,50 Kč	- 8 022,53	- 46 225,03 Kč	
Cena díla dle dodatku č. 1	7 933 669,55 Kč	1 666 070,60 Kč	9 599 740,15 Kč	

1.3.	Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), tím, že:
Dle dodatku č. 1 naplňují dodatečné práce:
a)	režim přípustné změny deminimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ**, a to v rozsahu dle změnového listu č. 1, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelem vymíněných dodatečných prací činí 2,99 %,  tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně díla,  

** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací představuje 2,99% z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.
Po započtení veškerých dodatečných změn činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 
2,0 %.
Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz. příloha č. 2 k důvodové zprávě.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 5. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 13.12.2022.

5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 1
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:		          Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku                                                             V Petřvaldu u Karviné

_______________________		                                  _______________________
        Petr Korč                                                                          František Doležal
        primátor                                                                           jednatel