DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0234/2023/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxx/ xxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx – xxxxxxx
tel: xxxxxxxx / e-mail: xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx – xxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxx/e-mail: xxxxxxx
xxxxx  – xxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxx/e-mail: xxxxxxx 
-	dále jen objednatel 
a

DEV COMPANY, spol. s r.o.
se sídlem: Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem
IČ: 47679620
DIČ: CZ47679620
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 4298
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx, č. ú. xxxx
ID datové schránky: muhpf5v
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Marek Vavrečka, jednatel
zástupce ve věcech technickýchxxxxxxxxxx 
tel: xxxxxxxxxxx / email: xxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/0234/2023/IO ze dne 30.03.2023 k veřejné zakázce „Hydroizolace spodní stavby – ZŠ
F-M Lískovec 320 – I. etapa“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

1.  Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0234/2023/IO ze dne 30.03.2023 k veřejné zakázce „Hydroizolace spodní stavby – ZŠ 
F-M Lískovec 320 – I. etapa“.

1.1.	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnového listu č. 2, které obnášejí soupis prací včetně výkazu výměr pro záměnu technologie dodatečné hydroizolace a doplnění plošné injektáže místností S18, S24 a S25, popsané v soupisu změnového listu.

1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA BEZ dph	DPH 21 %	Cena včetně DPH	
Cena dle SoD	6 809 871,58 Kč	1 430 073,03 Kč	8 239 944,61 Kč	
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	88 678,55 Kč	18 622,50 Kč	107 301,05 Kč	
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	-116 132,90 Kč	-24 387,91 Kč	-140 520,81 Kč	
Celkové snížení ceny dle dodatku č. 1	-27 454,35 Kč	-5 765,41 Kč	-33 219,76 Kč	
Cena díla dle dodatku   č. 1	6 782 417,23 Kč	1 424 307,62 Kč	8 206 724,85 Kč	
Dodatečné práce 
dle dodatku č. 2	272 357,16 Kč	57 195,00 Kč	329 552,16 Kč	
Neprováděné práce 
dle dodatku č. 2	 -308 344,80 Kč	 -64 752,41 Kč	-373 097,21 Kč	
Celkové snížení ceny dle dodatku č. 2	 -35 987,64 Kč	 -7 557,41 Kč	 -43 545,05 Kč	
Cena dle dodatku č. 2	6 746 429,59 Kč	1 416 750,21 Kč	8 163 179,80 Kč	

1.3.	Přípustnost změn
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ* ve spojení s ust. § 222 odst. 9 v rozsahu změnového listu č. 2, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací po odečtení souvisejích neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí -0,53 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní sjednané ceně díla.
* § 222 odst. 6 ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterém zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
** § 222 odst. 9 ZZVZ - Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

Přípustnost veškerých dodatečných a neprováděných prací dle dodatků č. 1 a 2 dle § 222 odst. 6 a 9 ZZVZ činí -0,53 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní sjednané ceně díla.

Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací dle dodatku č. 1 činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě -0,01 %.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 22. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 22.08.2023.

5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 2
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku        					V Ostravě
                                                      
_______________________		                                 __________________________
Petr Korč                                                                          Ing. Marek Vavrečka
primátor                                                                           jednatel