DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0374/2023/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 

Statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
Statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
e-mail/tel.: xxxxxxx, tel: xxxxx

-	dále jen objednatel 
a

BENEPRO, a.s.
se sídlem: Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín
zastoupena: Ing. Romanem Hlauškem, členem představenstva
IČ: 26820781
DIČ: CZ26820781
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl B, vložka 3317
Č. účtu: xxxxxxx/xxxxx
Tel: xxxxxxx, xxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
			
-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0374/2023/IO ze dne 06.06. 2023 k veřejné zakázce „Zpracování PD – sanace zdiva budovy Hospic Frýdek-Místek, p.o.“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0374/2023/IO ze dne 06.06.2023 k veřejné zakázce „Zpracování PD – sanace zdiva budovy Hospic Frýdek-Místek, p.o.“.

1.1	Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné projekční práce pro rozšíření sanačních opatření o venkovní odvodnění systémem drenáží kolem objektu, změnu některých zpevněných ploch ze zámkové dlažby na asfaltové povrchy a doplnění odvodňovacích žlabů na jižní straně budovy B. Na základě dodatečně provedeného kamerového monitoringu kanalizace bude v dokumentaci pro provedení stavby rovněž zapracována výměna potrubí části stoky splaškové kanalizace v dvorní 

části objektu.

1.2     Původní článek 4. Cena a platební podmínky se upravuje:
2. Cena plnění ve znění Dodatku č. 1 je členěna následovně:

	CENA DÍLA BEZ dph	DPH 21 %	Cena včetně DPH	
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 	189 000,00 Kč	39 690,00 Kč	228 690,00 Kč	
Autorský dozor jednotková cena (1 hod. AD)	Nesčítat v rámci sloupce
590,- Kč	Nesčítat v rámci sloupce
123,90 Kč	Nesčítat v rámci sloupce
713,90 Kč	
Autorský dozor celková cena (součin jednotkové ceny a celkového počtu hodin)	29 500,00 Kč	6 195,00 Kč	35 695,00 Kč	
Cena celkem dle SOD	218 500,00 Kč	45 885,00 Kč	264 385,00 Kč	
Dodatečné práce dle Dodatku č. 1	56 000,00 Kč	11 760,00 Kč	67 760,00 Kč	
Cena dle Dodatku č. 1	274 500,00 Kč	57 645,00 Kč	332 145,00 Kč	

1.2	Původní článek 3.1. Doba, místo a další podmínky plnění se upravuje:

1.	Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění do 50 dnů od účinnosti tohoto dodatku č. 1 SOD.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 34. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 16. 01. 2024.

5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Příloha:
Cenová nabídka ze dne 11. 08. 2023

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku                                                              V Českém Těšíně

_______________________		                                 _____________________        
Petr Korč                                                                          Ing. Roman Hlaušek	
primátor                                                                           člen představenstva