DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0736/2023/OSOM

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxx/ xxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxx – xxxxxxxx
tel: xxxxxx / e-mail: xxxxxx 
xxxxxxxxxx – xxxxx
tel.: xxxxx/e-mail: xxxxx
xxxxxx  – xxxxx 
Tel: xxxxxx/e-mail: xxxxxxxx 
-	dále jen objednatel 
a

SUBSTAV Invest s. r.o.
se sídlem: Antonínov 636, 739 44 Brušperk
zastoupena: Luďkem Šubertem , Davidem Šubertem, jednateli
IČ: 27797554
DIČ: CZ27797554
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 29969
bankovní spojení/číslo účtu: xxxx / xxxx
ID datové schránky: kmxcukb
zástupce ve věcech technických: xxxxxxx, xxxx
tel: xxxxx / email: xxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0736/2023/OSOM ze dne 19.01.2024 k veřejné zakázce „Výměna oken a oprava fasády domu ul. Těšínská 1166“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

1.  Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0736/2023/OSOM ze dne 19.01.2024 k veřejné zakázce „Výměna oken a oprava fasády domu ul. Těšínská 1166“.

1.1.	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnových listů č. 1 – 3, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy. Bližší specifikace je uvedena v položkových  soupisech dodatečných a neprováděných prací (změnových rozpočtech), které jsou přílohou změnových listů.  

1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA 
BEZ dph	DPH 12 %	Cena včetně DPH	
Cena dle SoD	5 704 320,66 Kč	684 518,47 Kč	6 388 839,13 Kč	
Dodatečné práce 
dle dodatku č. 1	2 386 301,01 Kč	286 356,12 Kč	2 672 657,13 Kč	
Neprováděné práce 
dle dodatku č. 1	-1 016 839,40 Kč 	-122 020,72 Kč	-1 138 860,12 Kč	
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 1	1 369 461,61 Kč	164 335,40 Kč	1 533 797,01 Kč	
Cena dle dodatku č. 1	
7 073 782,27 Kč 
	848 853,87 Kč	
7 922 636,14 Kč 

1.3.	Původní článek DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ, odst.2 se upravuje takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 150 dnů od předání a převzetí staveniště a v této lhůtě jej jako dokončené předat objednateli.

1.4.	Přípustnost změn
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují: 

a)	dílem režim přípustné změny deminimis podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, a to v rozsahu změnového listu č. 3, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelem vymíněných dodatečných a neprováděných prací činí 11,21 %,  tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně díla; 

b)	dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 9  v rozsahu změnových listů č. 1 a 2, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací po odečtení souvisejích neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí 20,47% a je tedy v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní sjednané ceně díla. 

c)	dílem vyhrazené změny závazku dle § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 100 odst. 1 ZZVZ a ujednáním článku 3 odst. 10 smlouvy o dílo.

Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací dle dodatku č. 1 činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 24,00 %.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 46. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 25. 06. 2024.

5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnové listy č. 1-3
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku        					V Brušperku
                                                      
_______________________		                                 __________________________
Petr Korč                                                                          Luděk Šubert, David Šubert
primátor                                                                           jednatelé