DODATEK č. 1 
Ke Smlouvě o dílo č. S/0303/2024/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč – primátor
IČ:  00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel.  558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:	
xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx/xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxx,  xxxxxxx/xxxxxxx

•	dále jen objednatel 

a

Enroll consulting s.r.o.
se sídlem Dolní Líštná 12, 739 61 Třinec
zastoupena Ingrid Staszkovou, jednatelem
IČ: 25841874
DIČ: CZ25841874
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka
21149
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxx/xxxxxx
ID datové schránky: tyc4az6
zástupce ve věcech smluvních: Ingrid Staszková. jednatel společnosti, tel.: xxxxxxxxx
email: xxxxxxxx
zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxx 088
email: xxxxxxxx

•	dále jen zhotovitel
•	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „ZŠ F-M,
El. Krásnohorské 2254 – školní kuchyně – II. etapa – rekonstrukce podlahy“
následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

1.	Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0303/2024/IO ze dne 11. 04. 2024 následujícího rozsahu:

1.1.	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

a)	Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

-	v obroušení povrchů dlažby a v provedení nových souvrství podlahové stěrky,
-	v osazení nových podlahových žlabů,
-	ve změně tvaru podlahových žlabů,
-	v provedení podlahové stěrky v zázemí kuchyně,
-	v provedení povrchových úprav stávajících topných těles.

b)	Předmět plnění se upravuje o neprováděné práce spočívající:
-	v neprovedení bouracích prací podkladních betonových konstrukcí podlahy,
-	v odečtu neprováděných podlahových žlabů, 
-	v odečtu neprováděných prací dle soupisu vedlejších rozpočtových nákladů.

Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 1 viz příloha č. 1 tohoto dodatku. 

1.2.	Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č.  se sjednává v Kč celkem ve výši:
	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK	
 Původní cena díla	2.869.330,87	602.559,48	3.471.890,35	
 Neprováděné stavební práce 
 dle dodatku č. 1	- 784 441,51	- 164 732,72	- 949 174,23	
 Dodatečné stavební práce 
 dle dodatku č. 1	588 337,21	123 550,81	711 888,02	
 Celkové snížení ceny dle                 
 dodatku č. 1	    - 196 104,30	   - 41 181,90	- 237 286,20	
 Celková cena dle dodatku č. 1 	2 673 226,57	561 377,58	3 234 604,15	

Součet veškerých dodatečných prací po započtení neprováděných prací sjednaných v dodatku č. 1 smlouvy představuje snížení o 5,96 % oproti původní celkové ceně dle smlouvy.

1.3. Přípustnost změn
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:
a)	dílem dodatečné a neprováděné práce vyžádané objednatelem dle změnového listu č. 1 naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tzv. přípustnou změnu de minimis, když hodnotay závazku v důsledku dodatečných prací činí 12,44 % oproti sjednané ceně díla, tedy je v zákonném přípustném limitu (v součtu všech dodatků ke smlouvě o dílo) do 15% oproti původně sjednané ceně díla a nemění celkovou povahu závazku, neboť hodnota změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu dodatečných prací dle změnového listu č. 1 činí 165 938,28 Kč bez DPH a v rozsahu neprováděných prací dle změnpvého listu č. 1 činí mínus 191 000,00  Kč bez DPH.; 
b)	dílem dodatečné práce a neprováděné práce dle změnového listu č. 1 rovněž naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tzn., že 

zadavatel postupoval dle zpracované projektové dokumentace, nicméně až samotnou realizací stavebních prací se projevila fakticky reálný stav skladby betonových souvrství skrytých pod dlažbou kuchyně, z čehož vyplynul nezbytný rozsah dodatečných a neprováděných prací, jak je popsáno ve změnovém listu, přičemž tyto dodatečné/neprováděné stavební práce, resp. postupy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť: 
-	hodnota změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu neprováděných prací dle změnového listu č. 1 činí   mínus 593 441,51 Kč bez DPH Kč,      
  
-	hodnota změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dle dodatku č. 1 v rozsahu dodatečných prací dle změnového listu č. 1 činí 422 398,93 Kč bez DPH, což:

Celková hodnota doposud sjednaných neprováděných a prováděných prací ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ dle dodatku č. 1 činí oproti původní ceně díla po odečtení souvisejících neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ 5,96 % oproti sjednané ceně díla, tedy je v zákonném přípustném limitu do 30 % původní hodnoty závazku, tj. původní sjednané ceny díla dle smlouvy.

2.	Závěrečná ujednání
1.	Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.

2.	Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád. 

3.	Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
 
4.	Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 49. schůze Rady statutárního města Frýdku-Místku konané dne 12.08.2024.

5.	Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

6.	Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 1 včetně příloh a bude zveřejněn na profilu zadavatele. 

7.	Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 1
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele							Za zhotovitele:

    _________________________			__________________________
               Petr Korč						Ingrid Staszková
                primátor				      jednatel společnosti Enroll consulting s.r.o.