DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0572/2024/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxx/ xxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxx – xxxxx
tel.: xxxx/e-mail: xxxxxx
 
-	dále jen objednatel 
a

Ristorispetto s r.o.
se sídlem: U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně
zastoupena: Boris Finkral, jednatel
IČ: 05321719
DIČ: CZ05321719
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 67094
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxx/xxxxx
ID datové schránky: 
zástupce ve věcech smluvních: xxxxxxx
zástupce ve věcech technických: xxxxxx
tel: xxxx / email: xxxxxxxxxxx

-	dále jen zhotovitel

-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/0572/2024/IO ze dne 04.09.2024 k veřejné zakázce „T. G. Masaryka č.p. 2319-2322 – stavební úpravy, provedení hydroizolace a opravy kanalizace“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

1.  Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0572/2024/IO ze dne 04.09.2024 k veřejné zakázce „T. G. Masaryka č.p. 2319-2322 – stavební úpravy, provedení hydroizolace a opravy kanalizace“.

1.1.	Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje v odstavci 1. a) o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnového listu č. 02, který obsahuje soupis prací včetně výkazu výměr pro následující práce a dodávky. Dodatečné práce a dodávky představují:
-	komplexní likvidaci a manipulaci s monolitickými betonovými a železobetonovými zbytkovými konstrukcemi různých tvarů a mocností zjištěnými v podkladních vrstvách pod stávajícími zpevněnými plochami i pod zatravněným povrchem. Tyto konstrukce byly v kolizi nejen se sdruženou kanalizační přípojkou v jejím převažujícím půdorysném a hloubkovém rozsahu, ale také s navrženými vsakovacími boxy a výkopy nutnými pro provádění oprav stávající hydroizolace
-	zapravení stávající šachtice u domu s č.p. 2319, jejíž stav byl zjištěn jako havarijní (šachtice sloužila kdysi pro shoz uhlí a manipulaci s materiálem k navazující kotelně v 1.PP), tzn. její částečné ubourání, zásyp frakcí a zazdění souvisejícího podávacího otvoru provozně spojeného s kotelnou
-	dodávka a montáž nových lapačů střešních splavenin u všech stávajících dešťových svodů řešených bytových domů, kdy stávající lapače střešních splavenin byly zjištěny jako zcela ucpané a tím funkčně nevyhovující.
Neprováděné práce a dodávky zahrnují:
-	zkrácení úseku kanalizace S2-S5, kdy byla při stavebních pracích v odchylce vůči projektové dokumentaci zjištěna absence odpovídajících napojovaných větví domovní přípojky, které PD původně předpokládala.
-	Výsadba 1 ks borovice, která bude odborně vysazena společností Technické služby, a.s. pod odborným dozorem zástupce odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek

1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA BEZ dph	DPH 12 %	Cena včetně DPH	
Cena dle SoD	5 481 019,54 Kč	657 722,34 Kč	6 138 741,88 Kč	
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 1	238 706,36 Kč	28 644,76 Kč	267 351,12 Kč	
Cena díla dle dodatku   č. 1	5 719 725,90 Kč	686 367,12 Kč	6 406 093,00 Kč	
Dodatečné práce dle dodatku č. 2	945 606,25 Kč	113 472,75 Kč	1 059 079,00 Kč	
Neprováděné práce dle dodatku č. 2	-42 886,80 Kč	5 146,42 Kč	- 48 033,22 Kč	
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 2	902 719,45 Kč	108 326,33Kč	1 011 045,78 Kč	
Cena díla dle dodatku   č. 2	6 622 445,35 Kč	794 693,44 Kč	7 417 138,78 Kč	

1.3.	Přípustnost změn
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny v rozsahu předloženého změnového listu č. 02:
a)	dílem podle § 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis)*, a to v rozsahu vymíněných neprováděných dodávek - Dodávka a výsadba 1 ks borovice, když oproti původní sjednané ceně díla činí 0,33 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně díla;
b)	dílem podle § 222 odst. 6 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 9**, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací po odečtení souvisejích neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ je v zákonném přípustném limitu do 30 %, když oproti původní sjednané ceně díla činí 21,16 %.

*§ 222 odst. 4 ZZVZ – Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
 a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 b) nižší než
15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

** § 222 odst. 6 ZZVZ – Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterém zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
§ 222 odst. 9 ZZVZ – Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací dle dodatků č. 1 a 2 činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 20,82 %.

2.	Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 60. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 3.12.2024.

5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 02
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku        					Ve Frýdku-Místku
                                                      
_______________________		                                 __________________________
Petr Korč                                                                          Boris Finkral
primátor                                                                           jednatel