DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0454/2024/ODaSH
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxx/ xxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxx – xxxxxxxx 
xxxxxxxx – xxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxx/ tel: xxxxxx
-	dále jen objednatel
a
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.  
se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
IČ: 45193118
DIČ: CZ45193118
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl B, vložka 471
č. účtu: xxxxxx/xxxxx
tel: xxxxxxx
fax: ---
e-mail: xxxxxx
-	dále jen zhotovitel
-	objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0454/2024/ODaSH k veřejné zakázce „Rekonstrukce propustku P-18 – k.ú. Skalice u Frýdku-Místku“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).
1.	Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0454/2024/ODaSH ze dne 27.06.2024 k veřejné zakázce „Rekonstrukce propustku P-18 – k.ú. Skalice u Frýdku-Místku“ z důvodu navýšení rozsahu potřebných stavebních prací vůči rozsahu stanoveném projektovou dokumentací.
1.1	Článek 2., Předmět smlouvy, bod 1 se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět díla se upravuje o dodatečné práce v rozsahu změnového listu č. 1, které obnášejí soupis prací včetně výkazu výměr pro provedení větší výměry zpevněných ploch a snížení délky potřebného potrubí, popsané v soupisu změnového listu.

1.2	    Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA BEZ dph	DPH 21 %	Cena včetně DPH	
Cena dle SoD	2.146.545,00 Kč	450.774,45 Kč	2.597.319,45 Kč	
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	109.536,28 Kč	23.002,62 Kč	132.538,90 Kč	
Méněpráce dle dodatku č. 1	-15.600,00 Kč	-3.276,00 Kč	-18.876,00 Kč	
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 1	93.936,28 Kč	19.726,62 Kč	113.662,90 Kč	
Cena díla dle dodatku   č. 1	2.240.481,28 Kč	470.501,07 Kč	2.710.982,35 Kč	

1.3	     Přípustnost změn
Změna smlouvy dle Dodatku č. 1 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to dodatečné práce včetně termínu dokončení dokumentace ve stupni DSP režim přípustné změny dle § 222 odst. 1 ZZVZ*, a to v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele – příloha tohoto Dodatku.
*Dle ust. § 222 odst. 1 ZZVZ platí, že zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení zadávacího řízení; to neplatí v případě změn, u nichž jsou splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení stanovenou tímto zákonem. Je-li taková výjimka omezena pro podlimitní veřejnou zakázku, veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo koncesi malého rozsahu, lze ji pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku použít pouze tehdy, pokud celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit podle
 a) § 25, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku,
 b) § 27, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo
 c) § 178, jde-li o koncesi malého rozsahu.
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 1 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu všech doposud dodatečných prací představuje částku 93.936,28 Kč bez DPH (4,38 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje limit pro zakázku malého rozsahu dle § 222 odst. 1 písm. b) ZZVZ dle ust. § 27 ZZVZ.

2.	Závěrečná ujednání
1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2.	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3.	Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4.	Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 60. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 03. 12. 2024.
5.	Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 1
příloha č. 2 – Položkový rozpočet – vyčíslení změn 

Za objednatele:			Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku			Ve Frýdku-Místku

_____________________________			__________________________
Petr Korč			Ing. Jan Bazgier          
primátor                                                                           předseda představenstva